РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-249511/22-110-1861

г. Москва

03 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 03 марта  2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА" (190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА, 1, ОГРН: 1027810328721) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕДИНВЕСТ" (111250, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ УЛ., Д. 24, ПОДВ. ПОМ.IV,КОМ.7,ОФ.55, ОГРН: 1217700310277) о взыскании 2 884 280 руб.,

 

при участии:

от истца –  Сенина  Е.А. по дов.  от  11.01.2023,

от ответчика-Капкина  Н.Д. ,  гендиректор, 

 

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕДИНВЕСТ" о взыскании 2 800 000 руб. задолженности по договору №А1-01-1133 от 01.10.2021, 84 280 руб. неустойки.

Ответчик иск не оспорил.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 01 октября 2021 года между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Балтийский государственный университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова и обществом с ограниченной ответственностью "МЕДИНВЕСТ" был заключен договор №А1-01-1133 на выполнение опытно-конструкторской работы.

В соответствии с п.1.1. договора исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями договора и своевременно сдать заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (ОКР) по теме «Разработка пассивного экзоскелета промышленного назначения на базе экзоскелета REX-S».

Работа выполняется исполнителем в полном соответствии с требованиями ТЗ (приложение №1 к договору).

Полный объем ОКР (этапов ОКР), сроки выполнения и результаты выполнения работ определяются ведомостью исполнения ОКР (приложение №2 к договору).

В соответствии с условиями Договора и Календарным планом (Приложение № 1 к Договору) работы выполняются поэтапно. Первый этап выполнения работ «Технический проект» согласно Календарного плана подлежит выполнению Истцом в течение 3 месяцев со дня заключения договора. Стоимость первого этапа работ составляет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) руб.

Согласно п.6.4 Договора в течение 15 банковских дней после подписания настоящего Договора.

П. 5.3. Договора предусмотрено, что по окончании работ (этапа работ) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ и результаты работ по Договору (этапу работ).

Обязательства Исполнителя по первому этапу Договора выполнены надлежащим образом, в полном объеме и подлежат оплате Заказчиком на основании подписанного Акта сдачи- приемки работ от 31.12.2021, однако Заказчик не выполнил обязательство по перечислению суммы Исполнителю в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.

Согласно ст.769 ГК РФ по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия или новую технологию, а также техническую и (или) конструкторскую документацию на них, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п.9.6 Договора при несоблюдении предусмотренных сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% за каждый день неперечисленной в срок суммы просрочки, но не более просроченной суммы оплаты.

Следовательно,  размер неустойки составляет 84 280 руб. исходя из следующего расчета.1400 000,00 руб. сумма задолженности по авансу (срок оплаты 15 банковских дней со дня подписания Договора с 22.10.2021 г. по 26.09.2022 г.)*0,01 % (неустойка по Договору)* 340 (кол-во дней)=47 600,00 руб.

1 400 000,00 руб. сумма задолженности по акту сдачи приемки (срок оплаты 10 банковских дней со дня подписания Акта сдачи-передачи с 24.01.2022 г. по 12.10.2022 г.)*0,01% (неустойка по договору)* 262 (кол-во дней)=36 680,00 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст. ст.  110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "МЕДИНВЕСТ" (ОГРН: 1217700310277) в пользу  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА" (  ОГРН: 1027810328721) 2 800 000 руб. задолженности,   84 280 руб. неустойки,37 421 руб.   в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

С

Судья:

А.В. Мищенко