АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-18886/2017

г. Владивосток

31 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 31 октября 2017 года.

Арбитражный  суд   Приморского  края  в  составе судьи  Плехановой Н.А,

при  ведении  протокола  секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная и коммерческая компания "Телекорт" (ИНН 

<

***> , ОГРН  

<

***>)

к  акционерному обществу "Дальневосточный завод "Звезда" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 3 271 928 рублей 44 копейки,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 17.07.2017, паспорт, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 25.01.2017, паспорт, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная и коммерческая компания "Телекорт" (далее ООО "Научно-производственная и коммерческая компания "Телекорт", истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к акционерному обществу "Дальневосточный завод "Звезда" (далее АО "Дальневосточный завод "Звезда", ответчик)  о взыскании 3 086 724 рублей 94 копеек основного долга по договору  подряда №ТК-08-15-1294  от 18.08.2015 и 185 203 рублей 50 копеек пени за просрочку оплаты выполненных работ.

В судебном заседании в порядке статьи 163   АПК РФ  объявлялся перерыв до 14 часов 00 минут 24.10.2017, по окончании которого заседание продолжено.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении исковых требований,  мотивировав их нарушением ответчиком денежного обязательства по оплате выполненных  по договору работ.

Ответчик иск оспорил по доводам, изложенным в отзыве, заявил  ходатайства об отложении судебного заседания.

Суд,  рассмотрев в порядке статьи  159 АПК РФ ходатайства ответчика об отложении судебного заседания, счел их неподлежащим удовлетворению как безосновательные ввиду отсутствия объективной необходимости к отложению судебного разбирательства и оснований, предусмотренных статьей 158 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом,  18.08.2015 между ответчиком  (Заказчик) и истцом  (Подрядчик) заключен договор субподряда №ТК-08-15-1294  (далее Договор), по условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными и (или) привлеченными силами разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных  работ  инженерно-технических средств физической защиты (участок 12-17, 42-43 периметра защищённой зоны) объекта: «Реконструкция системы  физической защиты ядерно-опасных объектов ОАО «ДВЗ «Звезда» (далее - Работы), согласно Технического задания (Приложение № 1) и в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ (Приложение 2), и передать результаты Работ Заказчику в порядке, установленном Договором (пункт 1.1. Договора).  

Место выполнения строительно-монтажных работ на территории ОАО «ДВЗ «Звезда», по адресу: 

<

...> (далее объект).

Сторонами согласованы все существенные условия договора.

Стоимость подлежащих выполнению работ составляет 72 400 000 рублей (пункт 5.1. Договора).

В соответствии с пунктами 5.6. и 5.7. Договора  оплата выполненных  строительно-монтажных работ по договору производится заказчиком ежемесячно в размере 95 % от стоимости выполненных и принятых по акту (форма КС-2) работ путем перечисления средств на расчетный счёт подрядчика в течение 10 календарных дней с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного подрядчиком счёта и после получения заказчиком счёта-фактуры с учётом положений пункта 5.7. Договора. Окончательный расчёт за соответствующий этап производится заказчиком не позднее 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форме КС-11) и акта сверки расчётов.

Согласно п.4.2 договора в редакции дополнительного соглашения от 11.12.2015 №3 срок окончания работ - 29.02.2016.

Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком  в соответствии с Календарным планом выполнения работ и оформляется в соответствии с действующими нормативными документами с составлением соответствующих документов: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (пункт 7.2. договора).

Исходя из содержания пунктов 6.8.3., 6.8.4. приемка ответчиком законченного  строительством Объекта осуществляется посредством подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

Подрядчик  выполнил работы,  предусмотренные  договором. 

Ответчик принял выполненные работы, о чём стороны оформили акт приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 № 2 от 15.12.2016  на сумму 72 400 000 рублей.

Для производства окончательного расчёта по договору подряда ответчику был направлен счёт па оплату №5 от 25.01.2017.

Однако ответчик обязательства по оплате выполненных работ исполнил не в полном объеме, задолженность составляет 3 086 724 рубля 94 копейки.

 Поскольку направленная в адрес  ответчика  претензия о наличии долга и с требованием о его погашении, оставлена  подрядчиком без удовлетворения,   истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Заслушав пояснения сторон, исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме в силу следующего.

Между сторонами сложились правоотношения по договору на выполнение подрядных работ, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (подряд) (§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ и § 3. Строительный подряд).

  Согласно статье 758 ГК РФ,  по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

 В соответствии со статьей 740 ГК РФ по   договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

На основании статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

  Обстоятельства выполнения подрядных работ, как и передача их результата подрядчику, подтверждены материалами дела, ответчиком не оспорены, доказательств иного не представлено. 

Судом отклоняется довод ответчика  о том, что  спорные работы и договорная неустойка не подлежат оплате,  поскольку    получено отрицательное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации и инженерным изысканиям, что, в свою очередь, влечет за собой невозможность  ввести в эксплуатацию объект строительства, в силу следующего.

Отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», которое, исходя из позиции ответчика, подтверждает некачественное выполнение работ истцом,  выдано 22.12.2016, ответчик  принял работы в полном объеме и подписал акт приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11   15.12.2016, при этом,  в Акте указано, что проектно-сметная документация утверждена на основании заключения Главгосэкспертизы России и Решением Федерального Агентства по промышленности. 

Заявлений о назначении к проведению судебных экспертиз от ответчика не поступало.

Как разъяснено в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» если экспертиза в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могла быть назначена по ходатайству или с согласия участвующих в деле лиц, однако такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому, риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, арбитражный суд при разрешении спора в соответствии с принципом состязательности и равноправия участников арбитражного судопроизводства исходит исключительно из требований и возражений лиц, участвующих в деле, а также представленных ими доказательств в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Возложение на арбитражный суд бремени поиска и сбора доказательств в обоснование иска противоречит нормам процессуального законодательства.

 Следовательно, в отсутствие ходатайства со стороны ответчика о назначении судебной  экспертизы оснований для ее назначения у суда не имеется.

В связи с тем, что ответчик не воспользовался  правом, предоставленным статьей 82 АПК РФ, суд рассмотрел спор по имеющимся в материалах дела доказательствам.

 Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выполнения работ  с ненадлежащим качеством судом  не установлен, доказательств того, что  ответчик до обращения истца в суд с рассматриваемым иском, обращался к последнему с  претензий в отношении объемов и качества выполненных работ не представлено.

 Таким образом, материалами дела подтверждается факт наличия задолженности ответчика перед истцом в размере 3 086 724 рубля 94 копейки, исковые требования о взыскании основного долга  подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о  взыскании 185 203 рублей пени, начисленной за период с   30.12.2016 по 17.07.2017.

Согласно статье 330 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 10.3.1. договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по оплате выполненных работ   в соответствии со статьей 5 договора, подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ, начиная со следующего дня, когда оплата должна быть произведена, но не более 1 % от цены договора.

Материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по спорному договору, вследствие чего  исполнителем правомерно начислена неустойка (пеня) за просрочку оплаты выполненных  работ.

          Расчет пени судом проверен, признан обоснованным и арифметически верным. Ответчик о  снижении неустойки не заявил.   

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать с  акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная и коммерческая компания "Телекорт" 3 086 724 рубля   94 копейки  основного долга и  185 203 рубля 50 копеек пени, а также   39 360 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья        Плеханова Н.А.