Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-6920/2024

05 февраля 2025 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Косенковой О. А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 694051, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693004, г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 384Б/1) о возложении обязанности по устранению выявленных недостатков по муниципальным контрактам, о взыскании штрафа в размере 65 000 рублей,  

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

изменить наименование истца на Администрацию муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области.  

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» в течение тридцати дней с даты вступления настоящего решения в законную силу устранить выявленные недостатки:  

1. По муниципальному контракту № 0161300006322000535 от 19.12.2022 в квартире № 16 по улице Хабаровская 15 г. Долинск устранить дефект линолеума в виде вздувания на кухне, в спальне, выходящей на запад, в прихожей.  

2. По муниципальному контракт № 0161300006322000522 от 19.12.2022 в квартире № 8 по улице Хабаровская 15 г. Долинск заменить бачок унитаза.  

3. По муниципальному контракту № 0161300006322000605 от 20.12.2022 в квартире № 36 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск заметить 5 стеклопакетов, расположенных на балконе, установить штапики надлежащим образом; отрегулировать межкомнатные двери на кухне, 2 комнаты, туалет, ванная комната.  

4. По муниципальному контракту № 0161300006322000572 в квартире № 62 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск отремонтировать, в случае невозможности, произвести замену электрич. плиты; отрегулировать 4 межкомнатные двери, заметить бачок унитаза, устранить течь обратного клапана на водонагревателе в туалете и в ванной комнате.  

5. По муниципальному контракту № 0161300006322000579 от 19.12.2022 в квартире 37 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск отрегулировать межкомнатные двери в количестве 5 штук; заменить бачок унитаза; устранить течь клапана на водонагревателе в туалете и в ванной комнате; закрепить натяжной потолок в кухне; устранить наличие трещин на балконах между полом и окнами; устранить наличие скола на ванной; устранить отсутствие заземления в туалете, устранить замятие балкона со стороны улицы; произвести шпатлевание стены под балконным окном; устранить трещину на двери балкона, устранить наличие продавливания порога на балконе; произвести работы по запениванию монтажной пеной под наличниками окон; устранить заедание на входной двери ручки и замка.  

6. По муниципальному контракту № 0161300006322000585 от 19.12.2022 в квартире № 33 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск заменить бачок унитаза; устранить протекание стены в комнате, возникающее во время атмосферных осадков; устранить вмятину на балконной двери.  

7. По муниципальному контракту № 0161300006322000543 от 19.12.2022 в квартире № 10 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск устранить течь воды на бачке унитаза в месте соединения с болтом.  

8. По муниципальному контракту № 0161300006322000555 от 19.12.2022 в квартире № 68 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск заменить бачок унитаза; устранить намокание стены в районе вентиляции, в комнате, выходящей на север; устранить наличие вмятины на балконной двери в комнате.  

9. По муниципальному контракту № 0161300006322000557 от 19.12.2022 в  

квартире № 60 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск заменить электрические  

пакетники; устранить течь воды из гофры унитаза; устранить течь из клапана на  

водонагревателе в ванной комнате и кухне, устранить течь на соединении сифона с  

ванной. 

10. По муниципальному контракту № 0161300006322000566 от 19.12.2022 в  

квартире № 13 по улице Хабаровская, д. 156, г. Долинск заменить порог выхода на балкон. 11. По муниципальному контракту № 0161300006322000776 от 30.10.2023 в  

квартире № 41 по улице Хабаровская 15 а, г. Долинск устранить недостаток, в виде  

наличия пустот между откосами и стеной в комнате. 

12. По муниципальному контракту № 0161300006322000771 от 30.10.2023 в  

квартире № 23 по улице Хабаровская 15 А г. Долинск отрегулировать дверь на балкон;  

устранить заедание ручек на 4 окнах; устранить течь с обратного клапана на  

электронагревателе в ванной комнате. 

13. По муниципальному контракту № 0161300006322000167 от 22.05.2023 в  

квартире № 17 по улице Хабаровская 15 а г. Долинск заменить кафельную плиту в ванной  

комнате, на которой имеется скол; устранить течь обратного клапана на электротитане,  

заменить неисправный смеситель в ванной комнате, устранить наличие скола на ванне,  

устранить течь воды на соединении труб под ванной. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  

застройщик «Рыбоводстрой» в пользу Администрации муниципального образования  

Долинский муниципальный округ Сахалинской области 65 000 (шестьдесят пять тысяч)  

рублей штраф по муниципальным контрактам: № 0161300006322000535 от 19.12.2022. № 0161300006322000522 от 19.12.2022 № 0161300006322000605 от 20.12.2022 № 0161300006322000572 от 29.12.2022 № 0161300006322000579 от 19.12.2022 № 0161300006322000585 от 19.12.2022 № 0161300006322000543 от 19.12.2022 № 0161300006322000555 от 19.12.2022 № 0161300006322000557 от 19.12.2022 № 0161300006322000566 от 19.12.2022 № 0161300006323000776 от 30.10.23 № 0161300006323000771 от 30.10.2023 

 № 0161300006323000167 от 22.05.2023. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» в федеральный бюджет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Решение сторонам не направлять. 

Судья О. А. Портнова.