АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-7570/2020

г. Курган

18 января 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 18 января 2021 года.

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Останина Я.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Собко Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью ПСК «Аккурат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 110278 руб.

Третьи лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Промпроект»; 2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УРАЛ»

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 11.01.2021;

от ответчика: ФИО2, доверенность №158 от 17.02.2020; 

от третьих лиц: явки нет,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью ПСК "Аккурат"  (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 110278 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 10000 руб. 

В доказательство уплаты государственной пошлины в сумме 4308 руб. представлено платежное поручение №202 от 19.06.2020.

Исковое заявление и приложенные к нему документы поступили в суд в электронном виде в формате PDF.

Определением арбитражного суда от 14.07.2020 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца через канцелярию суда 28.07.2020 поступили подлинник искового заявления, подлинник платёжного поручения №202 от 19.06.2020, подлинник платёжного поручения №174 от 08.06.2020,подлинник счета №16 от 28.05.2020.

Документы были размещены на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определением от 07.09.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 17.11.2020 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Промпроект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УРАЛ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). 

Третьи лица в судебное заседание не явились, о времени и месте заседания извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Представитель истца в судебном заседании представил уточненное исковое заявление, в котором просил принять отказ о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 10000 руб. Исковые требования о взыскании 110278 руб. поддержал в полном объеме. Просил не рассматривать требование о взыскании судебных расходов в размере 10000 руб. Пояснил, что позиция по делу прежняя. 

Представитель ответчика в судебном заседании представил общий журнал работ №1, письмо от 14.11.2019, письмо исх. №05-5052-2019 от 16.10.2019, проектную документацию (том 4). Пояснил, что работы выполнены, но оснований для их оплаты не имеется, так как их стоимость выше 15% от цены договора. Факт выполнения работ и их необходимость для достижения целей договора не оспаривал. 

От третьего лица №1 через канцелярию суда 14.12.2020 поступил отзыв на исковое заявление, в котором указано, что изменения внесенные в проектную документацию не являются ошибкой, либо недоработкой проектировщика, а были внесены исключительно по инициативе подрядчика, согласно его предложению. Исковые требования оставляет на усмотрение суда. 

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, с учетом волеизъявления истца, не рассматривает требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 10000 руб. 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей третьих лиц.

Исследовав письменные материалы дела, оценив имеющиеся доказательства в соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 02.08.2019 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) подписан договор подряда №КР-143/19 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – договор, л.д. 10-18), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) объекта. Подрядчик обязался выполнить все работы по капитальному ремонту согласно графику выполнения работ (приложение №1 к договору, л.д. 18), являющемуся неотъемлемой частью договора. Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение №2 к договору, л.д. 18 – оборотная сторона - 20), являющемуся неотъемлемой частью договора, проектной документацией (приложение №3 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора (раздел 2 договора).

Объект – общее имущество многоквартирного дома, расположенного в Курганской области по адресу: г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9, подлежащее капитальному ремонту в соответствии с договором (пункт 1.1 договора). 

Цена договора составляет 1020263 руб., в том числе НДС в сумме 170043 руб. 83 коп. В цену договора включена следующая стоимость работ в отношении многоквартирного дома по адресу: Курганская область, город Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9 – ремонт крыши (скатной) – 1020263 руб. Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15%  связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, иные положения договора изменению не подлежат. Заказчик взял на себя обязательство оплатить подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями договора. Заказчик в течении 14 календарных дней после подписания приемочной комиссией акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту, обязуется оплатить подрядчику стоимость фактически выполненных работ, принятых в порядке, установленном договором, на основании оформленных в установленном порядке акта (актов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата выполненных работ по договору производится заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный чет подрядчика, указанный в договоре. Заказчик вправе произвести оплату отдельных этапов (видов) выполненных работ, установленных графиком выполнения работ, на основании оформленных в установленном порядке и подписанных приемочной комиссией акта (актов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, стоимостью не менее 30% и не более 70% стоимости каждого вида работ, включенных в цену договора. Выплата подрядчику аванса по договору не производится (раздел 3 договора).

Начало работ – с даты заключения договора. Окончание работ – 100 календарных дней. Сроки выполнения отдельных этапов работ по договору определяются графиком выполнения работ (Приложение №1 к договору), являющемся неотъемлемой частью договора. Сроки выполнения работ и продолжительность этапов выполнения работ не могут изменяться в ходе исполнения договора. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания приемочной комиссией акта о приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания (раздел 4 договора).

Обязанности сторон установлены разделом 5 договора.

Приемка результатов завершенных работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых здании (в ред. изменений № 1, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.1997 № 17-16), проектной документацией, а также иными нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и одновременно инженерную организацию о завершении работ по договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю заказчика счет, счет-фактуру, акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, исполнительно-техническую документацию на бумажном и электронном носителе (скан-копии). Заказчик в течение 8 рабочих дней после получения уведомления подрядчика в установленном порядке организует приемку приемочной комиссией объекта в эксплуатацию. Приемка осуществляется приемочной комиссией, создаваемой заказчиком, в составе в порядке, установленном действующим законодательством. При необходимости в состав комиссии могут включаться представители компетентных органов и экспертов. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания приемочной комиссией акта о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ по капитальному ремонту в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех выявленных недостатков (дефектов), в порядке, установленном разделом 7 настоящего договора (раздел 7 договора).

Разделом 13 договора стороны предусмотрели имущественную ответственность. 

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Курганской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. До передачи спора на разрешение суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) дней с момента получения (раздел 17 договора).

В связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения, дополнительным соглашением №1 к договору (л.д. 21) стороны пункт 3.1 договора изложили в следующей редакции: «3.1. Цена Договора составляет 964 835 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 00 коп. В цену Договора включена следующая стоимость работ в отношении многоквартирных домов: Курганская область, город Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9 – ремонт крыши (скатной) – 964 835, 00 руб.». 

Дополнительным соглашением №2 к договору (л.д. 22) стороны пункт 3.1 договора изложили в следующей редакции: «3.1. Цена Договора составляет 1 109 233 (один миллион сто девять тысяч двести тридцать три) рубля 00 коп. В цену Договора включена следующая стоимость работ в отношении многоквартирных домов: Курганская область, город Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9 – ремонт крыши (скатной)  – 1 109 233 – в том числе стоимость дополнительных работ согласно локального сметного расчета №02-01/4-144398.». Пункт 19.8 договора дополнили абзацами следующего содержания: «приложение №5 – Локальный сметный расчет №02-01/4 на ремонт крыши (дополнительные работы).».

В силу пункта 1 и пункта 2 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В договоре стороны согласовали все существенные условия, в частности его предмет, сроки, стоимость работ, порядок принятия выполненных работ и порядок их оплаты, что позволяет сделать вывод о его заключённости.

Сторонами не заявлялось о несогласованности предмета договора, о различном понимании сроков выполнения работ.

Сторонами подписан акт технической необходимости от 08.11.2019 (л.д. 24) на исключаемые и включаемые работы по объекту: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Курганская область, г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9, в котором отражено, что в ходе проведения капитального ремонта были выявлены работы, не учтенные ЛСР №02-01 (пересчет). Необходимость обоснована тем, что выполнить качественно ремонт крыши не представляется возможным без корректировки объемов. Перечень не ученных (изменяемых) работ:

- Исключено устройство кровли из шифера (п. 40-44) 2,43 м² в следствии фактических промеров;

- Исключена установка стоек 2 шт. (п. 47-177), антенных выходов (п. 51-52) 2 шт. по причине отсутствия необходимости;

- В части устройства вентшахты ВШ1 исключена кладка (п. 70-73) 0,53 м³, армирование (п. 74-75) 13,125 кг., установка зонта Д-3200 (п. 76-77) 1 шт., а также каркас (п. 78-81 2,49 м², кронштейн крепежный 40 шт. (п. 82). профиль Г-образный 4 шт. (п. 83), обшивка профлистом (п. 84-85) 2,46 м², планки торцевая 95*120*2000 мм. (п. 86-88) 2 шт., ПУН-115*115*2000 мм. (п. 89) 3 шт., плоский лист (п. 90) 4,323 м² в связи с внесением изменения в проект (шифр проекта 27-19);

- Исключены держатели труб 6 шт. (п. 158) в следствии фактических замеров;

- Включено 5,594 м³ доски необрезной 32-40 мм. 2 сорта (п. 37) ошибки в смете №02-01 (материал вычтен повторно);

- Включено 0,47 м³ кладки кирпичной столбиков (п. 21-24) в следствии фактических промеров;

- В части устройства обрешетки с прозорами включено 0,5134 м³ (п. 38-39) в следствии фактических промеров;

- В части устройства фронтона включен профлист С-8 в количестве 1,577 м² (п. 60-62), плоский лист (п. 63-69) 4,5056 м² в следствии фактических промеров;

- В части вывода канализационных труб выше кровли включено 2,31 м (п. 113) в следствии фактических промеров и необходимости;

- Включено покрытие поверхности изоляции сталью 0,2 м² (п. 114-115) в следствии фактических промеров;

- В части ремонта парапета включена разборка кирпичной кладки 10,5 м³ (п. 178) кладка 10,5 м³ (п. 179-181), армирование (п. 182-183) 74,96 кг. по причине необходимости (разрушение старого парапета);

- Включена погрузка и вывоз мусора 16 т. (п. 184-185). 

Комиссией принято решение подготовить локальные сметные расчеты №№02-01/1, 02-01/2, 02-01/3, 02-01/4 для внесения корректировки объемов по объекту. 

Сторонами 21.11.2019 подписан акт о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания (л.д. 23), в котором отражено, что ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: начало работ – август 2019 года, окончание работ – ноябрь 2019 года. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации 964835 руб., в том числе капитального ремонта крыши (скатной) – 964835 руб. Фактическая стоимость капитального ремонта – 1109233 руб., в том числе капитального ремонта крыши (скатной) – 1109233 руб.

В материалы дела представлены локальные сметные расчеты №02-01/4 на сумму 144398 руб. (л.д. 33-35), №02-01/4/1 на сумму 110278 руб. (л.д. 36-37), №02-01/3 на сумму 16487 руб. (л.д. 54-56), №02-01/2 на сумму 24630 руб. (л.д. 57-58), №02-01/1 на сумму -24630 руб. (л.д. 59-66), общий журнал работ №1 (л.д. 67-82), ведомость объемов работ №1 (л.д. 109), проектная документация (л.д. 113-114, в деле).

Ответчиком произведена оплата в размере 1109233 руб., что подтверждается платежными поручениями №3900 от 27.11.2019 на сумму 144398 руб., №3901 от 27.11.2019 на сумму 16467 руб., №3902 от 27.11.2019 на сумму 948368 руб. (л.д. 29-31). 

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 18.08.2019 (л.д. 84), в котором указывал, что 14.08.2019, при производстве демонтажных работ стропильной системы кровли дома №9, ул. Космонавтов, п. Череухово в г. Кургане по договору подряда №КР-143/19 от 02.08.2019, произошло обрушение части кирпичной кладки парапета. Кирпичная кладка имеет видимые разрушения, не исключено дальнейшее обрушение. Истец просил назначить выезд на место специалиста ответчика для оценки ситуации и определения необходимости дополнительных работ. Письмо было получено ответчиком 19.08.2019, что подтверждается вх.№6086. 

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 25.08.2019 (л.д. 83), в котором указывал, что 14.08.2019, при производстве демонтажных работ стропильной системы кровли дома №9, ул. Космонавтов, п. Череухово в г. Кургане по договору подряда №КР-143/19 от 02.08.2019, был произведен выезд на место специалистами ответчика и строительного контроля. Принято решение о частичном демонтаже разрушенного кирпича и восстановление кладки. При дальнейшей разборке парапета выявлены разрушения кирпичной кладки не только в шве, но и вдоль парапета вниз к перекрытию с визуальным уклоном в сторону улицы. Ширина вертикального отслоения от 20 до 50 мм. Для решения данного вопроса необходим детальный осмотр состояния парапета совместно со специалистами заказчика и строительного контроля. Письмо получено ответчиком 26.08.2019, что подтверждается вх.№6314.

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 14.10.2019 (л.д. 27), в котором сообщалось о том, что в результате дополнительных работ по кирпичной кладке парапета сумма фактических затрат составила 232738 руб., что превышает 15% от стоимости контракта. Истец просил ответчика учесть данный объем при приемке объекта и дать пояснение по оформлению документации. К письму была приложена исполнительная документация на 14 листах. Данное письмо было получено ответчиком 15.10.2019, что подтверждается вх.№7574. 

Ответчиком в ответ на обращение от 14.10.2019 в адрес истца было направлено письмо исх.№05-5052-2019 от 16.10.2019 (л.д. 25), в котором сообщалось, что цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15% от суммы контракта. Остаток фактически выполненных объемов работ может быть оплачен заказчиком при условии заключения иного договора подряда по соглашению сторон.

Истцом в адрес ответчика было направлено письмо от 14.11.2019 (л.д. 28), в котором сообщалось о том, что в результате дополнительных работ по кирпичной кладке парапета сумма фактических затрат составила 232738 руб., что превышает 15% от стоимости контракта. Исполнительная документация предоставлена, сметный объем подтвержден. Сумма превышения сметы составляет 110278 руб. Истец просил закрепить указанный объем подписанием отдельного договора. К письму был приложен локальный сметный расчет №02-01 на 3 листах в 3 экземплярах. Данное письмо было получено ответчиком 15.11.2019, что подтверждается вх.№8311. Также на письме имеется отметка о том, что документы приняты на проверку 15.11.2019. 

Истцом  адрес ответчика была направлена претензия об оплате выполненных работ от 19.03.2020 (л.д. 32), в которой указано, что 08.11.2019 сторонами подписан акт технической необходимости, согласно которому сторонами согласован дополнительный объем работ, в том числе работы по кирпичной кладке карниза. В результате выполнения дополнительных работ сумма фактических затрат составила 232738 руб., что превышает 15% от стоимости контракта. Исполнительная документация предоставлена, сметный объем подтвержден. Сумма превышения сметы составила 110278 руб. Утвержден и согласован локальный сметный расчет №02-01/4/1 на превышающую сумму – 110278 руб. Общая стоимость выполненных работ по договору подряда №143/19 от 02.08.2019 составила 1219511 руб. Работы приняты 21.11.2019, что подтверждается актом о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания. В течение 10 дней с даты получения претензии истец просил ответчика погасить задолженность в размере 110278 руб.

Претензия получена ответчиком 20.03.2020, что подтверждается вх.№316.

В ответ на претензию об оплате выполненных работ от 19.03.2020 ответчик направил в адрес истца письмо исх.№04-1883-2020 (л.д. 26), в котором указывал, что цена договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9, с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.08.2019, составляет 964835 руб., дополнительные работы, предусмотренные локальным сметным расчетом №02-01/4, составляют 144398 руб. Общая стоимость выполненных подрядчиком по договору работ, с учетом дополнительного соглашения №2 от 21.11.2019 составляет 1109233 руб. Стоимость выполненных работ по договору №КР-143/19 от 02.08.2019 оплачена заказчиком в соответствии с актом о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жтлого здания в размере 1109233 руб.  

Предусмотренные договором работы выполнены.

Поскольку ответчик обязательства по оплате выполненных дополнительных работ не выполнил, истец, с соблюдением претензионного порядка, обратился в Арбитражный суд Курганской области с требованиями о взыскании стоимости дополнительных работ.

В соответствии со статьями 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) стороны должны исполнять обязательства надлежащим образом в соответствии с условиями договора и закона, в соответствующий день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено. Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статья 310 ГК РФ). 

Правоотношения сторон регулируется главой 37 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьёй 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Ответчик, возражая против исковых требований, среди прочего ссылался на то, что стоимость работ, выявленных дополнительно и требующих увеличения объемов превышает допустимый размер увеличения цены договора (более 15%), что не позволяет заказчику произвести оплату.

Рассмотрев доводы и возражения сторон, оценив доказательства, в том числе представленные в дело общий журнал работ №1, ведомость объемов работ, проектную документацию, акт технической необходимости, локальные сметы, акт о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, суд полагает, что взыскиваемая стоимость дополнительных работ является обоснованной в размере 110278 руб., подтверждается материалами дела. Без выполнения спорных работ конечная цель договора подряда №КР-143/19 от 02.08.2019 не была бы достигнута, фактически оплаченные дополнительные работы (в пределах увеличения цены на 15%) невозможно отделить от спорных работ. 

Согласно нормам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

При этом согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изложенных обстоятельствах, оценивая представленные доказательства в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд приходит к выводу об удовлетворении иска в размере 110278 руб.

Положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в основу распределения между сторонами судебных расходов положен принцип возмещения их стороне, выигравшей спор пропорционально размеру удовлетворённых требований.

При подаче иска истцом государственная пошлина уплачена в размере 4308 руб. по платёжному поручению № 202 от 19.06.2020 (л.д. 49).

Исходя из цены иска, размер государственной пошлины должен составлять 4308 руб. 

Ввиду удовлетворения исковых требований в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 4308 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                          решил:

Исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью ПСК «Аккурат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>): 

- денежные средства в размере 110278 руб.;

- судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 4308 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

Я.А. Останин