АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru

http://krasnodar.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

арбитражного суда первой инстанции

дело №А32-52701/2018

г. Краснодар                            «16» апреля 2019 года.

Резолютивная часть решения объявлена 09 апреля 2019 года.

Решение суда в полном объеме изготовлено 16 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Миргородской О.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гоовым Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А32-52701/2018

по исковому заявлению ООО «Фирма «Гешефт», (ИНН 

<

***>), г. Краснодар 

к ООО Завод «РОСПРОМГАЗ», (ИНН 

<

***>), г. Энгельс

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца:  представители  по доверенности ФИО1 и  Юрий М.О.

от ответчика представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Фирма «Гешефт» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ООО Завод «РОСПРОМГАЗ» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 2 652 391 рублей 48 копеек за нарушение сроков выполнения пуско-наладочных работ.

В судебное заседание явку представителя обеспечил только истец, ответчик о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим способом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца в судебном заседании пояснил, что им отыскивается неустойка за нарушение ответчиком сроков пуско-наладочных работ, при этом указал, что монтажные работы ответчиком на данный момент не выполнены.

Суд, заслушав представителей истца, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения требования на основании следующего.

03.04.2017 между истцом (генподрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен договор субподряда № СП/2721/17/01, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с техническим заданием выполнить по объекту «Гипермаркет», расположенному по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Симиренко», комплекс строительно-монтажных работ по блочно-модульной котельной (БМК) включая: проектные работы блочно-модульной котельной (БМК) с фермой и дымовыми трубами (включая предоставление паспорта на БМК и проектирование топливопровода от БМК до скала хранения дизельного топлива);  проектные работы склада хранения дизельного топлива (СХДТ); монтажные работы БМК (включая стоимость БМК, доставку (поставку) и разрузку БМК со своими комплектующими и доборными элементами на объекте генподрядчика; пусконаладочные работы (ПНР) БМК на дезельном топливе и склада дизельного топлива (включая получение разрешения на проведение ПНР от Ростехнадзора, сдачу отчета о ПНР в Ростехнадзор на дизельном топливе, получение разрешения на ввод в эксплуатацию БМК и включая стоимость топлива, необходимого для ПНР); пусконаладочные работы БМК на природном газе (включая получение разрешения на проведение ПНР от Ростехнадзора, сдачу отчета о ПНР в Ростехнадзор и получение разрешения на ввод в эксплуатацию БМК).

Разделом 5 договора стороны согласовали сроки выполнения работ.

Согласно пункту 5.1 договора начало выполнения работ – дата подписания договора.

В соответствии с пунктом 5.1.1. договора, срок окончания проектных работ, изготовления и доставки оборудования на объект, проведения монтажных работ БМК и СХДТ не должен превышать 60 рабочих дней с момента оплаты первого авансового платежа, в соответствии с пунктом 4.2.1. договора.

В соответствии с пунктом 5.1.3 договора, срок окончания пусконаладочных работ на резервном и основном топливе (включая сдачу отчета о ПНР в Ростехнадзор и получение разрешения на ввод в эксплуатацию БМК) не должен превышать 60 рабочих дней с момента окончания монтажных работ.

Согласно пункту 10.2 договора, если субподрядчик не исполнит своих обязательств, предусмотренных в пункте 5.1 договора по срокам начала и окончания работ, а также обязательств по выполнению работ в соответствии с проектом, утвержденным заказчиком на момент заключения договора, по срокам выполнения этапов работ, утвержденных заказчиком на момент заключения договора, по срокам выполнения этапов работ, оформления разрешительной и приемо-сдаточной документации, сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию, а также в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) любого иного обязательства, предусмотренного договором, то в каждом из этих случаев генподрядчик вправе удержать из причитающихся к оплате субподрядчиком средств либо взыскать неустойку в размере 0,1 % от общей цены договора, за каждый день просрочки.

Ответчик, по мнению истца, допустил просрочку выполнения пуско-наладочных работ, в связи с чем им была начислена  неустойка  за период с 30.09.2017 по 06.12.2018 и в адрес ответчика  была направлена претензия.

Поскольку требования претензии были оставлены ответчиком без финансового удовлетворения, истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

При решении вопроса об обоснованности заявленных требований суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договорные правоотношения сторон по своей правовой природе относятся к договору подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре подряда.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 10.2 договора, если субподрядчик не исполнит своих обязательств, предусмотренных в пункте 5.1 договора по срокам начала и окончания работ, а также обязательств по выполнению работ в соответствии с проектом, утвержденным заказчиком на момент заключения договора, по срокам выполнения этапов работ, утвержденных заказчиком на момент заключения договора, по срокам выполнения этапов работ, оформления разрешительной и приемо-сдаточной документации, сдаче объекта в гарантийную эксплуатацию, а также в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) любого иного обязательства, предусмотренного договором, то в каждом из этих случаев генподрядчик вправе удержать из причитающихся к оплате субподрядчиком средств либо взыскать неустойку в размере 0,1 % от общей цены договора, за каждый день просрочки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения пусконаладочных работ.

В силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, если обязанность заключить договор предусмотрена данным кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В пункте 5.1.3 договора, стороны согласовали срок окончания пусконаладочных работ на резервном и основном топливе (включая сдачу отчета о ПНР в Ростехнадзор и получение разрешения на ввод в эксплуатацию БМК) – не более 60 рабочих дней с момента окончания монтажных работ.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что монтажные работы ответчиком не выполнены.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что право на взыскание неустойки за нарушение сроков пусконаладочных работ у истца не возникло.

В отсутствие наличия соответствующего права требования истца удовлетворены быть не могут.

По  правилам ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины следует возложить на истца.

Руководствуясь  статьями 65, 70, 106, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

Судья О.П. Миргородская