﻿/

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-26851/2021

Нижний Новгород                                 	          		                     24 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 09.11.2021

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-601) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания

секретарем судебного заседания Андриановой Т.С.

при участии представителей сторон:

от истца: Шнягина И.Н. (доверенность от 13.07.2021),

от ответчика: Пыршева А.В. (доверенность от 01.01.2021) 

от третьего лица: не явились

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "СаровИнвест"(ИНН: 5254483897; ОГРН: 1115254000014) к акционерному обществу "Саровская газоснабжающая компания"(ИНН: 5254082542, ОГРН: 1085254000347)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, – ООО "Арзамасгоргаз" (ОГРН: 1085243001436, ИНН: 5243011758)о понуждении к исполнению обязательств по договору 

и   у с т а н о в и л :

иск заявлен обязании акционерного общества "Саровская газоснабжающая компания" (далее – АО "СаровГаз") исполнить обязательство по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 28.10.2019 № 128 в части выдачи обществу с ограниченной ответственностью "СаровИнвест" (далее – ООО "СаровИнвест") акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и акта о подключении (технологическом присоединении).

Требование основано на статьях 309, 310, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктах 98, 100  Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила № 1314), и мотивировано тем, что истец выполнил принятые на себя обязательства по договору о подключении - исполнило обязательства по созданию сети газопотребления в границах своего земельного участка и оплатило услуги по подключению, но ответчик  неправомерно уклоняется от исполнения встречного обязательства по выдаче названных документов, что является препятствием для пуска газа в построенные объекты. 

Истец поддержал исковые требованиям по доводам, изложенным в иске, и возражениях на отзывы ответчика.

Ответчик просил отказать в удовлетворении иска по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях в отзывах.

Третье лицо в отзыве на иск представило возражения на доводы ответчика и посчитало исковое требование обоснованным и подлежащим удовлетворению. ООО «Арзамасгоргаз» указало, что является подрядчиком и эксплуатирующей организацией в отношении наружного газопровода низкого давления 1 очереди по адресу: Нижегородская область, г. Саров, «Заречный» район, в районе р. Сатис. Указанный газопровод построен надлежащим образом, каких-либо нарушений при его строительстве допущено не было. Работы осуществлены в полном соответствии с проектом № 0112-2018-Р-ГСН-НД, выполненного проектной группой ООО «СаровИнвест» 09.2018, отступлений от указанного проекта в ходе производства работ допущено не было. Исполнительно-техническая документация в отношении построенного газопровода полностью соответствует установленным нормам, а также рабочему проекту.

Как усматривается из материалов дела и установил суд, ООО "СаровИнвест" на основании постановления Администрации г.Саров от 02.09.2019 №2921 "Об утверждении проекта внесения изменений в Документацию по планировке и межеванию территории в границах земельного участка с кадастровым номером 13:60:0000000:9 для комплексного освоения в целях жилищного строительства" на правах аренды предоставлен земельный участок с кадастровым номером 52:60:0010006:2 общей площадью 145356 кв.м с видом разрешенного использования - блокированная жилая застройка.

На указанном земельном участке ООО "СаровИнвест" осуществляет строительство индивидуальных жилых домов, а также работы по строительству газопроводов высокого и низкого давления с целью газификации построенных объектов.

Приказом ФСЧ России от 22.07.2011 № 419-э АО "СаровГаз" включено в реестр субъектов естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе (раздел II "Транспортировка газа по трубопроводам" под регистрационным № 52.2.9).  

АО "СаровГаз" является владельцем газораспределительных сетей на территории ЗАТО г. Саров. Газораспределительные сети и объекты газоснабжения принадлежат АО "СаровГаз" на праве собственности и праве аренды по договорам с администрацией г. Сарова.

На основании заявки ООО "СаровИнвест" о подключении между ООО "СаровИнвест" (заявитель) и АО "Саровгаз" (исполнитель) заключен договор от 28.10.2019 №128 о подключении  (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения со сроком выполнения мероприятий по подключению 1,5 года с даты заключения, то есть до 28.04.2021.

В соответствии с техническими условиями от 04.11.2019 № 086/893 объект капитального строительства - объекты жилищного строительства, расположенные по адресу: Нижегородская область, г.Саров, Заречный район, в районе поймы реки Сатис. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) - 498 куб.м/час. 

В соответствии с пунктом 1 договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства индивидуального жилого дома к сети газораспределения принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки 498 куб.м/час газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)  в границах принадлежащего ему земельного участка по адресу: Нижегородская область, г. Саров, Заречный район, в районе поймы реки Сатис, а также обязательства по оплате услуг по подключению.

Пунктом 2 договора установлено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение со сроком действия 70 рабочих дней со дня заключения договора.

Пунктом 3 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1,5 года со дня заключения договора.

Разделом II договора предусмотрены права и обязанности сторон договора.

Так в соответствии с пунктом 5 договора исполнитель обязан проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания акта о готовности сетей; направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении.

В соответствии с пунктом 7 договора заявитель обязан: на основании технических условий разработать проектную документацию (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)   о создании сети газораспределения от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (информацию о точках подключения направляет исполнитель) и представить исполнителю 1 экземпляр  раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации; обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке от  точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических словий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа не позднее 14 дней до дня подключения; осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка не позднее 10 дней до дня подключения; внести плату за подключение; подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем.

Разделом IV договора предусмотрен порядок осуществления мониторинга исполнения технических условий включающий проверку исполнителем проектной документации на предмет соответствия техническим условиям, выработка рекомендаций по итогам проверки; проверка выполнения  строительно-монтажных работ на предмет их соответствия проектной документации и техническим условиям, выдача рекомендаций по итогам проверки; проверка исполнительно-технической документации, выдача рекомендаций по итогам проверки.

Суд оценил представленные в дело доказательства и установил, что ООО "СаровИнвест" со своей выполнило договорные обязательства.

Так ООО "СаровИнвест" выполнило работы по строительству газопровода высокого давления, о чем между ООО "СаровИнвест" и АО "Саровгаз" подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 12.03.2020.

Письмом от 08.05.2020 данный акт направлен ООО "СаровИнвест" в адрес АО "Саровгаз".

ООО «Арзамасгоргаз» является подрядчиком и эксплуатирующей организацией в отношении наружного газопровода низкого давления 1 очереди по адресу: Нижегородская область, г. Саров, «Заречный» район, в районе р. Сатис. 

ООО "СаровИнвест" окончило работы по строительству газопровода низкого давления (1 очередь), о чем между ООО "СаровИнвест" и ООО "Арзамасгоргаз" подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 15.04.2020. Надземный газопровод проложен от ПГБ-50-2У1-СГ до места входа в землю. Подземный газопровод проложен до границ блоков жилых домов блокированной застройки.

Письмом от 05.10.2020 данный акт направлен ООО "СаровИнвест" в адрес АО "Саровгаз".

Кроме того, между ООО "СаровИнвест" и ООО "Арзамасгоргаз" подписаны акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 03.06.2020 - газоснабжение жилого дома блокированной застройки №20 (блоки №№№1,2,3) по адресу: Нижегородская область, г.Саров, Заречный район, в районе реки Сатис.

Обязательства по оплате технологического присоединения исполнены ООО "СаровИнвест" 14.09.2020.

В связи с приемкой законченных строительством объектов газораспределительной системы (Наружное газоснабжение. Газопровод высокого давления по адресу: Нижегородская область, г.Саров, Заречный район, в районе реки Сатис и Наружный газопровод. Газопровод низкого давления (1 очередь) по адресу: Нижегородская область, г.Саров, Заречный район, в районе реки Сатис) ООО "СаровИнвест" обращалось к АО "Саровгаз" с заявлениями от 05.10.2020 №0236/20, от  15.10.2020 №0242/20  о составлении справки о выполнении технических условий, акта о готовности сетей и акта о подключении (технологическом присоединении) с целью получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов жилищного строительства.

В ответ на данные обращения АО "Саровгаз" письмом от 21.10.2020 сообщило, что не  осуществляло мониторинг выполнения ООО "СаровИнвест" технических условий о присоединении при строительстве газопровода низкого давления, не участвовало в приемке скрытых работ, не осуществляло проверку готовности сетей газораспределения и газопотребления к пуску газа и потребовало от ООО "СаровИнвест" обеспечить доступ к объектам капитального строительства для мониторинга выполнения заявителем технических условий, представить раздел утвержденной проектной документации, а также представить для проверки комплект исполнительно-технической документации.

Письмом от 02.11.2020 ООО "СаровИнвест" направило в адрес АО "Саровгаз" проектную документацию на объект "Наружный газопровод. Газопровод низкого давления (1 очередь) по адресу: Нижегородская область, г.Саров, Заречный район, в районе реки Сатис", а также комплект исполнительно-технической документации на данный объект.

АО "Саровгаз" не выдало по договору от 28.10.2019 № 128 акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и акт о подключении (технологическом присоединении), что явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства в спорном периоде был определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Согласно пункту 2 Правил № 1314 под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; заявителем при этом является юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; под исполнителем понимается газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 1314 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017 № 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" (далее - Постановление № 713); б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий; в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным Постановлением № 713; г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной Постановлением № 713.

В соответствии с пунктом 59 Правил № 1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с пунктом 60 Правил № 1314 по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и документов, не предусмотренных названными Правилами (пункт 72 Правил № 1314).

Согласно пункту 83 Правил № 1314 договор о подключении содержит следующие существенные условия: а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению; б) срок осуществления мероприятий по подключению; в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту); ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил; и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении; л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения; н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

Согласно подпункту "в" пункта 85 Правил № 1314 срок осуществления мероприятий по подключению для заявителей второй категории не может превышать 1,5 года, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

Согласно пункту 97 Правил № 1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно пункту 98 Правил № 1314 исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения; б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме, утвержденной Постановлением № 713; в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя; г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении.

Согласно пункту 99 Правил № 1314 исполнитель имеет право участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в рамках осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий о присоединении в случаях, предусмотренных договором о подключении.

Пунктом 100 Правил № 1314 предусмотрено, что заявитель обязан: а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 98 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации); в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях; г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства исполнителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий; д) внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

В соответствии с пунктом 103 Правил № 1314 после проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В соответствии с пунктом 104 Правил № 1314 запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены названными Правилами.

Форма акта о готовности сетей к подключению не наделяет правом газораспределительную организацию на осуществление строительного надзора (решение Верховного суда от 28.10.2020 №АКПИ20-558). В Правила № 1314 не предусмотрено право газораспределительной организации запрашивать у заявителя исполнительно-техническую документацию на сеть газопотребления в ходе проведения мониторинга выполнения технических условий, равно как не предусмотрена обязанность по предоставлению исполнительно-технической документации. 

В соответствии с пунктами 2, 3 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 18.10.2021 утратили силу Правила № 1314 и начали действовать Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные данным постановлением (далее – Правила № 1547). 

Суд оценил представленные в дело документы и установил, что АО "СаровИнвест" исполнило обязательства по договору о подключении, а также уведомило АО "СаровГаз" о выполнении технических условий и условий договора заявителем. 

В Правилах № 1547 не содержится оснований для освобождения АО "СаровГаз" от возникшей обязанности по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 28.10.2019 № 128 по выдаче ООО "СаровИнвест" акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. 

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. 

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства. 

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик. 

Суд, оценив все заявленные ответчиком доводы, отклонил их как не влияющие на обоснованность заявленного иска.

С учетом установленных обстоятельств и указанных норм права требования истца следует удовлетворить в полном объеме.

Расходы по госпошлине в силу ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца в сумме 6 000 руб.

Изучив материалы дела и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

удовлетворить иск.

Обязать акционерное общество "Саровская газоснабжающая компания"(ИНН: 5254082542, ОГРН: 1085254000347) исполнить обязательство по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 28.10.2019 № 128 в части выдачи обществу с ограниченной ответственностью "СаровИнвест" (ИНН: 5254483897; ОГРН: 1115254000014) акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) и акта о подключении (технологическом присоединении).

Взыскать с акционерного общества "Саровская газоснабжающая компания"(ИНН: 5254082542, ОГРН: 1085254000347) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СаровИнвест" (ИНН: 5254483897; ОГРН: 1115254000014) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по делу.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья 								                         С.Г. Окутин