Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, д.7, г.Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-2116/2020

г. Липецк

23 июня 2020 г.

Резолютивная часть решения объявлена 22 июня 2020 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 23 июня 2020  года. 

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении протокола судебного  заседания секретарем  судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

         к Муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя г. Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 622 685 руб. 24 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца: не явился,

от ответчика: не явился,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (далее – истец, ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт») обратилось в Арбитражный суд Липецкой   области с иском к Муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя г. Липецка» (далее – ответчик, МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка») о взыскании неосновательного обогащения в размере 622 685 руб. 24 коп.

Определением от 27.03.2020 суд принял исковое  заявление к  рассмотрению в  порядке   упрощенного  производства и возбудил  производство  по  делу.

Определением от 25.05.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

10.06.2020  в   материалы   дела   поступили возражения МУ «Управление главного смотрителя  г. Липецка» № 625 от  09.06.2020.  

В предварительное судебное заседание 17.06.2020 представители  сторон не явились.

В предварительном судебном заседании 17.06.2020 объявлен перерыв  до 22.06.2020.

Соответствующая информация в установленные сроки была размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://lipetsk.arbitr.ru.  

22.06.2020  в   материалы   дела   поступило  заявление  ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» от 19.06.2020 о  рассмотрении  дела   в   отсутствие представителя  истца.

В настоящее предварительное судебное заседание представители  сторон не явились,  дополнительных  доказательств   не   направили.

Учитывая наличие в материалах дела уведомлений органа почтовой связи, арбитражный суд считает, что стороны надлежащим образом  извещены о времени и месте проведения   судебного  заседания. 

          Руководствуясь положениями ч. 4 ст. 137 АПК РФ, суд завершил предварительную подготовку дела к судебному разбирательству и открыл судебное заседание для рассмотрения спора по существу.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.

Как видно из материалов дела, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г. Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 286-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-1, л.д. 7 - 10), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля) в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-1).

Согласно пункту 5.1 договора-1 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-1 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-1, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-1 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-1, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-1).

Пунктом 8.2 договора-1 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-1 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-1).

Истец оказал ответчику услуги по договору-1, что подтверждается актом                         № 5/20181024-07 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 287-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-2, л.д. 11 - 14), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги проезд Боевой (от улицы Опытная до пересечения с улицей имени А.Г.Железнякова) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-2).

Согласно пункту 5.1 договора-2 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-2 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-2, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-2 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-2, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-2).

Пунктом 8.2 договора-2 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-2 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-2).

Истец оказал ответчику услуги по договору-2, что подтверждается актом                            № 5/20181024-08 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 289-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-3, л.д. 15 - 18), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса) в г.Липецке», 

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-3).

Согласно пункту 5.1 договора-3 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-3 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-3, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-3 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-3, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-3).

Пунктом 8.2 договора-3 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-3 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-3).

Истец оказал ответчику услуги по договору-3, что подтверждается актом               № 5/20181024-09 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) также заключен договор № 290-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-4, л.д. 19 - 22), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира) в г.Липецке», 

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица Московская (от кольцевого движения улица Московская – улица имени Маршала ФИО2 до ул.Ангарская) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-4).

Согласно пункту 5.1 договора-4 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-4 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-4, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                          5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-4 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-4, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-4).

Пунктом 8.2 договора-4 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-4 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-4).

Истец оказал ответчику услуги по договору-4, что подтверждается актом                         № 5/20181024-10 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 293-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-5, л.д. 23 - 26), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги проезд Петровский (от улицы имени В.И.Ленина до площади Революции) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-5).

Согласно пункту 5.1 договора-5 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-5 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-5, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                            5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-5 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-5, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-5).

Пунктом 8.2 договора-4 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-5 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-5).

Истец оказал ответчику услуги по договору-5, что подтверждается актом                         № 5/20181024-11 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 337-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-6, л.д. 27 - 30), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов) в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Маршала ФИО3 (от площади Победы до кольцевого движения улицы имени П.А.Папина – улицы имени Маршала ФИО3) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-6).

Согласно пункту 5.1 договора-6 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-6 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-6, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                           5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-6 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-6, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-6).

Пунктом 8.2 договора-6 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-6 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-6).

Истец оказал ответчику услуги по договору-6, что подтверждается актом                           № 5/20181024-13 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) также заключен договор № 338-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-7, л.д. 31 - 34), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Маршала ФИО3 (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок») в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт участка автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала ФИО2 до кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская (подходы ко 2-му мостовому переходу) в г.Липецке»,

1.1.3. «Ремонт участка автомобильной дороги от улицы имени П.С.Ковалева до пересечения с площадью Заводской в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-7).

Согласно пункту 5.1 договора-7 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-7 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-7, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                           5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-7 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-7, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-7).

Пунктом 8.2 договора-7 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-7 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-7).

Истец оказал ответчику услуги по договору-7, что подтверждается актом                           № 5/20181024-14 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 339-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-8, л.д. 35 - 38), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-8).

Согласно пункту 5.1 договора-8 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-8 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-8, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                           5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-8 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-8, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-8).

Пунктом 8.2 договора-1 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-8 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-8).

Истец оказал ответчику услуги по договору-8, что подтверждается актом                         № 5/20181024-12 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Помимо прочего, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 603-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-9, л.д. 39 - 42), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-9).

Согласно пункту 1.3 договора-9 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ОАО «ДСУ-1, г.Рогачев»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-9 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-9).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-9, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-9 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-9 стоимость услуг по настоящему договору составляет 66 608 руб. 55 коп., в том числе НДС 18% - 10 160 руб. 63 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 10, № 11, № 12  к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-9, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-9 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-9, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту   1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-9).

Согласно пункту 7.1 договора-9, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-9).

Пунктом 9.2 договора-9 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-9, что подтверждается актом                 № 5/20181227-17 от 27.12.2018 на сумму 66 608 руб. 55 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 604-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-10, л.д. 43 - 46), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-10).

Согласно пункту 1.3 договора-10 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ОАО «ДСУ-1, г.Рогачев»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-10 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-10).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-10, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-10 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-10 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-10, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-10 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-10, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-10).

Согласно пункту 7.1 договора-10, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-10).

Пунктом 9.2 договора-10 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-10, что подтверждается актом                               № 5/20181227-18 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 605-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-11, л.д. 47 - 50), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 7 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-11).

Согласно пункту 1.3 договора-11 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ЛИПЕЦК-асфальт»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-11 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-11).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-11, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-11 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-11 стоимость услуг по настоящему договору составляет 88 410 руб. 67 коп., в том числе НДС 18% - 13 486 руб. 37 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 10, № 11 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-11, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-11 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-11, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-11).

Согласно пункту 7.1 договора-11, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-11).

Пунктом 9.2 договора-11 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-11, что подтверждается актом                     № 5/20181227-01 от 27.12.2018 на сумму 88 410 руб. 67 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор                   № 606-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-12, л.д. 51 - 54), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 4 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-12).

Согласно пункту 1.3 договора-12 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ЛИПЕЦК-асфальт»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-12 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-12).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-12, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-12 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-12 стоимость услуг по настоящему договору составляет 72 306 руб. 85 коп., в том числе НДС 18% - 11 029 руб. 86 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 8, № 9 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-12, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-12 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-12, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-12).

Согласно пункту 7.1 договора-12, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-12).

Пунктом 9.2 договора-12 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-12, что подтверждается актом               № 5/20181227-19 от 27.12.2018 на сумму 72 306 руб. 85 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 607-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-13, л.д. 55 - 58), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-13).

Согласно пункту 1.3 договора-13 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «Инфинити Групп»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-13 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-13).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-13, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-13 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-13 стоимость услуг по настоящему договору составляет 65 505 руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 9 992 руб. 44 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 12, № 13, № 14 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-13, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-13 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-13, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-13).

Согласно пункту 7.1 договора-13, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-13).

Пунктом 9.2 договора-13 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-13, что подтверждается актом                        № 5/20181227-23 от 27.12.2018 на сумму 65 505 руб. 97 коп.

Помимо прочего, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 608-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-14, л.д. 59 - 62), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-14).

Согласно пункту 1.3 договора-14 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «Инфинити Групп»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-14 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-14).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-14, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-14 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-14 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-14, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-14 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-14, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-14).

Согласно пункту 7.1 договора-14, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-14).

Пунктом 9.2 договора-14 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-14, что подтверждается актом                        № 5/20181227-15 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 609-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-15, л.д. 63 - 66), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-15).

Согласно пункту 1.3 договора-15 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ПКЦ-ГАРАНТ»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-15 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-15).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-15, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-15 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-15 стоимость услуг по настоящему договору составляет 65 505 руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 9 992 руб. 44 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 12, № 13, № 14 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-15, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-15 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-15, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-15).

Согласно пункту 7.1 договора-15, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-15).

Пунктом 9.2 договора-15 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-15, что подтверждается актом                       № 5/20181227-16 от 27.12.2018 на сумму 65 505 руб. 97 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 610-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-16, л.д. 67 - 76), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-16).

Согласно пункту 1.3 договора-16 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ПКЦ-ГАРАНТ»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-16 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-16).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-16, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-16 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-16 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-16, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-16 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-16, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-16).

Согласно пункту 7.1 договора-16, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-16).

Пунктом 9.2 договора-16 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-16, что подтверждается актом                       № 5/20181227-20 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

На  основании  указанных договоров на оказание лабораторных услуг общая стоимость  услуг  составила  712 886 руб. 09 коп.

            Решением Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу                   № А36-5473/2019 с  МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка» в пользу ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» взыскано                                         93 972 руб. 75 коп., в том числе 90 200 руб. 85 коп. основного долга и 3 771 руб. 90 коп. неустойки (пени) за период с 09.11.2018 по 20.05.2019, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 262 руб. 91 коп. В остальной части отказано. 

  С учетом   указанных  обстоятельств   истцом   в   адрес  ответчика  была   направлена претензия   с   требованием   выплаты   оставшейся   суммы   в размере                       622 685 руб. 24 коп. в   качестве  неосновательного обогащения.

По результатам   рассмотрения  претензии ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт», ответчиком направлен ответ на претензию № 1117-39-01 от 25.02.2020, в котором указано,  что  обращение взыскания на средства   бюджетов   бюджетной   системы   РФ  производится   на  основании  судебных  актов  в   соответствии  с  гл.  24.1  Бюджетного  кодекса   Российской   Федерации (л.д. 6).    

Неоплата ответчиком неосновательного  обогащения  послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

   Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

   В соответствии с правилами статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

   По смыслу пункта 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу                   № А36-5473/2019 было  установлено,  что между сторонами заключены 16 договоров на оказание услуг, предметом которых являлось оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (договоры 1-5 от 13.08.2018 и договоры 6-8 от 13.09.2018), а также оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов (договоры 9-16 от 26.12.2018) (л.д.  106 - 110).

Договоры 1 - 5 заключены в одну и ту же дату (13.08.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-1, составляла                                       30 066 руб. 95 коп., договора-2 – 30 066 руб. 95 коп., договора-3 – 30 066 руб. 95 коп., договора-4 –30 066 руб. 95 коп. и договора-5 – 30 066 руб. 95 коп., всего –                               150 334 руб. 75 коп.   

Договоры 6 - 8 также заключены в одну и ту же дату (13.09.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-6, составляла                                 30 066 руб. 95 коп., договора-7 – 30 066 руб. 95 коп. и договора-8 – 30 066 руб. 95 коп., всего – 90 200 руб. 85 коп.   

Договоры 9-16 также заключены в одну и ту же дату (26.12.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-9, составляла                                      66 608 руб. 55 коп., договора-10 – 38 004 руб. 16 коп., договора-11 – 88 410 руб. 67 коп., договора-12 – 72 306 руб. 85 коп., договора-13 – 65 505 руб. 97 коп., договора-14 – 38 004 руб. 16 коп., договора-15 – 65 505 руб. 97 коп. и договора-16 – 38 004 руб.  16 коп., всего –                         472 350 руб. 49 коп.

По результатам рассмотрения  дела № А36-5473/2019 суд пришел к выводу, что фактически спорные договоры 1 - 16 образуют три сделки, искусственно раздробленные и оформленные шестнадцатью договорами для формального соблюдения указанного в пункте 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе ограничения с целью уйти от соблюдения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Совокупная стоимость услуг, определенная в договорах 1 - 5, составляла                        150 334 руб. 75 коп., а в договорах 9 - 16 – 472 350 руб. 49 коп., что превышает установленный Законом о контрактной системе предельно допустимый размер стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (100 000 руб.).

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу                      № А36-5473/2019 было  установлено,  что предметом указанных договоров являлось оказание идентичных лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов и лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов.

            Совокупная стоимость услуг, оказываемых по договорам 9 и 10, определена в   размере 104 612 руб. 71 коп. (66 608 руб. 55 коп. + 38 004 руб. 16 коп.), по договорам 11 и 12 – в   размере 160 717 руб. 52 коп. (88 410 руб. 67 коп. + 72 306 руб. 85 коп.), по договорам 13 и 14 – в   размере 103 510 руб. 13 коп. (65 505 руб. 97 коп. +                                     38 004 руб. 16 коп.), по договорам 15 и 16 – в   размере 103 510 руб.  13 коп.                                (65 505 руб. 97 коп. + 38 004 руб. 16 коп.), что также превысило установленный пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предельно допустимый размер стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (100 000 руб.).

В решении Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу                   № А36-5473/2019 сделан  вывод,  что заключение ряда связанных между собой гражданско-правовых договоров (договоры 1 - 5 от 13.08.2018 и договоры 9 - 16 от 26.12.2018), фактически образующих две сделки, искусственно раздробленные на пять и восемь договоров для формального соблюдения специальных ограничений, предусмотренных Законом о контрактной системе, с целью уйти от необходимости проведения конкурентных процедур вступления в правоотношения с муниципальным заказчиком, по сути, дезавуирует его применение и открывает возможность для приобретения незаконных имущественных выгод, то есть свидетельствует о совершении действий в обход установленного законом порядка.

Поставка товара, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд при отсутствии государственного или муниципального контракта не порождают у исполнителя право требовать оплаты соответствующего предоставления (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2013  № 18045/12).

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2015 № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, иной подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в обход норм Закона                  № 44-ФЗ (статья 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных разъяснений, нарушение требований Закона контрактной системе предполагает недобросовестность обеих сторон сделки, в связи с чем, истец не может рассчитывать на получение платы, так как извлечение преимущества из незаконного или недобросовестного поведения противоречит статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая сделка совершается в обход явно выраженного запрета, установленного законом (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.02.2019 по делу № А23-1027/2018).

При указанных обстоятельствах, решением Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу № А36-5473/2019 было  отказано во взыскании основного долга по договорам 1 - 5 от 13.08.2018 в размере 150 334 руб. 75 коп. и договорам 9 - 16 от 26.12.2018 в размере 472 350 руб. 49 коп.

Так как искусственное дробление сделки, заключенной 13.09.2018, на три самостоятельных договора 6 - 8 по 30 066 руб. 95 коп. каждый, не повлекло за собой превышение установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предельно допустимого размера стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  с МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» была  взыскана  стоимость  услуг  в  размере 90 200 руб. 85 коп.

  По  результатам рассмотрения  материалов   настоящего  дела  арбитражный   суд  не   усматривает основания для взыскания неосновательного обогащения в размере                                  622 685 руб. 24 коп. (712 886 руб. 09 коп. - 90 200 руб. 85 коп.).

           Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

  В соответствии с пунктом 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

  Решением Арбитражного суда Липецкой области от 10 декабря 2019 года по делу                       № А36-5473/2019 установлено  отсутствие  муниципального контракта в  отношении оказания идентичных лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов и лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов, при  обязательности  его  заключения   в   силу   указанных  выше   обстоятельств.

           Плата за фактически оказанные услуги для государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного (муниципального контракта) не подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения. (Данный  правовой  подход  изложен  в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.08.2015 по делу № 309-ЭС15-26, А60-7371/2014.)

  Иной подход противоречил бы целям регулирования данных правоотношений и означал бы допущение согласования осуществления поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг без соблюдения требований, установленных Законом о контрактной системе, что открывало бы возможность для приобретения имущественных выгод недобросовестными поставщиками (исполнителями) и государственными или муниципальными заказчиками в обход закона (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

            По смыслу приведенных разъяснений, нарушение требований Закона контрактной системе предполагает недобросовестность обеих сторон сделки, в связи с чем, истец не может рассчитывать на получение платы в  качестве   неосновательного  обогащения, так как извлечение преимущества из незаконного или недобросовестного поведения противоречит статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

            С  учетом  указанного, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, руководствуясь статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что требование истца о взыскании неосновательного обогащения в размере  622 685 руб. 24 коп.  удовлетворению не подлежит.  

            В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

   По результатам рассмотрения настоящего дела судебные расходы на уплату   государственной   пошлины   в   размере  15454 руб.,  оплаченные  истцом  на  основании  платежного  поручения   № 175 от 11.03.2020г.,  относятся  на  истца.

   Руководствуясь статьями 110, 167-170, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  искового  заявления  Федерального автономного учреждения «Российский научно-исследовательский институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя                         г. Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 622 685 руб. 24 коп.  отказать.

  Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области. 

       Судья               Никонова Н.В.