Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«15» ноября 2019 г.                                             Дело № А64-4572/2019

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2019 года.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи А.В. Истомина,   

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Комаровой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»                         ( ИНН  6901067107, ОГРН 1046900099498) к 

Обществу с ограниченной ответственностью «СЭМ», г. Тамбов                                           (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

о взыскании договорной неустойки в размере 162 386,88 руб.

при участии в  судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности №Д-ТБ/101 от 01.07.2019г.,

от ответчика: не явился, извещен. 

Отводов не заявлено.

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СЭМ» о взыскании пени за нарушение установленных договором №6800/07641/18 на выполнение комплекса работ  по строительству энергетических объектов от 04.10.2018г. сроков выполнения работ за период с 27 ноября 2018 по 28.02.2019 в размере  162 386,88 руб.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, возражал против снижения размера неустойки. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, представил в материалы дела отзыв на иск от 06.08.2019, в котором просит суд снизить размер неустойки до 32 477,38 руб. (л.д. 62-63). 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика  по имеющимся в деле материалам.

Как следует из материалов дела, 04.10.2018г. между ПАО «МРСК Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» (Заказчик) и ООО «СЭМ» ( Подрядчик) был заключен договор №6800/07641/18 на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов ( далее- Договор). 

В соответствии с п.2.1. Договора, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ  Заказчику:

- проектно-изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием и Исходными данными Заказчика (Приложение №6 к Договору);

- Работы для технологического присоединения 1 заявителей, в том числе:

Строительство ЛЭП 10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ для технологическогоприсоединения придорожного сервиса, расположенного по адресу: 

<

...> КН 68:20:2701001:13174 (заявитель - ИП ФИО2) для нужд ПАО «МРСК Центра» ( филиал «Тамбовэнерго»);

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно п. 5.1 Договора срок выполнения работ – в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта, который является Приложением №3 к Договору : не более 53 календарных дней с момента заключения договора. 

Согласно п. 3.1 Договора, стоимость работ по Договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение №1 к Договору), которая составляет 1464000 руб., кроме того НДС (18%) составляет 263520 руб. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 727 520 руб.  

В силу п. 10.7 Договора датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик в установленный Договором срок работы не выполнил, нарушив условие о сроке исполнения обязательств.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» направил письменную претензию №МР1-ТБ/14/1466 от 05.03.2019 с предложением добровольной уплаты пени за просрочку исполнения обязательств по Договору ( л.д. 15-17). 

Однако данная претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

Пунктом 15.1 Договора Стороны согласовали возможность начисления пени, за несоблюдение срока окончания всех работ и/или сдачи результата работ Заказчику, в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Соответственно, за просрочку исполнения обязательств Ответчика перед Истцом по договору начислена пеня за период с 27.11.2018 по 28.02.2019 в размере 162 386,88 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

Оценив представленные документы, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части.

При этом суд руководствовался следующим.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Исходя из правил, установленных  в статьях 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать  от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований и должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются согласно правилам статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обязательства сторон  установлены договором №6800/07641/18 от 04.10.2018г. на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с п.2.1. Договора, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ  Заказчику:

- проектно-изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием и Исходными данными Заказчика (Приложение №6 к Договору);

- Работы для технологического присоединения 1 заявителей, в том числе:

Строительство ЛЭП 10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ для технологическогоприсоединения придорожного сервиса, расположенного по адресу: 

<

...> КН 68:20:2701001:13174 (заявитель - ИП ФИО2) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Тамбовэнерго»);

Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно п. 5.1 Договора срок выполнения работ – в соответствии с Календарным планом строительства (реконструкции) объекта, который является Приложением №3 к Договору : не более 53 календарных дней с момента заключения договора. 

Согласно п. 3.1 Договора, стоимость работ по Договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение №1 к Договору), которая составляет 1464000 руб., кроме того НДС (18%) составляет 263520 руб. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1727520 руб.  

В силу п. 10.7 Договора датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Поскольку ответчик не исполнил обязательство по выполнению работ в срок, установленный п.5.1. Договора, истец начислил ответчику неустойку.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если договором установлена неустойка за неисполнение обязанностей, связанных (последствиями прекращения основного обязательства, то условие о неустойке сохраняет силу и после прекращения основного обязательства, возникшего на основании этого договора (пункт 3 статьи 329 ГКРФ).

В соответствии с п. 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Пунктом 15.1 Договора Стороны согласовали возможность начисления пени, за несоблюдение срока окончания всех работ и/или сдачи результата работ Заказчику, в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Соответственно, за просрочку исполнения обязательств Ответчика перед Истцом по договору начислена пеня за период с 27.11.2018 по 28.02.2019 в размере 162 386,88 руб.

В силу пункта 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422). 

Таким образом, согласно нормам гражданского права стороны вправе самостоятельно определять в договоре размер неустойки, обеспечивающий исполнение обязательств.

Судом проверен расчет пени, расчет арифметически верен.

Факт и период просрочки исполнения обязательства ответчиком не оспорен, доказательств, подтверждающих оплату пени в полном объеме, ответчик не представил. 

Ответчик исковые требования не признал, представил отзыв на исковое заявление, ходатайствовал о снижении размера неустойки в порядке ст.333 ГК РФ, исходя из однократной учетной ставки Банка России до 32 477,38 руб. (л.д. 62-63).

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

По смыслу названной нормы основанием для снижения размера взыскиваемой неустойки является несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, уменьшение неустойки является правом, а не обязанностью суда, а наличие оснований для снижения и определения критериев соразмерности определяется судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. 

В соответствии с п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В силу п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Согласно п. 72 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

В силу п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитор; возлагается на ответчика.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что  возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Ответчик считает данный размер неустойки явно несоразмерным последствиям нарушенных обязательств и просил суд снизить размер неустойки.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 указано, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Согласно п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016, снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (п. 1,2 ст. 333 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки (пени); значительное превышение суммы неустойки (пени) суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательства и другое.

При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

Доказательством несоразмерности неустойки в данном случае является чрезмерно высокий процент договорной пени, так как в данном случае пеня начислена исходя из 0,1% за каждый день просрочки.

Суд учитывает, что возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки, несоразмерность неустойки последствиям нарушения.

Суд принял во внимание часть вторую пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации", согласно которому, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. 

Учитывая компенсационную природу неустойки, отсутствие в материалах дела сведений о причиненных истцу убытках, наступивших вследствие нарушения ответчиком условий Договора, суд считает, что размер пени, рассчитанный истцом, явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным снизить размер правомерно примененной к ответчику суммы пени в размере 162 386,88 руб., подлежащей уплате, до 80 000 руб. за период с 27.11.2018 по 28.02.2019.

В удовлетворении остальной части исковых требований в части взыскания неустойки следует отказать.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

 Довод ответчика о необходимости снижения пени, исходя из однократной учетной ставки Банка России до 32477,38 руб., судом отклоняется, поскольку снижение неустойки ниже двукратной учетной ставки Банка России допускается в исключительных случаях согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации", в то время как ответчик не представил какие-либо доказательства наличия исключительных обстоятельств, при которых возможно снижение размера неустойки ниже двукратной ставки рефинансирования.

Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу. 

Судебные расходы по уплате госпошлины на основании ст.110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЭМ», г. Тамбов                                           (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала                  ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», г. Тамбов (ОГРН 

<

***>,                           ИНН 

<

***>) неустойку по договору №6800/07641/18 от 04.10.2018 на выполнение работ по строительству энергетических объектов за период с 27.11.2018 по 28.02.2019 в размере 80 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере                  5 872 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

2. Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

3. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу 394006, г.Воронеж, ул. ФИО3, д. 8  через Арбитражный суд Тамбовской области.

СудьяА.В. Истомин