Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

24. 11. 2021 года.                                                Дело № А40-88640/21-43-613

Резолютивная часть решения объявлена 19. 11. 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 24. 11. 2021 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГБУ " Гормост " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Новая строительная компания " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 50 455 руб. 28 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность № 952 от 28.01.2021 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя,  арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 50 455 руб. 28 коп. – неустойки, на основании статей  309, 310 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

22.04.2019г. между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Новая строительная компания» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200557919000115_275214 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Совхоз 1 мая МКАД (далее - «Контракт»).

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Совхоз 1 мая МКАД, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 627 833 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 19.09.2019г. включительно.

Согласно Акту №  1  о приемке выполненных работ от  19.11.2019г.  ООО  «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 62 783,30 руб.

Согласно Акту №  2  о приемке выполненных работ от 26.12.2019г.  ООО  «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 565 049,70 руб.

Таким образом,  ООО «Новая строительная компания» исполнило принятые на себя обязательства в полном объеме только 26.12.2019г.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п. 7.7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-817 за период просрочки с 20.09.2019г. по 24.09.2019г. на сумму 732,47 руб. Данная претензия оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1311 от 26.12.2019г. за период просрочки с 25.09.2019г. по 26.12.2019г. на сумму 12 147,51 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

Согласно требованиям претензии № 118/19-1311 от 26.12.2019г.: Количество дней просрочки за период с 25.09.2019г. по 26.12.2019г. включительно составляет 93 дня. Сумма неоплаченной неустойки за период с 25.09.2019г. по 26.12.2019г. составляет 12 147,51 руб. Таким образом, по контракту № 0373200557919000115J275214 задолженность по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 12 147,51 руб.

29.04.2019г. между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Новая строительная компания» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200557919000104_275214 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе автодорожном «Вешняковский» (Контракт).

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе автодорожном «Вешняковский», а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 637 177 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 26.09.2019г. включительно.

Согласно Акту № 1 о приемке выполненных работ от 19.11.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 63 717,70 руб.

Согласно Акту № 2 о приемке выполненных работ от 26.12.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 382 306,20 руб.

Согласно Акту № 3 о приемке выполненных работ от 26.12.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 191 153,10 руб.

Таким образом, ООО Новая строительная компания» исполнило принятые на себя обязательства в полном объеме только 26.12.2019г.

В соответствии с п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Подрядчик несет ответственность.

Согласно п. 7.7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-871 за период просрочки с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. на сумму 2 824,82 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1177 от 16.12.2019г. за период просрочки с 20.11.2019г. по 12.12.2019г. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1305 от 26.12.19г. за период просрочки с 13.12.2019г. по 26.12.2019г. Данная претензия оплачена ответчиком.

Согласно требованиям претензии № 118/19-871 от 15.10.2019г.: Количество дней просрочки за период с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. включительно составляет 19 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. составляет 2 824,82 руб. Согласно требованиям претензии № 118/19-1177 от 16.12.2019г.: Количество дней просрочки за период с 16.10.2019г. по 12.12.2019г. включительно составляет 58 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 16.10.2019г. по 12.12.2019г. составляет 7 689,64 руб. Таким образом, по контракту № 0373200557919000104_275214 задолженность по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 10 514,46 руб. (2 824,82 руб. + 7 689,64 руб.).

06.05.2019г. между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Новая строительная компания» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200557919000112_275214 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Молодогвардейский МКАД (Контракт).

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Молодогвардейский МКАД, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 525 030 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 03.10.2019г. включительно.

Согласно Акту № 1 о приемке выполненных работ от 31.10.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 52 503 руб.

Согласно Акту № 2 о приемке выполненных работ от 26.12.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 472 527 руб.

Таким образом, ООО Новая строительная компания» исполнило принятые на себя обязательства в полном объеме только 26.12.2019г.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-873 от 15.10.2019г. за период просрочки с 04.10.2019г. по 15.10.2019г. на сумму 1 470,09 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1158 от 12.12.2019г. за период просрочки с 16.10.2019г. по 11.12.2019г. на сумму 6 017,71 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1310 от 26.12.2019г. за период просрочки с 12.12.2019г. по 26.12.2019г. на сумму 1 476,65 руб. Данная претензия оплачена Ответчиком.

Согласно требованиям претензии № 118/19-873 от 15.10.2019г.: Количество дней просрочки за период с 04.10.2019г. по 15.10.2019г. включительно составляет 12 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 04.10.2019г. по 15.10.2019г. составляет 1 470,09 руб. Согласно требованиям претензии № 118/19-1158 от 12.12.2019: Количество дней просрочки за период с  16.10.2019г. по 11.12.2019г.включительно составляет 57 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 16.10.2019г. по 11.12.2019г. составляет 6 017,71 руб. Таким образом, по контракту № 0373200557919000112_275214 задолженность по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 7 487,80 руб. (1470,09 руб. + 6 017,71 руб.).

29.04.2019г. между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Новая строительная компания» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200557919000102_275214 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на эстакаде Разворотная Боровская (Контракт).

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на эстакаде Разворотная Боровская, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 645 879 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 26.09.2019г. включительно.

Согласно Акту № 1 о приемке выполненных работ от 17.10.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 64 587,90 руб.

Согласно Акту № 2 о приемке выполненных работ от 26.12.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 581 291,10 руб.

Таким образом, ООО Новая строительная компания» исполнило принятые на себя обязательства в полном объеме только 26.12.2019г.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-870 от 15.10.2019г. за период просрочки с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. на сумму 2 863,40 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1174 от 16.12.2019г. за период просрочки с 16.10.2019г. по 12.12.2019г. на сумму 7 332,88 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1308 от 26.12.2019г. за период просрочки с 13.12.2019г. по 26.12.2019г. на сумму 1 695,43 руб. Данная претензия оплачена Ответчиком.

Согласно требованиям претензии № 118/19-870 от 15.10.2019г.: Количество дней просрочки за период с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. включительно составляет 19 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 27.09.2019г. по 15.10.2019г. составляет 2 863,40 руб. Согласно требованиям претензии № 118/19-1174 от 16.12.2019г.: Количество дней просрочки за период с 16.10.2019г. по 12.12.2019г. включительно составляет 58 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 16.10.2019г. по 12.12.2019г. составляет 7 332,88 руб. Таким образом, по контракту № 0373200557919000102_275214 задолженность по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 10 196, 28 руб. (2 863, 40 руб.+ 7 332,88 руб.).

26.04.2019г. между ГБУ «Гормост» (Заказчик) и ООО «Новая строительная компания» (Подрядчик) был заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № Ф.2019.206114 на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Ярославский а.д МКАД (Контракт).

В рамках данного Контракта Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по ремонту с заменой конструкций деформационных швов на путепроводе Ярославский а.д МКАД, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 628 814 руб. (п.2.1 Контракта).

Согласно п. 3.1 Контракта срок выполнения работ составляет 150 календарных дней с момента заключения контракта, то есть до 23.09.2019г. включительно.

Согласно Акту № 1 о приемке выполненных работ от 25.10.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 62 881,40 руб.

Согласно Акту № 2 о приемке выполненных работ от 26.12.2019г. ООО «Новая строительная компания» выполнило часть работ на сумму 565 932,60 руб.

Таким образом, ООО Новая строительная компания» исполнило принятые на себя обязательства в полном объеме только 26.12.2019г.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-815 от 25.09.2019г. за период просрочки с 24.09.2019г. на сумму 146,73 руб. Данная претензия оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1179 от 16.12.2019г. за период просрочки с 25.09.2019г. по 12.12.2019г. на сумму 10 109,23 руб. Данная претензия не оплачена Ответчиком.

В адрес подрядчика направлялась претензия № 118/19-1304 от 26.12.2019г. за период просрочки с 13.12.2019г. по 26.12.2019г. на сумму 1 650,64 руб. Данная претензия оплачена Ответчиком.

Согласно требованиям претензии № 118/19-1179 от 16.12.2019г.: Количество дней просрочки за период с 25.09.2019г. по 12.12.2019г. включительно составляет 79 дней. Сумма неоплаченной неустойки за период с 25.09.2019г. по 12.12.2019г. составляет 10 109,23 руб. Таким образом, по контракту № Ф.2019.206114 задолженность по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства составляет 10 109,23 руб.

Всего неустойка составляет 50 455, 28 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 50 455 руб. 28 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с ООО " Новая строительная компания " (ОГРН 

<

***>) в пользу ГБУ " Гормост " (ОГРН 

<

***>) 50 455 руб. 28 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 2 018 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья

ФИО1