5/2023-227202(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-8979/2023

г. Владивосток

21 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 сентября 2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2023 года.  Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарём Шпак Д.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного унитарного  предприятия "Приморский водоканал" (ИНН 2503022413, ОГРН 1042501100267)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Авангард"  (ИНН 2536125894, ОГРН 1022501274773)  

о взыскании 1 167 796 рублей 49 копеек, 

от истца - Кашуба Н.Р., доверенность от 09.01.2023, паспорт, диплом  от ответчика – руководитель Серов К.Г., приказ № 1/2022 от 23.11.2022, паспорт;  

установил:

краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"  (далее – истец, предприятие) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с  ограниченной ответственностью "Строительная компания Авангард" (далее – ответчик,  общество) о взыскании 1 167 796 рублей 49 копеек, в том числе 905 268 рублей 60  копеек авансового платежа, 111 649 рублей 79 копеек пени, 150 878 рублей 10 копеек  штрафа.  

Истец требования поддержал в полном объеме, указал, что в отсутствии  оснований, при прекращенном договоре, ввиду одностороннего отказа от него  предприятием, ответчик уклоняется от возврата авансового платежа.  

Ответчик требования оспорил, по основаниям, изложенным в отзыве на иск, на  продолжении договорных отношений не настаивал, не отрицая наличие обязанности по  возврату аванса, полагает, что основания для взыскания предусмотренных договором  штрафных санкций отсутствуют, поскольку работы были обществом приостановлены, в  связи с тем, что в ходе производства работ при разработке грунта (контрольной  разработки траншеи) на объекте было выявлено, что по трассе прокладки проектного  трубопровода находится высоковольтный электрический кабель, не нанесённый в  переданной в работу технической документации.  

 Из материалов дела суд установил следующее. 

02.02.2023 между предприятием (заказчик) и обществом (подрядчик) заключён  договор № 527/23 на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке сетей  холодного водоснабжения и водоотведения в рамках подключения (технологического  присоединения) на объекте: «Жилой комплекс по адресу: г. Владивосток, ул. Басаргина,  Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями  судей по делу № А51-8979/2023 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных  дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:  

 Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал  государственных услуг (ЕСИА).  

вл.2».  

В соответствии с пунктом 1.2. договора срок начала работ: не позднее 3 (трех)  дней с момента подписания договора, т.е. не позднее 05.02.2023.  

Срок окончания работ: не позднее 135 (ста тридцати пяти) дней с момента начала  работ, из них:  

-30 дней с момента начала работ - подготовительные работы (открытия ордера на  производство земляных работ, организация строительной площадки, закупка  материалов);  

45 дней - строительно-монтажные работы, окончание всех строительных работ; 

60 дней с момента окончания всех строительных работ - сдача объекта (передача  заказчику документации согласно п. 4.8 «3 этап. Передача Заказчику»).  

 Во исполнение условий договора истец произвел авансирование в сумме  905 268 рублей 60 копеек, что подтверждается представленным в материалы дела  платёжным поручением № 1309 от 09.02.2023.  

Как следует из иска, ООО «СК Авангард» в период с 20.02.2023 по 21.02.2023  произвел разработку грунта под водопроводную камеру, с 22.02.2023 работы на объекте  не ведутся.  

29.03.2023 заказчиком принято и направлено подрядчику решение об  одностороннем отказе от договора, мотивированное нарушением обществом сроков  производства работ, с требованием возвратить аванс и выплатить штрафные санкции по  договору.  

 Согласно отчету, сформированному официальным сайтом Почты России по  почтовому идентификатору 69008881052081, письмо истца прибыло в место вручения  30.03.2023, но не было вручено адресату по обстоятельствам, независящим от  отправителя. При таких обстоятельствах, в силу статьи 165.1 ГК РФ уведомление  считается доставленным, так как не было вручено адресату по обстоятельствам,  зависящим от самого адресата.  

Данную претензию подрядчик оставил без ответа. 

В связи с тем, что до настоящего времени аванс ответчиком не возвращён,  штрафные санкции по договору не уплачены, истец обратился с настоящим иском в  арбитражный суд.  

Заслушав пояснения сторон, исследовав и оценив в соответствии со статьями 65,  71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования  подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.  

Сложившиеся между истцом и ответчиком правоотношения подлежат  регулированию как общими положениями гражданского законодательства, так и  нормами главы 37 ГК РФ (подряд).  

 В силу с пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

  Как указано в статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

 Факт перечисления денежных средств ответчику в счет оплаты по договору в  размере 905 268 рублей 60 копеек подтвержден материалами дела, ответчиком не  оспорен, доказательств освоения указанных денежных средств в материалах дела не  представлено.  

С учетом того, что ответчик не настаивал на продолжении договорных отношений,  суд приходит к выводу о том, что договор прекратил свое действие, в связи с отказом  заказчика от его исполнения одностороннем порядке.  

Согласно пункту 3 статьи 450, пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса  Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора  полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением  сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При  расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до  расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей  их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала, являются  неосновательным обогащением получателя и подлежат возвращению другой стороне  (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 11.01.2000 № 49, пункт 5 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35).  

Таким образом, при прекращении договора требование заказчика о возврате  неизрасходованного аванса подлежит разрешению в соответствии с нормами главы 60  ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего  Кодекса.  

Пункт 3 статьи 1103 ГК РФ допускает применение правил о неосновательном  обогащении к требованиям одной стороны обязательства к другой о возврате  исполненного в связи с этим обязательством.  

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров,  связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что при  расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если  другая сторона неосновательно обогатилась.  

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в  качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные  средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было  предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне  ответчика имела бы место необоснованная выгода. Получатель средств, уклоняясь от их  возврата, несмотря на отпадение основания для удержания, должен рассматриваться как  лицо, неосновательно удерживающее средства.  

При таких обстоятельствах в связи с расторжением договора сумма неосвоенного  аванса является неосновательным обогащением ответчика.  

В рассматриваемом случае требование о возврате неосвоенной суммы оплаты по  договору, произведенной истцом, является следствием отказа от договора. Ответчик, в  отсутствие оснований для удержания, уклоняется от возврата денежных средств истцу и  является лицом, неосновательно удерживающим денежные средства.  

Факт неисполнения ответчиком обязательств по договору до момента его  расторжения материалами дела подтвержден.  

Подтверждая размер неосновательного обогащения ответчика, истец в материалы  дела представил платежные поручения. В свою очередь ответчик не представил  доказательств полного освоения данных денежных средств, а также своего расчета  стоимости и объема выполненных работ.  

Таким образом, с учетом того, что спорный договор прекращен, а ответчик не  настаивал на продолжении договорных отношений, требования о взыскании с ответчика  неосвоенного аванса являются законными, обоснованными и подлежат  удовлетворению.  

 Рассматривая требования о взыскании начисленных истцом штрафных санкций,  суд исходит из следующего.  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.  

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

 В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

 Ответственность подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по  договору согласована сторонами.  

 Так за просрочку исполнения обязательств, принятых по договору, подрядчик по  требованию заказчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости выполняемых по  договору работ за каждый день просрочки обязательств, но в сумме, не превышающей  20 % цены договора (пункт 2.1 договора).  

 Согласно пункту 5.4. договора за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором  размер штрафа составляет 5 % от цены договора.  

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

 Как указал ответчик, в числе проектной и рабочей документации к договору  обществу был передан генеральный план со схемой расположения систем  водоснабжения и водоотведения, сетей теплоснабжения и кабельных линий. Однако, в  ходе производства работ при разработке грунта на объекте было выявлено, что по трассе  прокладки проектного трубопровода находится высоковольтный электрический кабель,  не нанесённый в переданной в работу технической документации, указанные  обстоятельства были доведены до сведения предприятия уведомлением от 20.02.2023,  которым подрядчик просил оказать содействие в поиске потребителя,  эксплуатирующего выявленную кабельную линию, в получении необходимых  согласований и разрешений на производство работ в охранных зонах вблизи линий  электропередач, направить своего представителя с надлежаще оформленными  полномочиями для участия в выполнении шурфления (контрольного вскрытия)  кабельной линии под надзором представителей Приморские электрические сети АО  «ДРСК», потребителя эксплуатирующего кабельную линию, для уточнения  расположения кабеля и глубины его залегания, внести изменения в проект  производства работ и проектную документацию с учетом выявленных обстоятельств. В  случае отказа внесения изменений в проектную документацию общество просило дать  письменное указание о способах и методах производства работ при выявленных  обстоятельствах.  

 Уведомлением от 20.02.2023 (исх. № 19) общество заявило о приостановлении  работ по договору подряда, в связи с обнаружением не зависящих от подрядчика  обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой  

работы либо создают невозможность ее завершения в срок, а также могут причинить  вред имуществу третьих лиц, жизни и здоровью людей, до устранения обстоятельств  этому послуживших, что согласуется с нормами статьи 716 ГК РФ.  

 20.02.2023 до истечения установленного договором срока, отведенного на  подготовительные работы (06.03.2023) указанные уведомления направлены обществом  предприятию по адресу электронной почты, указанной в договоре.  

 Как разъяснено в пунктах 57, 59 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их  исполнении», встречным признается исполнение обязательства одной из сторон,  которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств, вне  зависимости от того, предусмотрели ли стороны очередность исполнения своих  обязанностей.  

Если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить  своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные  законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или  существа обязательства, применению подлежат положения статьей 405, 406 ГК РФ.  

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон  (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено  надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального  исполнения), юридически значимыми для целей установления виновного лица и  применения к нему мер ответственности, являются обстоятельства того, какой из сторон  должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также  обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в  отсутствие исполнения другого.  

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором  подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (пункт 1 статьи 718  ГК РФ).  

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что в случае отказа  внесения изменений в проектную документацию предприятием общество просило дать  письменное указание о способах и методах производства работ при выявленных  обстоятельствах того, что по трассе прокладки проектного трубопровода находится  высоковольтный электрический кабель, не нанесённый в переданной в работу  технической документации.  

Несмотря на своевременное предупреждение подрядчиком об обстоятельствах,  невозможности исполнения условий договора заказчик не предпринял действий по  внесению изменений в техническую документацию, указание о способах и методах  производства работ не выдал, не оказав содействие подрядчику в выполнении работ.  Доказательств иного в материалах дела не представлено.  

Доказательств наличия у подрядчика возможности выполнить весь  предусмотренный договором объём работ в оговоренный срок, при выявлением в ходе  выполнения работ потребности во внесении изменений в техническую документацию к  договору, истец не представил.  

Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть  исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405,  пунктом 1 статьи 406 ГК РФ.  

Таким образом, подрядчик не может нести ответственность за неисполнение  обязательства в случае, если такое неисполнение было вызвано действиями заказчика. В  свою очередь, подрядчик, уведомив заказчика о нахождении высоковольтного  электрического кабеля, не учтенного в переданной в работу технической документации,  приостановив работы, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства,  

проявив должную степень заботы и осмотрительности, которая от него требовалась по  характеру обязательства, что позволяет суду считать подрядчика невиновным в  исполнении обязательства с просрочкой, с учётом подлежащих применению положений  статьи 401 ГК РФ.  

Суд отмечает, что с учетом позиции, изложенной в из смысла пункта 3 статьи 716  ГК РФ следует, что указания заказчика, которые даются в ответ на предупреждение  подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 указанной статьи, должны быть  направлены на принятие мер к устранению обстоятельств, препятствующих  исполнению договора, а не на его расторжение, что однозначно свидетельствует о  неправомерности действий заказчика (определение ВАС РФ от 24 февраля 2011 г. N  ВАС-2095/11).  

Согласно разъяснений, изложенных в Пленуме Верховного Суда Российской  Федерации в Постановлении от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых  положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить  из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего  права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе, в  получении необходимой информации.  

Кроме того, исходя из заявленного истцом периода начисление неустойки (с  06.02.2023 по 28.03.2023), фактически период просрочки исполнения обязательства,  предшествует дате окончания производства работ, как обязательства,  предусмотренного договором (19.06.2023).  

В этой связи, поскольку условиями договора не предусмотрена возможность  начисления санкций за нарушение срока начала производства работ, требования истца  в части взыскания 111 649 рублей 79 копеек пени неправомерно.  

На основании изложенного при отсутствии вины подрядчика в просрочке  выполнения работ суд отказывает во взыскании штрафных санкции в полном объеме.  

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны  пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  Авангард" в пользу краевого государственного унитарного предприятия "Приморский  водоканал" 905 268 рублей 60 копеек неосновательного обогащения и 19 130 рублей  расходов по уплате государственной пошлины по иску.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А.