Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-134435/2019

03 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  30 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  03 августа 2020 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (адрес:  Россия 121471, Москва, Рябиновая дом 43, корп 1, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭВРИКА" (адрес:  Россия 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 118, а/я 43; Россия 196084, Санкт-Петербург, УЛИЦА КОЛИ ТОМЧАКА, ДОМ 9, ЛИТЕР Б, ПОМ. 1-Н,, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

третье лицо:  

о взыскании 29 741 920 руб. 00 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 22.05.20

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.02.20

                          ФИО4 по доверенности от 22.07.20

установил:

ФГУП "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ предъявило иск о взыскании с АО "ЭВРИКА" и после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ответчика 17 889 945 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании контракта № 400 /К/14/36 от 07.06.14.

Требование о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по 5 этапу работ в размере 1 120 208 руб. 72 коп, изложенное в заявлении об уточнении иска судом не принято, так как оно первоначально не заявлялось. Данное требование может быть рассмотрено в отдельном исковом производстве.

Встречный иск о взыскании неустойки, процентов и прекращении требования зачетом не принят как направленный на затягивание рассмотрения дела.

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве.

Судом установлено:

07.06.2014 между федеральным государственным унитарным предприятием «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами Президента Российской Федерации (далее - Истец, Исполнитель) и Закрытым акционерным обществом «ЭВРИКА» (с 09.07.2019 - Акционерное общество «ЭВРИКА») (далее - Ответчик, Заказчик) заключен Контракт № 400/К/14/36 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (шифр Парсек-И2 ПК) (далее - Контракт).

В соответствии с условиями Контракта Ответчик является Головным исполнителем по Государственному контракту от 09.06.2014 № 14/198/ОКР, заключенному между Генеральным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации и Головным исполнителем - АО «ЭВРИКА».

        Условиями Контракта предусмотрены шесть этапов выполнения, приемки и оплаты работ.

Содержание, сроки выполнения составной части опытно-конструкторской работы (далее - СЧ ОКР) (этапов СЧ ОКР), цена этапов СЧ ОКР, а также ожидаемый результат СЧ ОКР (этапов СЧ ОКР) определяется пунктом 2.2. Контракта.

           Дополнительным соглашением от 15.09.2014 № 1 сроки и цены этапов скорректированы.

В соответствии с пунктом 2.2. Контракта, участие Истца в Государственных, испытаниях Генерального заказчика является завершающей стадией пятого этапа контракта.

Исходя из пункта 3.2.1. Контракта, Исполнитель выполняет работы в порядке, определенном ГОСТ РВ 15.203-2001.

В соответствии с Контрактом в порядке, определенном ГОСТ РВ 15.203-2001, доработка программной документации осуществляется в рамках 6 этапа СЧ ОКР по утвержденному Плану-графику.

Доработка исполнителем замечаний и рекомендаций по результатам Государственных испытаний  пятым этапом Контракта не предусмотрена.

           Начиная с 2016 государственные испытания неоднократно приостанавливались по инициативе Генерального заказчика.

В настоящее время Государственные испытания СЧ ОКР, проведенные Генеральным заказчиком завершены.

В соответствии с текстом выписки из Акта Государственных испытаний, проведенных генеральным    заказчиком    опытный    образец    АИАС-2 государственные  испытания  выдержал.  Требованиям  ТТЗ  соответствует. Выявленные недостатки не препятствуют дальнейшему продолжению работы.

Факт выполнения Исполнителем и результат работ подтверждены выпиской из Акта Государственных испытаний, утвержденного решением от 22.01.2019 № 323/2/143дсп, поступивший в адрес Исполнителя 27.02.2019.

Исполнителем 01.04.2019 (Исх-444/ГлавНИВЦ) и 22.04.2019 (Исх-554/ГлавНИВЦ уточненное) в адрес Заказчика направлены сопроводительные письма с актом сдачи - приемки выполненного пятого этапа и документацией, на которые Заказчик ответил отказом в принятии работ и подписания акта сдачи-приемки этапа.

Начиная с апреля 2019 по октябрь 2019 заказчик уклонялся от подписания акта сдачи - приемки выполненного пятого этапа Контракта, в том числе, по результатам проведенных переговоров при участии Генерального заказчика по надуманным основаниям.

После неоднократного уклонения в подписании Заказчиком акта сдачи -приемки, а также после направленной в адрес Заказчика досудебной претензии от 10.06.2019 № исх. 721/ГлавНИВЦ, исполнителем в очередной раз направлен акт сдачи - приемки выполненного 5 (пятого) этапа (16.09.2019 Исх-1140/ГлавНИВЦ), который подписан Заказчиком 18.10.2019.

В соответствии с пунктом 2.2. Контракта цена 5 (пятого) этапа СЧ ОКР составляет 79 000 000 руб. 00 коп.

Заказчиком выплачен аванс за выполнение работ по 5 (пятому) этапу Контракта в размере 31 600 000 (тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением от 24.03.2016 № 1557.

Фактически Исполнителем выполнены работы, предусмотренные 5 (пятым) этапом Контракта, что подтверждается выпиской из Акта государственных испытаний опытного образца, утвержденного решением от 22.01.2019 № 323/2/143дсп и актом сдачи - приемки этапа СЧ ОКР по этапу 5, подписанного Заказчиком 18.10.2019.

Вместе с тем Ответчиком оплачена часть задолженности выполненного Истцом 5 (пятого) этапа Контракта в размере 17 658 080 (семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят рублей) 00 копеек, что подтверждается платежным поручением от 29.11.2019 № 119.

В соответствии с пунктом 3.4.1. Контракта, Заказчик обязан принять результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) и оплатить результат СЧ ОКР (этапа СЧ ОКР) в соответствии с требованиями и на условиях, установленных контрактом.

Однако до настоящего момента обязательства заказчика по оплате выполненного Исполнителем пятого этапа Контракта не исполнены, оплата в полном объеме не произведена.

Разделом №9 Контракта предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров.

Во исполнение условий Контракта Истцом в адрес Ответчика направлена досудебная претензия от 10.06.2019 о подписании акта сдачи - приемки и оплате выполненных работ, предусмотренных 5 (пятым) Контракта (Исх-721/ГлавНИВЦ) на которую Заказчик ответил отказом (письмо от 26.07.2019 № 2417/016).

Претензионные требования заказчиком не исполнены.

В нарушение условий Контракта, обязательства Заказчика перед Исполнителем за выполненные работы, предусмотренные 5 (пятым) этапом Контракта исполнены частично на сумму оплаченного аванса в размере 31 600 000 руб. 00 коп. и произведенных платежей. В настоящее время задолженность ответчика по оплате работ составляет 17 889 945 руб. 00 коп. 

Расходы  по оплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру исковых требований.

В связи с уменьшением суммы иска истцу подлежит возврату 59 260 руб. 00 коп. государственной пошлины

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "ЭВРИКА" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 889 945 руб. 00 коп. задолженности и 112 450 руб.00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выдать ФГУП "ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ справку на возврат государственной пошлины в размере 59 260 руб. 00 коп. по платежному поручению № 2518 от 12.12.19.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                                                                                         Сергеева О.Н.