21/2017-234792(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 06 октября 2017 года 

по делу № А33-22054/2017 Красноярск

6 октября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить, внести изменения в заключенный акционерным обществом "Терри- ториальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" и краевым государ- ственным автономным учреждением "Спортивный комплекс "Авангард-СТМ" государствен- ной контракт от 10.11.2016 № 35/2016-1 на выполнение комплекса работ по корректировке  проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция спортивного комплекса  «Авангард», г. Красноярск («Региональный центр по регби. Спортивный комплекс «Авангард» (2 этап)»), изложив в следующей редакции:  

 пункт 1.5: «Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта  с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы и не позднее  15.11.2017»;  

пункт 10.3 «Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и  действует до 31.12.2017 либо полного исполнения ими своих обязательств. Окончание дей- ствия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств.».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Р. Смольникова