ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

20.07.2017                                                                               Дело №А72-5262/2017   

г.Ульяновск

Резолютивная часть решения объявлена 13.07.2017. 

Полный текст решения изготовлен 20.07.2017.

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Рыбалко И.В.,

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Ульяновск

к Администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п.Новоспасское

третье лицо: Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр-Юг» , Ульяновская обл., Новоспасский р-н, р.п.Новоспасское 

о взыскании 6 596 796 руб. 73 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2, доверенность №132/16 от 05.10.2016;

от ответчика – не явился, уведомлен;

от третьего лица – не явился, уведомлен; 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Ульяновская сетевая компания» обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к Администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области о взыскании основного долга в сумме 5 010 973 руб. 84 коп., неустойки в сумме 1 174 897 руб. 98 коп. за период с 20.09.2016 по 11.04.2017, неустойки с 12.04.2017 по день фактической оплаты основного долга.

Определением от 06.06.2017 Арбитражный суд Ульяновской области привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр-Юг».

Определением от 04.07.2017 Арбитражным судом Ульяновской области удовлетворено ходатайство истца об увеличении размера исковых требований, в котором истец просит суд взыскать с ответчика основной долг в сумме 5 010 973 руб. 84 коп., неустойку в сумме 1 585 822 руб. 89 коп. за период с 03.10.2016 по 04.07.2017, неустойку с 05.07.2017 по день фактической оплаты основного долга, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора 18.10.2012, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Через канцелярию Арбитражного суда Ульяновской области от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с занятостью представителя в другом судебном процессе. 

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство об отложении судебного заседания, арбитражный суд считает необходимым оставить его без удовлетворения ввиду отсутствия процессуальных оснований.

Ответчик и третье лиц явку представителей в судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом.

При данных обстоятельствах дело рассматривается в отсутствие не явившихся лиц в порядке ст.156 АПК РФ по имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

При этом суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 09.02.2012 между Открытым акционерным обществом «Ульяновская сетевая компания» (правопредшественник истца) (Сетевая организация) и Администрацией муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (Заявитель) оформлен договор №943 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Ульяновская сетевая компания», в соответствии с которым Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 520кВт;

б) категория надежности – II;

в) класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 10кВ;

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п.1 договора) (л.д.9-10).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ледового дворца, который будет располагаться по адресу: Ульяновская обл., р.п.Новоспасское, ул.70 лет ВЛКСМ, 1Б (п.2 договора).

Точки присоединения указаны в технических условиях №1028ип от 29.11.2011 для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) (п.3 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет два года со дня заключения настоящего договора (п.5 договора).

В соответствии с п. 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила).

Согласно пункту 6 указанных Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, если такое разрешение требуется;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1.

29.11.2011 заявителю – Администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области выданы технические условия №1028ип на технологическое присоединение объекта: ледовый дворец, расположенного по адресу: р.п.Новоспасское, ул.70лет ВЛКСМ, 1Б (Приложение № 1 к Договору технологического присоединения №943 от 09.02.2012) (л.д.13)

 Согласно п.4 договора №943 от 09.02.2012 технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении. 

Техническими условиями были предусмотрены следующие мероприятия по технологическому присоединению 

1.1.Со стороны ОАО «УСК»:

1.1.1.Строительство ВЛЗ-10кВ от ПС «Нагорная» 110/35/10кВ в сторону проектируемого объекта. Длину и сечение провода определить проектным решением.

1.1.2.Демонтаж участка линии ВЛ-10кВ яч.№7 ПС «Новоспасская» 35/10кВ в пролете опор №69 и №74, длину определить проектным решением.

1.1.3.Строительство участка линии на ВЛ-10кВ яч.№7 ПС «Новоспасская» 35/10кВ от опоры № 129 до опоры №141. Сечение и длину провода определить проектным решением.

1.1.4.Монтаж разъединителя РК-1, кольцующий ВЛ-10кВ яч. №7 ПС «Новоспасская» 35/10кВ и ВЛ-10кВ яч. №13 ПС «Нагорная» 110/35/10кВ. Место монтажа определить проектным решением.

1.2.Co стороны Заявителя:

1.2.1.Точки присоединения установить:

ввод №1-ближайшая опора ВЛ-10кВ яч.№13 ПС «Нагорная»

ввод №2-ближайшая опора-вновь проектируемой ВЛЗ-10кВ ПС «Нагорная».

1.2.2.Строительство двух ВЛЗ-10кВ от точек присоединения до проектируемой ТП через разъединители, предусмотреть защиту линий от перенапряжений, длину и сечение проводов определить проектным решением.

1.2.3.Строительство двухтрансформаторной подстанции с силовыми трансформаторами ТМ-630кВА.

1.2.3.1.Комплектацию ТП определить проектным решением.

1.2.3.2.Предусмотреть защиту от перенапряжений (ОПН) и токов КЗ по 10кВ и 0,4кВ расчетных номиналов.

1.2.4.Прокладка линий электропередач 0,4кВ от проектируемой ТП доэнергопринимающего устройства дворца. Тип ЛЭП, способ прокладки, количество, длину, марку и сечение проводников определить проектным решением.

Согласно п.3.2 Технических условий работа по присоединению объекта производится после утверждения акта о выполнении настоящих технических условий, акта разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, при наличии акта допуска Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и заключения договора энергоснабжения.

Срок действия Технических условий был установлен в 2 года. Впоследствии Технические условия на технологическое присоединение №1028ип от 29.11.2011 были продлены до 29.11.2015.

Согласно пп.«а», «б» п.8 договора №943 от 09.02.2012 Заявитель обязуется:

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

В соответствии с пп.«а», «б» п.6 договора №943 от 09.02.2012 Сетевая организация обязуется:

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

-осуществить проверку выполнения технических условий в течение 15 календарных дней с момента получения от Заявителя письменного уведомления об их выполнении. Проверка выполнения технических условий оформляется сторонами Актом о выполнении технических условий и Актом разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

-присоединение энергопринимающих устройств Заявителя выполняется в течение 5 календарных дней с момента получения документов, подтверждающих готовность оборудования Заявителя к приему электрической энергии:

     -акта о выполнении технических условий;

     -уведомления от энергоснабжающей организации о заключении договора энергоснабжения.

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя оформляется Актом о технологическом присоединении.

Согласно пп.«г» п.8 договора №943 от 09.02.2012 Заявитель обязуется после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт о технологическом присоединении либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации.

Как установлено судом, присоединение объекта – Ледового дворца, расположенного по адресу: р.п.Новоспасское, ул.70лет ВЛКСМ, 1Б, к линиям электропередач фактически было осуществлено в декабре 2012 – январе 2013 г.г.

Однако, ни акт о выполнении технических условий, ни акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» сторонами подписаны не были.

Фактическое присоединение объекта ответчика к электрическим сетям истца подтверждается актами обследования узла учета электрической энергии №715 от 31.01.2013 (л.д.81-82, 65).

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 11.04.2016 по делу №А72-1636/2016 взыскана плата за бездоговорное потребление электроэнергии с Муниципального автономного учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Центр –Юг» в сумме 410 831 руб. 85 коп., а также законная неустойка. 

Согласно пояснениям третьего лица - Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр-Юг» - Дворец спорта «Олимп» (ледовый дворец) фактически присоединился к электрическим сетям ОАО «УСК» в декабре 2012 года, что подтверждается актом о потреблении электрической энергии от 31.01.2013 №715 и счетом на оплату электрической энергии от 05.02.2013 №22. Какие-либо платежи за технологическое присоединение МАУ «ФОК «Центр Юг» не осуществлял (л.д.83). 

Следовательно, сетевая организация свои обязательства по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к своим электрическим сетям фактически выполнила.

07.09.2016 истец направил в адрес ответчика письмо от 07.09.2016 №19-16/918 (л.д.15), в котором истец сообщил, что для завершения процедуры и закрытия договора №943 от 09.02.2012 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «УСК» на электроснабжение ледового дворца, расположенного по адресу: Ульяновская область, р.п:Новоспасское, ул. 70 лет ВЛКСМ, 1Б, АО «Ульяновская сетевая компания» направило в адрес Главы Администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области акты (Приложение 1-3) и просит в течение 10 дней со дня получения пакета документов подписать вышеуказанные акты, скрепить печатью и вернуть по одному экземпляру, а акт об осуществлении технологического присоединения в двух экземплярах, в РЭС Новоспасского района АО «УСК».

К данному письму истец приложил акт осмотра (обследования) электроустановки №44 от 25.08.2016, акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности №566 от 07.09.2016, акт о выполнении технических условий №428 от 07.09.2016, акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Ульяновская сетевая компания» (л.д.16-19).

Письмо от 07.09.2016 №19-16/918 получено Администрацией муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области 09.09.2016.

Указанные акты Администрацией муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области не подписаны и не возращены Акционерному обществу «Ульяновская сетевая компания».

Письмом от 30.09.2016 (л.д.14) истец повторно просил ответчика обеспечить подписание акта осмотра (обследования) электроустановки №44 от 25.08.2016, акта разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности №566 от 07.09.2016, акта о выполнении технических условий №428 от 07.09.2016, акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Ульяновская сетевая компания», однако, ответчик документы не подписал, мотивированные возражения относительно подписания актов не заявил.

Пунктом 1 статьи 781  Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно п.10 договора №943 от 09.02.2012 размер платы за технологическое присоединении определяется в соответствии с Приказом Министерства экономики Ульяновской области от 09.02.2012 №06-37 и составляет 12 527 434 руб. 60 коп., в том числе НДС 18% в сумме 1 910 964 руб. 60 коп.

Пунктом 11 договора №943 от 09.02.2012 предусмотрено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 20% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении Заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей, акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Плату за технологическое присоединение ответчик внес частично.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 26.11.2015 по делу №А72-12620/2015 с Администрации взыскан промежуточный платеж согласно графику платежей по договору №943 от 09.02.2012 в размере 705 486 руб. 92 коп. 

По сведениям истца, задолженность ответчика за оказание услуг по технологическому присоединению на момент рассмотрения настоящего спора составила 5 010 973 руб. 84 коп. 

Доказательств оплаты задолженности в указанной сумме ответчик в материалы дела не представил.

В ходе рассмотрения дела ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой давности по заявленному требованию.

В соответствии со ст.ст. 195, 196 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами (ст. 200 Гражданского кодекса РФ).

Поскольку срок внесения последних 40% платы за технологическое присоединение обусловлен подписанием сторонами актов о выполнении Заявителем технических условий, об осмотре приборов учета,  о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, а указанные акты направлены ответчику для подписания 07.09.2016 и со стороны ответчика без каких бы то ни было оснований до настоящего времени не подписаны, срок исковой давности истцом не пропущен. 

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов.

Поскольку ответчик не внес в полном объеме плату за технологическое присоединение, предусмотренную договором, с него подлежит взысканию в пользу истца основной долг в размере 5 010 973 руб. 84 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку в размере 1 585 822 руб. 89 коп. за период с 03.10.2016 по 04.07.2017.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 17 договора №943 от 09.02.2012 согласовано, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

По расчету истца (л.д.77) неустойка за период с 03.10.2016 по 04.07.2017 составляет 1 585 822 руб. 89 коп.

Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным.

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения своих обязательств, требование истца о взыскании неустойки является законным и обоснованным.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку с 05.07.2017 по день фактической оплаты основного долга, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора 18.10.2012, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В данной части требования истца также следует признать обоснованными. 

При присуждении ответчику пени по день фактического исполнения обязательств суд исходит из того, что положения статей 330, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяют истцу требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 65 Постановления Пленума Верховного суда РФ  № 7 от 24.03.2016.

Согласно п.1 ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Поскольку Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе рассмотреть вопрос о снижении неустойки без заявления должника.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требует статья 71 АПК РФ.

С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 2 Определения от 21.12.2000 N 263-О, положения пункта 1 статьи 333 ГК РФ содержат указание на необходимость установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой ущерба.

В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении Президиума от 13.01.2011 N 11680/10 по делу NА41-13284/09, соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства является выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с его нарушенным интересам. Снижение неустойки судом возможно только в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17).

Как указано в п.2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 81 от 22.12.2011 «О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ», при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

На основании изложенного, принимая во внимание чрезмерно высокий процент неустойки, а также компенсационный характер неустойки, суд считает, что размер неустойки следует снизить до 620 674 руб. 32 коп., исходя из двукратной учетной ставки Банка России, установленной на дату заключения договора (8,25% годовых).

За период с 05.07.2017 по день фактической оплаты долга неустойку также следует взыскивать, исходя из двухкратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора (8,25% годовых).

При данных обстоятельствах, исковые требования следует удовлетворить частично.

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п.9  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 81 от 22.12.2011 «О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ» расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в пользу Акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» 5 010 973 (пять миллионов десять тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 84 коп. – основной долг, 620 674 (шестьсот двадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб. 32 коп. – неустойку за период с 03.10.2016 по 04.07.2017, а также неустойку за период с 05.07.2017 по день фактической оплаты долга, исходя из двухкратной ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора (8,25% годовых), и 53 929 (пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать девять) руб. 36 коп. – в возмещение расходов по госпошлине.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 АПК РФ.

Судья          И.В. Рыбалко