АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, 

<

...> http://yaroslavl.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-10728/2025

г. Ярославль

27 октября 2025 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Стракановой Е.Д.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление государственного казённого учреждения Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к публичному акционерному обществу "Россети Центр" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 693538.63 руб. 

 Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" обратилось в арбитражный суд с иском к публичному акционерному обществу "Россети Центр" о взыскании 693 538,63 руб. пени за период с 29.08.2024 по 14.01.2025 по договору об осуществлении технологического присоединения № 42469519 от 28.02.2024.  

 Определением суда от 06.08.2025 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Ответчик представил отзыв на иск, исковые требования не признал; ходатайствовал о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истец представил возражения на отзыв ответчика, исковые требования поддержал в заявленном размере.  

 Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. Резолютивная часть решения вынесена 06.10.2025, размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 07.10.2025.  

 Мотивированное решение по делу составлено на основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с подачей ответчиком апелляционной жалобы.  

 Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

 28.02.2024 между ПАО "Россети Центр" (сетевая организация) и государственным казённым учреждением Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 42469519 в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств и линия освещения (по адресу: автомобильная дорога Пречистое- Коза – Семеновское в Первомайском муниципальном районе Ярославской области, кадастровый номер земельного участка 76:10:000000:13), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  

необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик:  

 - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности: третья; 

 - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;  

 - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт (пункты 1, 2 договора).  

 В силу пункта 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора.  

 Размер платы за технологическое присоединение составил 1 995 794,63 руб. (пункт10 договора).  

 Согласно пункту 17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядки за год просрочки.  

 В срок, установленный договором, ответчик обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца не исполнил. Фактически услуга по технологическому присоединению оказана ответчиком 14.01.2025, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям от 14.01.2025.  

 В связи с чем истец просит взыскать с ответчика 693 538,63 руб. пени за период с 29.08.2024 по 14.01.2025, предусмотренные пунктом 17 договора об осуществлении технологического присоединения № 42469519 от 28.02.2024.  

 Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав правовые позиции сторон, суд исходит из следующего.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

 Пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает обязанность заказчика оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.  

 В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.  

 Факт внесения истцом платы за технологическое присоединение в размере 1 995 794,63 руб., а также факт неисполнения ответчиком своих обязательств в срок, установленный договором № 42469519 от 28.02.2024, подтверждается материалами дела; ответчиком не оспаривается.  

 В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

 Поскольку материалами дела подтвержден факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, требование истца о взыскании пени, предусмотренных договором № 42469519 от 28.02.2024, подлежит удовлетворению.  

Ходатайство ответчика об уменьшении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судом отклонено.  

 В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

В соответствии с пунктами 69, 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" размер неустойки может быть снижен судом в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.  

Ответчик доказательств явной несоразмерности предъявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства не представил. При указанных обстоятельствах основания для применения ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда отсутствуют.  

 В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

 Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).  

 Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества "Россети Центр" о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.  

 Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 693 538,63 руб. пени за период с 29.08.2024 по 14.01.2025 по договору об осуществлении технологического присоединения № 42469519 от 28.02.2024, а также 39 677 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177, ч.1 ст.229 АПК РФ).  

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007 

<

...>) в срок, не превышающий  

пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Е.Д. Страканова