401/2020-1460(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

14 января 2020 года Дело № А33-30548/2019 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14.01.2020.  В полном объёме решение изготовлено 14.01.2020.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ВахшССК"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, п. Березовка)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Алион" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск)  

о взыскании задолженности, 

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  "Алион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ВахшССК" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, пгт. Березовка Красноярского края)  

 о взыскании неустойки, штрафа, в присутствии в судебном заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью "ВахшССК": ФИО1,  представителя по доверенности от 28.06.2019, личность удостоверена паспортом,  представлена заверенная копия диплома серии КГ № 17921 и свидетельство о заключении  брака (до перерыва в судебном заседании),  

от общества с ограниченной ответственностью "Алион": ФИО2,  представителя по доверенности от 11.02.2019, личность удостоверена паспортом,  представлена заверенная копия диплома серии РА № 53105,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО3 до перерыва в судебном заседании, секретарем судебного заседания  ФИО4 после перерыва в судебном заседании,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВахшССК" (далее – истец по  первоначальному иску, ответчик по встречному иску, ООО «ВахшССР») обратилось в  Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "Алион" (далее – ответчик по первоначальному иску, истец по встречному иску, ООО  «Алион») о взыскании задолженности на основании договора подряда № 05052018/А/В/МАГ от 05.05.2018 в размере 11 929 688 руб. 30 коп.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.10.2019  возбуждено производство по делу.  

Определением от 09.01.2020 судом принято к производству встречное исковое заявление  ООО "Алион" о взыскании с ООО "ВахшССК" 2 191 075,50 руб. неустойки и 766 075,50 руб.  штрафа по договору подряда от 05.05.2018 № 0505-2018/А/В/МАГ.  

Представитель ООО "ВахшССК" в судебном заседании заявил об уточнении исковых  требований, согласно которому просит взыскать 11 101 077,80 руб. задолженности по  договору подряда № 0505-2018/А/В/МАГ от 05.05.2018.  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации уточнение исковых требований ООО "ВахшССК" принято судом.  

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 10 час. 00 мин. 14.01.2020, о чем  вынесено протокольное определение. Информация о перерыве в судебном заседании  размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.  

Представитель ООО "ВахшССК" в судебное заседание не явился, о месте и времени его  проведения извещен надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в его  отсутствие.  

Представитель ООО "Алион" представил суду уточненное встречное исковое заявление,  в котором просит взыскать 2 191 383 руб. неустойки за период с 31.05.2018 по 31.01.2019 и  766 075,50 руб. штрафа по договору подряда от 05.05.2018 № 0505-2018/А/В/МАГ.  

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции  до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу,  изменить предмет и основание заявленного требования, уменьшить или увеличить размер  исковых требований.  

Судом принято уточнение исковых требований в соответствии со статьей 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации объявлен перерыв на пять минут. После окончания перерыва  судебное заседание продолжено 14.01.2020 в 10 час. 19 мин. с участием того же  представителя ООО "Алион".  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

05.05.2018 между ООО «ВахшССК» (субподрядчик) и ООО «Алион» (генеральный  подрядчик) подписан договор субподряда № 0505-2018/А/В/МАГ (далее – договор), согласно  пункту 1.1 которого, в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, а также  проектной и рабочей документацией, протоколом согласования договорной цены  (приложение № 1) и техническим заданием (приложение № 2), субподрядчик обязуется  своими силами или с привлечением третьих лиц, своими инструментами, механизмами, из  своих материалов и/или материалов генерального подрядчика (при наличии  соответствующего условия в протоколе согласования договорной цены) выполнить работы  по срубке свой на объекте: «Торгово-развлекательный комплекс, с автопарковками:  помещение гипермаркета, помещение Торгово-развлекательной галереи с объектами  инженерно-транспортного обеспечения, расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский  район, пр. 60 лет образования СССР – ул. Славы», и передать их результат генеральному  подрядчику. Конкретный перечень и объем поручаемых работ, а также требования к их  выполнению уточняются проектной и рабочей документацией.  

В силу пункта 2.3 договора, подписанием договора субподрядчик подтверждает, что до  момента заключения договора и начала выполнения работ он в полной мере ознакомлен с  условиями производства работ, их характером, составом, объемами, а также требованиями  к их выполнению, проектной и рабочей документацией, субподрядчик подтверждает, что  согласованная сторонами цена договора является соразмерным вознаграждением за  выполнение порученных работ в полном соответствии с условиями договора и принимает на  себя все риски, связанные с недобросовестным определением стоимости работ по договору,  следствием которого, является возникновение дополнительных работ, предусмотренных  

проектной и рабочей документацией, и являющихся сопутствующими, либо необходимыми  для производства основных работ, предусмотренных договором и приложениями к нему.  

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что стоимость работ, поручаемых субподрядчику  по договору (цена договора), до их фактического выполнения и/или при досрочном  расторжении договора по любым основаниям определяется на основании протокола  согласования договорной цены (приложение № 1), а после надлежащего завершения  субподрядчиком всего объема порученных работ определяется на основании подписанных  сторонами актов (форма КС-2).  

Цены за единицу измерения, определенные в приложении № 1 к договору, являются  твердыми: договорными на все время действия договора (пункт 2.2 договора).  

Согласно пункту 2.4 договора, оплату выполненных работ, не заложенных ни в договоре,  ни в приложениях и дополнительных соглашениях к договору генподрядчик не производит.  Дополнительные работы, не учтенные сторонами в договоре, выполняются субподрядчиком  только после подписания дополнительного соглашения к договору.  

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что выполнение работ производится  субподрядчиком в следующие сроки: начало выполнения работ - 05 мая 2018 года,  окончание выполнения работ - 30 мая 2018 года. Промежуточные сроки производства работ  указаны в графике производства работ (приложение № 3).  

Согласно пункту 3.3 договора, сроки выполнения работ могут быть изменены только по  соглашению сторон.  

Исполнение промежуточных сроков выполнения работ подтверждается актами о  приемке работ (УФ КС-2) (пункт 3.4 договора).  

Согласно пункту 3.5 договора, по окончании выполнения всех работ, порученных  субподрядчику по договору, стороны оформляют итоговый акт приемки работ, подписание  которого подтверждает надлежащее исполнение субподрядчиком обязательств по  выполнению всех работ, обусловленных предметом договора с надлежащим качеством,  достаточным для гарантийной эксплуатации результатов работ.  

Для выполнения работ по договору субподрядчик обязался обеспечить готовность  выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором, а также создание зависящих от  него условий для производства последующих работ после окончания работ по договору  (пункт 4.1.1 договора).  

Пунктом 4.13 договора предусмотрено, что подписанием договора субподрядчик  подтверждает, что препятствий для начала работ по договору не имеется и генеральный  подрядчик в дату подписания договора:  

- передал субподрядчику документацию, по форме и в объёме необходимых для  производства работ, соответствующую требованиям ГОСТ, СНиП и нормативным  документам по качеству и количеству. Отдельный акт приема-передачи сторонами не  составляется,  

- обеспечил и передал субподрядчику строительную готовность объекта для  производства субподрядчиком порученных работ (фронт работ). Отдельный акт приема- передачи сторонами не составляется.  

Согласно пункту 5.1 договора, в случае, если в соответствии договором генеральный  подрядчик принял на себя обязанность по поставке материалов, и/или оборудования, что  подтверждено согласованием спецификации поставки генерального подрядчика,  применяются положения настоящего пункта:  

- поставка материалов и/или оборудования осуществляется генеральным подрядчиком в  соответствии с согласованным графиком поставки, а в случае его отсутствия - по  предварительным заявкам субподрядчика подаваемым им не позднее, чем за 24 часа до  момента поставки (пункт 5.1.1 договора),  

- генеральный подрядчик обязуется поставить субподрядчику материалы и оборудование  в объеме, определенном спецификацией поставки генерального подрядчика в соответствии с  протоколом согласования договорной цены (приложение № 1) (пункт 5.1.2 договора).  

- оплата принятого оборудования и материалов, полученных от генерального подрядчика  или его поставщиков, производится субподрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента их  приемки перечислением денежных, средств на расчетный счет генподрядчика и/или  поставщика. Стороны отдельно договариваются, что оплата принятых материалов и  оборудования, может производиться путем зачета встречных требований по договору, по  заявлению одной из сторон в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса  Российской Федерации. Стоимость материалов, принятых субподрядчиком от генерального  подрядчика будет определяться сторонами на основании подписанных товарных накладных  (УФ ТОРГ-12), а в случае отсутствия оформленных накладных (УФ ТОРГ-12)- на основании  иных товаросопроводительных документов от поставщика этого товара.  

Согласно пункту 5.2 договора, в случае, если в соответствии с договором субподрядчику  были переданы материалы и/или оборудование на давальческой основе, применяются  положения настоящего пункта:  

- передача материалов и/или оборудования на давальческой основе осуществляется  генеральным подрядчиком в соответствии с согласованным графиком поставки, а в случае  его отсутствия - по предварительным заявкам субподрядчика, подаваемым им не позднее,  чем за 24 часа до момента поставки. Любое превышение субподрядчиком проектных  объемов материалов, необходимых для выполнения работ по договору относится на счет  субподрядчика (пункт 5.2.1 договора),  

- по мере использования полученных от генерального подрядчика или его поставщиков  оборудования и материалов субподрядчик предоставляет генподрядчику вместе с актами  выполненных работ (УФ № КС-2) отчеты об использовании (расходе) оборудования и  материалов с обязательным указанием в них следующих реквизитов: наименования,  номенклатуры, количества, цены, стоимости (пункт 5.2.4 договора).  

Генподрядчик обязался произвести приемку и оплату работ, выполненных  субподрядчиком, в порядке, предусмотренном договором и приложениями к нему (пункт  4.14 договора).  

В силу пункта 6.1 договора, сдача-приемка выполненных субподрядчиком работ  осуществляется сторонами один раз в месяц – 25 числа месяца, следующего за отчетным.  Если 25 число месяца приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается  первый следующий за ним рабочий день.  

Согласно пункту 7.1 договора, генеральный подрядчик оставляет за собой право  выплатить единовременно либо по частям, на свое усмотрение, аванс, в размере на свое  усмотрение в рублях, в том числе НДС-18%. Субподрядчик обязуется в течение 5  календарных дней с момента такой выплаты, в соответствии со статьей 168 Налогового  кодекса Российской Федерации, выставить генподрядчику на сумму выплаченного аванса  счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями стать 169 Налогового кодекса  Российской Федерации.  

Погашение авансовых платежей производится ежемесячно пропорционально стоимости  принятого генподрядчиком объема работ и учитывается при оплате выполненных  субподрядчиком работ с учетом пункта 7.4 договора (пункт 7.2 договора).  

Согласно пункту 7.3 договора, оплата выполненных работ, а также иные выплаты в  рамках договора, производятся генподрядчиком в течение 30 календарных дней после  подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о  стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на весь объем работ, выполненный  субподрядчиком за отчетный период, согласно пункту 6.4 договора и только на основании  оформленного субподрядчиком счета на оплату. Оплата осуществляется за вычетом 5% от  стоимости выполненных, работ согласно пункту 7.4 договора. Отчетным периодом согласно  настоящему договору считается один календарный месяц.  

Генеральный подрядчик с каждого объема сданных субподрядчиком работ за  исключением стоимости материалов удерживает сумму в размере 5 процентов, с учетом  НДС, в счет обеспечения качества выполненных работ. Выплата средств, резервируемых для  

обеспечения качества выполненных работ, осуществляем по истечении 12-ти месяцев после  ввода объекта в эксплуатацию, при условии выполнения работ в полном объеме в  гарантийную эксплуатацию и подписания без оговорок итогового акта приемки работ (пункт  3.5), за исключением сумм, оплаченных генеральным подрядчиком сторонним организациям  за устранение недоделок в выполненных работах, если их устранение не было произведено  субподрядчиком в установленные генеральным подрядчиком сроки. В случае  предоставления субподрядчиком по согласованной с генеральным подрядчиком, форме  банковской гарантии одобренного генеральным подрядчиком банка, генеральный подрядчик  оставляет за собой право уменьшить сроки резервирования денежных средств,  предварительно уведомив об этом субподрядчика (пункт 7.4 договора).  

Согласно пункту 10.1.1 договора, субподрядчик при нарушении договорных  обязательств уплачивает генеральному подрядчику за нарушение сроков производства работ,  включая промежуточные сроки выполнения работ (календарные сроки), а также сроки  устранения выявленных недостатков - неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый  день просрочки, но не более 15% от цены договора или штраф 1% от цены договора за  каждый факт нарушения сроков выполнения работ (не зависимо от количества дней  просрочки).  

В силу пункта 10.1.8 договора, стороны согласовали, что нарушение срока  предоставления субподрядчиком оформленного со своей стороны итогового акта (пункт 3.5  договора), является существенным нарушением условий договора в части выполнения работ  качественно. Субподрядчик несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере равном  сумме гарантийного резервирования, удержанной генеральным подрядчиком в счет  обеспечения исполнения обязательств в гарантийный период (пункт 7.4). Стороны  дополнительно согласовали, что обязательство субподрядчика по оплате штрафа может быть  прекращено генеральным подрядчиком путем зачета однородных требований.  

В силу пункта 10.1.9 договора, генподрядчик вправе уменьшить (провести зачет),  подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме  начисленной неустойки за просрочку выполнения работ, а также на сумму иных штрафов  (пеней), предусмотренных договором и убытков.  

В приложении № 1 к договору стороны согласовали протокол согласования договорной  цены, согласно которому стоимость работ составляет 108 654,41 руб.  

Дополнительным соглашением от 05.05.2018 № 1 стороны согласовали выполнение  дополнительных работ на объекте – земляных работ, срок выполнения данных работ  установлен с 05.05.2018 по 30.05.2018, цена и объем данных дополнительных работ  определены в приложении № 1 к указанному дополнительному соглашению (14 525 000 руб.)  

Дополнительным соглашением от 09.11.2018 № 2 стороны согласовали выполнение  дополнительных работ на объекте – устройство калитки, срок выполнения данных работ  установлен с 09.11.2018 по 10.11.2018, цена – 5 000 руб.  

Дополнительным соглашением от 01.10.2018 № 3 стороны согласовали выполнение  дополнительных работ на объекте – земляных работ, срок выполнения данных работ  установлен с 01.10.2018 по 23.12.2018, цена и объем данных дополнительных работ  определены в приложении № 1 к указанному дополнительному соглашению (308 500 руб.).  

Сторонами подписаны акты выполненных работ от 30.05.2018 № 1 на сумму 108 654,41  руб., от 01.06.2018 № 2 на сумму 649 444,58 руб., от 16.07.2018 № 3 на сумму 1 334 745,76  руб., от 31.01.2019 № 1 на сумму 266 958,33 руб. и справки о стоимости выполненных работ и  затрат от 30.05.2018 № 1 на сумму 712 290 руб., от 30.06.2018 № 2 на сумму 4 257 470 руб., от  16.07.2018 № 3 на сумму 8 750 000 руб., от 31.01.2019 № 4 на сумму 1 601 750 руб.  

В материалы дела представлено разрешение от 29.10.2019 № 24-308-187-2016 на ввод в  эксплуатацию объекта - Торгово-развлекательный комплекс, с автопарковками: помещение  гипермаркета, помещение Торгово-развлекательной галереи с объектами инженерно- транспортного обеспечения, расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский район, пр.  60 лет образования СССР – ул. Славы.  

К оплате ООО «ВахшССР» выставило счет-фактуры от 30.05.2018 № 3 на сумму 712 290  руб., от 30.06.2018 № 00000010 на сумму 4 257 470 руб., от 16.07.2018 № 00000018 на сумму  8 750 000 руб., от 31.01.2019 № 00000001 на сумму 1 601 750 руб.,  

В акте сверки взаимных расчетов за период с января 2019 г. по июнь 2019 г. ООО  «Алион» признало наличие 11 929 688,30 руб. долга.  

В претензии от 15.04.2019 № 15 ООО «ВахшССК» просило ООО «Алион» оплатить  13 216 510 руб. долга. Претензия передана директору ООО «Алион» 15.04.2019.  

В претензии, направленно 07.11.2019, согласно квитанции ФГУП «Почта России», ООО  «Алион» просило ООО «ВасхССР» оплатить 766 075,50 руб. штрафа на основании пункта  10.1.8 договора и 2 191 291,50 руб. штрафа на основании пункта 10.1.1 договора.  

При изложенных обстоятельствах ООО «ВахшССР» по первоначальному иску просит  взыскать с ООО «Алион» 11 101 077,80 руб. долга по оплате выполненных работ, ООО  "Алион" по встречному иску просит взыскать с ООО «ВахшССР» 2 191 075,50 руб.  неустойки на основании пункта 10.1.1 договора и 766 075,50 руб. штрафа на основании  пункта 10.1.8 договора.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе,  гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок,  предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных  законом, но не противоречащих ему.  

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными предъявляемыми требованиями.  

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Из материалов дела следует, что отношения сторон основаны на договоре, являющемся  по своей правовой природе договором строительного подряда, и регулируются положениями  главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения  работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного  подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе  жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о  договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту  зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

 Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором  подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной  сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство  осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.  

В силу закрепленного в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации принципа состязательности, задача лиц, участвующих в деле, - собрать и  представить в суд в порядке части 1 статьи 65 названного Кодекса доказательства,  подтверждающие их правовые позиции.  

На основании требований части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие  или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих  в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела,  на основании представленных доказательств.  

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными  доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,  основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную  связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом  достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся  в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке  арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют  для арбитражного суда заранее установленной силы.  

Учитывая, что факт выполнения работ ООО «ВахшССК» материалами дела подтвержден  представленными в материалы дела актами выполненных работ и справками о стоимости  выполненных работ и затрат, на ООО «Алион» лежит обязанность по их оплате.  

В акте сверки взаимных расчетов за период с января 2019 г. по июнь 2019 г. ООО  «Алион» признало наличие 11 929 688,30 руб. долга.  

ООО «Алион» заявлено по иску о взыскании 11 101 077,80 руб., с учетом стоимости  предусмотренного договором гарантийного удержания, не подлежащего выплате в связи с  ненаступлением соответствующего срока выплаты.  

Ответчик сумму задолженности не оспорил, доказательства оплаты указанной суммы  долга в материалы дела не представил.  

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию  11 101 077,80 руб. долга.  

ООО "Алион" по встречному иску заявлено о взыскании с ООО «ВахшССК» 2 191 383  руб. неустойки за период с 30.05.2018 по 31.01.2019 на основании пункта 10.1.1 договора, с  учетом предусмотренного данным пунктом договора ограничения неустойки до 15% от цены  договора.  

ООО "Алион" по встречному иску заявлено также о взыскании с ООО «ВахшССК»  766 075,50 руб. штрафа на основании пункта 10.1.8 договора.  

В силу положений статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение  обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,  поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими  способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не  обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Расчеты неустойки и штрафа судом проверены, расчеты соответствует условиям  договора и фактическим обстоятельствам дела, не нарушает прав ответчика по встречному  иску.  

Ответчик по встречному иску контрасчет неустойки и штрафа, а также доказательств  оплаты их оплаты не представил, требования истца по встречному иску не оспорил.  

Поскольку судом установлена допущенное ООО «ВахшССК» нарушение срока  производства работ, также материалами дела не подтверждено надлежащее выполнение  ООО «ВахшССК» предусмотренных пунктом 3.5 договора обязательств, в связи с чем  данные требования ООО «Алион» о взыскании неустойки и штрафа являются  обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Таким образом, требования истца по встречному иску также подлежат удовлетворению в  полном объеме.  

Согласно часть 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или  отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований,  указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок  обжалования решения.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых  принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы  относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Учитывая результаты рассмотрения первоначального и встречного исков, принимая во  внимание, что при обращении с исками судом была предоставлена отсрочка уплаты  государственной пошлины, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию в доход  федерального бюджета.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным  Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 7  информационного письма от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров,  связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований»  разъяснил, что статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует, чтобы  

предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств  одного вида.  

Встречные требования в рамках настоящего дела являются, по существу, денежными, то  есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по  правилам статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Учитывая, что  требования сторон по настоящему делу носят однородный характер, суд считает возможным  произвести их зачет.   

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алион" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "ВахшССК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, п. Березовка) 11 101 077 рублей 80  копеек основного долга.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алион" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 78 505 рублей  государственной пошлины.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВахшССК" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, п. Березовка) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Алион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 2 191 383 рубля пени,  766 075 рублей 50 копеек штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВахшССК" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, п. Березовка) в доход федерального бюджета 37 787 рублей  государственной пошлины.  

Произвести зачет сумм, взысканных по первоначальному и встречному искам и в  результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алион" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "ВахшССК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, п. Березовка)  8 143 619 рублей 30 копеек.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 27.02.2019 6:32:48

Кому выдана Мальцева Анастасия Николаевна