РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 22 октября 2025 года по делу А33-17934/2025 Красноярск  

22 октября 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить гарантийные обязательства по контракту № 0119200000124003652 от 26.04.2024:  

- устранить продольную трещину на протяжении почти всей ул. Торговая проведя её заливку битумной эмульсией. Перед непосредственной заливкой провести продувку трещины сжатым воздухом для удаления посторонних частиц; провести просушка и прогрев боковых стенок и дна трещины с помощью тепловых копьев или фенов. После завершения работ выполнить присыпку залитого участка песком или отсевом, чтобы ремонтный материал не налипал на колёса и подошвы обуви;  

- устранить участки с косыми трещинами по ул. Торговая (2 участка), проведя заливку трещин битумной эмульсией. Перед непосредственной заливкой провести продувку трещины сжатым воздухом для удаления посторонних частиц; провести просушка и прогрев боковых стенок и дна трещины с помощью тепловых копьев или фенов. После завершения работ выполнить присыпку залитого участка песком или отсевом, чтобы ремонтный материал не налипал на колёса и подошвы обуви;  

- место вырубки пробы асфальта по ул. Торговая очистить от щебня и заделать асфальтобетонной смесью однородной с остальным дорожным покрытием по п. 4.3.2. ГОСТ Р 58407.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб».  

Выполнить работы в срок до 30.06.2025г. Сдать выполненные работы по акту устранения недостатков, составленному АО «Ачинское ДРСУ» с участием представителя МБУ «УГХ» г. Назарово.  

Установить судебную неустойку в порядке ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации путем взыскания с акционерного общества «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «Управление городским хозяйством» г. Назарово (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в размере 3 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с 01.07.2026 до даты исполнения решения суда.  

Взыскать с акционерного общества «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская