АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

18 мая 2021 года

Дело № А33-3568/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» «05» мая 2021 года.

Мотивированное решение составлено «18» мая 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петроченко Г.Г., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску акционерного общества "Ванкорнефть" (ИНН 2437261631, ОГРН 1042400920077)

к обществу с ограниченной ответственностью "УралКомплекСстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании пени, 

установил:

акционерное общество "Ванкорнефть" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "УралКомплекСстрой" (далее – ответчик) о взыскании пени за просрочку предоставления конструкторской документации за период с 24.09.2020 по 22.01.2021 в сумме 121 000 руб., пени за просрочку предоставления конструкторской документации за период с 23.01.2021 до даты фактического исполнения обязательств по предоставлению конструкторской документации, но не более чем 5% от стоимости товара, на который не была предоставлена конструкторская документация.

Определением от 19.02.2021 исковое заявление оставлено судом без движения.

В арбитражный суд от истца поступили документы, устраняющие обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Определением от  03.03.2021 исковое заявление  принято к производству суда в порядке упрощенного производства. В суд поступил отзыв ответчика от 01 апреля 2021 года. 

04.05.2021 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 Кодекса. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

09.05.2021 общество с ограниченной ответственностью "УралКомплекСстрой" обратилось в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства и суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Возникшие отношения сторон регулируются нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской  Федерации. 

Статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Между Акционерным обществом «Ванкорнефть» (АО «Ванкорнефть», Покупатель)         и         Обществом         с         ограниченной         ответственностью «УралКомплексСтрой» (ООО «УКС», Поставщик) заключен договор поставки материально-технических ресурсов (прейскуратный) №1710320/0050Д от 17.02.2020, согласно которому  Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора, Приложений, отгрузочных разнарядок, а Покупатель принять и оплатить Товар (п. 1.1. Договора).

В соответствии с п. 2.1. Договора, одновременно с подписанием Договора Стороны подписывают Прейскурант цен (Приложение № 1), в который войдут цены товара, предложенные Поставщиком в рамках проведенной закупочной процедуры «Здания различного назначения с проведением ШМР и ПНР по лоту № 113153».

Номенклатурные позиции, подлежащие поставке по Договору, определены в Прейскуранте цен (п. 3.1. Договора).

Точное количество Товара, поставляемого в каждом конкретном периоде поставки, а также номенклатура, сроки поставки и реквизиты грузополучателей определяются сторонами в отгрузочной разнарядке, подписанной в соответствии с нормами пунктов 3.4.1.-3.4.3. Договора.

В соответствии п. 7.9. Договора, в случае если это предусмотрено отгрузочной разнарядкой, Поставщик обязуется предоставить Покупателю для согласования конструкторскую документацию на Товар, разработанную на основании технических требований Покупателя.

Документация должна быть предоставлена Поставщиком в оригиналах, подписанных уполномоченным представителем Поставщика, на почтовый адрес Покупателя, указанный в разделе 20 Договора. Копии всех документов должны направляться на электронный адрес Покупателя, указанный в отгрузочной разнарядке.

Отгрузочной разнарядкой определяются: перечень документации, сроки предоставления документации, сроки согласования документации со стороны Покупателя, а также электронный адрес Покупателя.

24.08.2020 сторонами подписана отгрузочная разнарядка №ММ №1012953972 к Договору поставки, в соответствии с которой Поставщик принял обязательства в срок 180 дней с даты заключения договора/сентябрь 2020 поставить Покупателю товар - Здание блочно-модульное контрольно-пропускного пункта (КПП) 9x6м 1750616/0927Д-01-51046-АС-ТТ-02 в количестве одного комплекта стоимостью 4 940 000,00 рублей (в том числе НДС).

Разделом «Дополнительные документы» отгрузочной разнарядки предусмотрены   обязательства  Поставщика   в   срок,   не   позднее   30   (тридцати) календарных дней с момента заключения договора, предоставить Покупателю на согласование полный комплект конструкторской документации. Проектные работы и согласование конструкторской документации с проектным институтом осуществляется Поставщиком самостоятельно.

В силу пункта 2 статьи 456 Гражданского кодекса российской Федерации, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

Отгрузочная разнарядка подписана сторонами 24.08.2020. Таким образом, срок предоставления полного комплекта конструкторской документации Покупателю истек 23.09.2020.  

В силу статей 329, 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В пункте 8.1.4. Договора стороны согласовали, что в случае нарушения сроков предоставления проектно-конструкторской документации, установленных Договором/отгрузочной разнарядкой, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1000 рублей в день за каждый день просрочки, но не более чем 5 % от стоимости Товара, на который не была предоставлена проектно-конструкторская документация.

В связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению   Покупателю   конструкторской   документации,    истец  в соответствии с п. 8.14. Договора начислил Поставщику пени за период с 24.09.2020 по 22.01.2021 в сумме 121 000,00 рублей (расчет пени: 121 день просрочки* 1000 рублей =121 000,00 руб.).

Претензией исх.№ВН-4095 от 16.12.2020 истец потребовал оплатить начисленную пеню, требования Покупателя были оставлены Ответчиком без удовлетворения, ответ на претензию не поступил.

В письменном отзыве на исковое заявление ответчик оспорил иск со ссылкой на пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и  Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  N 2, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020, которым предусмотрено, что одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория, указав на невозможность предоставления конструкторской документации в  связи с введением Постановлением правительства Тюменской области № 120-П от 17.03.2020 на территории Тюменской области особых мер по противодействию коронавирусной инфекции, место фактического расположения производственных мощностей ответчика: 

<

...>.

В соответствии со статьей 401 ГК РФ «Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

Оснований для применения статьи 401 ГК РФ не имеется, поскольку ответчиком не представлено доказательств, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

Мораторий действовал с 06 апреля 2020 года по 07 января 2021 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила моратория распространяются только на  лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория.  В соответствии с законом не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Суд отклоняет указанные в отзыве доводы ответчика, поскольку введение моратория предусмотрено в отношении начисления неустоек  и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория, тогда как ответчиком не исполнено обязательство по предоставлению проектно-конструкторской документации, которое не является денежным. Кроме того ответчику не предоставлена мера поддержки по перечень лиц, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" судом проверены указанные обстоятельств по ИИН ответчика и основному коду ОКВЭД по состоянию на 01 марта 2020 года через сервис ФНС РФ. Суд отклоняет доводы ответчика о невозможности предоставления конструкторской документации,  поскольку ответчиком не доказана невозможность передачи истцу документации в электронном виде. 

Об уменьшении суммы неустойки и применении статьи 333 ГК РФ ответчиком не было заявлено при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Расчет истца ответчик не оспаривал. В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Контррасчёт пени ответчиком в материалы дела не представлены, доказательства истца не опровергнуты. Судом установлено, что расчёт исковых требований произведен истцом с учетом фактических обстоятельств дела, условий договора и требований действующего законодательства. 

В соответствии со статьями 9, 65, 70 АПК РФ исковые требования доказаны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная  пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УралКомплексСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Ванкорнефть" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени за просрочку предоставления конструкторской документации за период с 24.09.2020 по 22.01.2021 в сумме 121 000 руб.  по договору поставки №171/0320/0050Д от 17 февраля 2020 года,  пени за просрочку предоставления конструкторской документации,   из расчета  1 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 23.01.2021 до даты фактического исполнения обязательств по предоставлению конструкторской документации, но не более чем 5%  от стоимости товара , на который не была предоставлена конструкторская документация: 4 490 000 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 630 руб.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

Судья

Г.Г. Петроченко