АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

17 июня 2025 года

Дело № А33-10865/2025

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о переходе к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства, увеличении срока выполнения мероприятий до 6-ти месяцев и снижении размера договорной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации - отказать.

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.7511.23 от 17.08.2023 для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300294:687, в соответствии с пунктами 10.2.1 - 10.2.3 технических условий № 8000565850, а именно:

-  выполнить усиление существующей КТП-10/0,4кВ № 105 солн. для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании;

- выполнить строительство НЭП 0,4кВ от точки, указанной в пункте №7 ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Эквивалент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.7511.23 от 17.08.2023 в сумме 47 062,38 руб. за период с 18.02.2024 (17.08.2023 - дата оплаты по платежному поручению № 20 от 17.08.2023 + 6 месяцев с учетом пункта 5 договора № 20.2400.7511.23 от 17.08.2023) по 06.04.2025 (45 470,90 руб. *0,25 % *414 дней)); с 07.04.2025 – неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 113,68 руб. за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 000 руб. и 1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1