АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебного акта арбитражного суда, вступившего в законную силу

 27 ноября 2020 года

           Дело №А83-9345/2017

Резолютивная часть постановления оглашена 26.11.2020.

Постановление изготовлено в полном объеме 27.11.2020

Арбитражный суд Центрального округа  в составе:

председательствующего

         ФИО1

судей

при ведении протокола судебного

заседания помощником судьи

         ФИО2

         ФИО3

          ФИО4

при участии в заседании:

от истца:

ООО "Строительная компания АКСИОС"

 

ФИО5 - представителя (доверенность от 29.01.2020)

от ответчика:

ООО "Дайвис"

от третьих лиц:

Администрация города Феодосия

Феодосийский городской совет

Республики Крым

ИП ФИО6

ФИО7 - представителя (доверенность от 22.09.2020)

не явился, извещен надлежаще

не явился, извещен надлежаще

не явился, извещен надлежаще

        рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда  Республики Крым кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания АКСИОС" на постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2020 по делу №А83-9345/2017,

                                                            УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания АКСИОС"  обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дайвис" о взыскании задолженности по договору подряда  №10-С от 20.05.2016 в размере 1 115 924 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины.

 К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спор, привлечены:  Администрация города Феодосии Республики Крым и Феодосийский городской совет Республики Крым.

В свою очередь, ООО "Дайвис" обратилось со встречным иском о признании договора подряда № 10-С от 20.05.2016 незаключенным.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 22.07.2019 года в удовлетворении первоначальных  требований отказано. Встречные  требования удовлетворены, договор № 10-С от 20.05.2016  признан незаключенным.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2019 суд перешел к рассмотрению данного дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

 К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ИП ФИО6. 

         Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2020  решение  суда  первой инстанции отменено и в удовлетворении  первоначального и встречного исков отказано.

  В кассационной жалобой ООО "СК АКСИОС" просит постановление суда апелляционной инстанции отменить   в части отказа во взыскании задолженности по договору подряда  № 10-С от 20.05.2016 в размере 1 115 924 руб. и заявленные требования в этой части удовлетворить в полном объеме.

Как следует из кассационной жалобы, общество не обжалует судебные акты в части отказа в удовлетворении встречных требований, поэтому с учетом требований ст. 286 АПК РФ, кассационная коллегия не проверяет законность постановления суда в части отказа в удовлетворении требований о признании договора подряда № 10-С от 20.05.2016  незаключенным.

Проверив в порядке ст. ст. 286, 287 АПК РФ правильность применения судами  норм материального права и  процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе,  судебная коллегия приходит к выводу о наличии правовых оснований  для отмены вышеуказанных судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в связи со следующим. 

        Как следует из материалов дела, 20.05.2016 между ООО "СК АКСИОС"  (подрядчик) и ООО "Дайвис" (заказчик) был заключен договор подряда № 10-С на   строительство кафе на территории Дома "Юнге", расположенного по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель "Дом Юнге", согласно смете (приложение № 1 к договору).

Согласно п. 2.1 договора  стоимость работ составляет 1 115 924 руб. При этом, в соответствии с п. 2.2 договора заказчик обязуется перечислять на расчетный счет подрядчика аванс, согласно графика финансирования (приложение № 2 к  договору). Оплата производится поэтапно, по мере выполнения работ.

 Подрядчик начинает выполнение работ в течение 3-х дней после получения аванса согласно графика финансирования (п.3.1 договора).

 Окончание работ по  договору определяется датой принятия выполненных работ у подрядчика и подписания сторонами акта выполненных работ (п. 3.2 договора).

В обоснование заявленных требований  ООО "СК АКСИОС"  указало, что с 28.05. 2016 без объяснения причин, заказчик прекратил все взаимодействия с ним, уклоняясь тем самым  от приемки выполненных работ. 

В письме от 14.06.2016 направленном в адрес заказчика, подрядчик  предложил приостановить строительные работы до 20 июня 2016 года и комиссионно, с представителями заказчика и подрядчика  принять фактически выполненные работы  и определить время для устранения недостатков,  все материальные ценности для исключения воровства принять заказчиком.

Письмом от 28.06.2016  ответчик уведомил истца о получении письма  позже предложенной истцом даты создания  комиссии и предложил   создать комиссию по определению объемов выполненных работ и назначил дату на 08.07.2016. 

Согласно протокола  от 08.07.2016 представители ООО "СК АКСИОС" на встречу не явились.

В дальнейшем стороны продолжали вести переписку, однако, вопрос по спорному объекту урегулирован не был и  двусторонний акт о приемке выполненных работ подписан не был.

Претензия подрядчика от 06.07.2017 об оплате долга в размере 1 115 924 руб.  оставлена  заказчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

       Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судебные инстанции исходили из того, что истцом не  представлены в материалы дела доказательства подтверждающие, что строительные работы на объекте, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель "Дом Юнге", проводились ООО "СК АКСИОС".

         При этом, экспертами в рамках назначенных по делу судебных экспертиз, не сделаны однозначные выводы об объемах и качестве выполненных работ, в связи с отсутствием доступа непосредственно к покрытию кровли и металлическим конструкциям, а также  в связи с физическим износом здания.

        Между тем, согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

       По утверждению ООО "СК АКСИОС" им были выполнены работы по объекту на сумму 1 115 924 руб., что подтверждается представленным в материалы дела актом от 31.05.2016  о приемке выполненных работ за май 2016 г., который ответчиком не подписан. 

         В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ  односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным в случае, когда мотивы отказа от подписания признаны им обоснованными.

         В рассматриваемом случае, ООО "Дайвис" (заказчик)  не подписав акт выполненных работ, не сообщил подрядчику причины не принятия выполненных работ и не предъявил  ему претензий, в порядке ст. 754 ГК РФ, по поводу устранения выявленных недостатков, если таковые имелись.

        Как пояснил в судебном заседании представитель ООО "Дайвис", истцом на спорном объекте строительные работы вообще не проводились.

        Из разъяснений, содержащихся в п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" следует, что односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

          При этом, в материалах дела имеется письмо № 50 от 04.07.2016 из которого следует, что у заказчика имеются замечания к актам выполненных работ, в том числе и по договору № 10-С от 20.05.2016.

          Указанному обстоятельству судом не дана надлежащая правовая оценка.  Кроме того, стороны подтверждают тот факт, что кафе введено в эксплуатацию и является действующим.

          Между тем, отрицая факт выполнения работ подрядчиком на данном объекте, заказчик не представил суду доказательства, свидетельствующие о том, что спорный объект недвижимости был построен иным подрядчиком.

          Указанные доводы ответчика не были предметом исследования судебными инстанциями при принятии решения по настоящему спору.

    С учетом указанных обстоятельств, кассационная коллегия приходит к выводу, что постановление суда апелляционной инстанции от 05.08.2020 следует отменить в части отказа ООО «Строительная компания АКСИОС"  задолженности по договору подряда  № 10-С от 20.05.2016 в размере 1 115 924 руб. и дело в этой части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду необходимо учесть указанные недостатки и с учетом добытых доказательств разрешить спор по существу.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1 и ч. 2 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

                                                     П О С Т А Н О В И Л:

 

постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2020 по делу №А83-9345/2017 отменить и дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым. 

         Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Судьи

             ФИО1 

             ФИО2

 

             ФИО3