/

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ул. Чкалова, дом 14, Иркутск, 664025, www.fasvso.arbitr.ru

тел./факс (3952) 210-170, 210-172; e-mail: info@fasvso.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А58-611/2017

05 марта 2019 года

город Иркутск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 05 марта 2019 года.

 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Васиной Т.П.,

судей: Барской А.Л., Палащенко И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) и акционерного общества «Сахатранснефтегаз» на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)от 21 июня 2018 года по делу № А58-611/2017 и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2018 года по тому же делу (суд первой инстанции – Гуляева А.В., суд апелляционной инстанции: Юдин С.И., Макарцев А.В.,Скажутина Е.Н.),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтрой» (ОГРН 1121435018682, ИНН 1435261419, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, далее – ООО «ГеоСтрой») обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлениемк Министерству промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1131447017195, ИНН 1435275789, Республика Саха (Якутия), г. Якутия, далее — Минпромгеологии РС(Я)) о взыскании 5 121 949 рублей 09 копеек долга по оплате выполненных работ и 167 317 рублей неустойки за просрочку платежа в периодс 23.11.2016 по 28.02.2017 по государственному контракту № 2013.110742 от 17.07.2013.

Минпромгеологии РС(Я) предъявлен встречный иск к ООО «ГеоСтрой»о расторжении государственного контракта № 2013.110742 от 17.07.2013 и взыскании 38 652 529 рублей 74 копеек неустойки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Сахатранснефтегаз» (далее – АО «Сахатранснефтегаз»).

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2017 года, оставленным без изменения постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2017 года, в удовлетворении исковых требований ООО «ГеоСтрой» отказано; встречный иск Минпромгеологии РС(Я) в части взыскания неустойки оставлен без рассмотрения; оставшаяся часть встречных исковых требований Минпромгеологии РС(Я) удовлетворена: государственный контракт № 2013.110742 от 17.07.2013 расторгнут; с ООО «ГеоСтрой» в доход федерального бюджета взыскано 55 446 рублей государственной пошлины.

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2017 года и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2017 года были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связис необходимостью установления объёма и качества выполненных ООО «ГеоСтрой» работ.

При новом рассмотрении дела определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 09 апреля 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица,не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Газэкспертсервис» (далее –ООО «Газэкспертсервис»).

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21 июня 2018 года, оставленным без изменения постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2018 года, исковые требования ООО «ГеоСтрой» удовлетворены частично: с Минпромгеологии РС(Я) в пользу ООО «ГеоСтрой» взыскано 5 121 949 рублей 09 копеек основного долга и 111 402 рубля 39 копеек неустойки; в удовлетворении остальной части исковых требований ООО «ГеоСтрой» отказано; встречный иск Минпромгеологии РС(Я) в части взыскания неустойки оставлен без рассмотрения;в удовлетворении встречных исковых требований Минпромгеологии РС(Я) о расторжении контракта отказано; с ООО «ГеоСтрой» в доход федерального бюджета взыскано554 рубля 42 копейки государственной пошлины.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)от 21 июня 2018 года и постановлением Четвёртого арбитражного апелляционного судаот 26 сентября 2018 года, Минпромгеологии РС(Я) и АО «Сахатранснефтегаз» обратились в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых просят указанные судебные акты отменить и принять новый судебный акт.

Минпромгеологии РС(Я) в своей кассационной жалобе указывает,что гидротехнические работы были выполнены не ООО «ГеоСтрой», а иным лицом –АО «Сахатранснефтегаз». Акты на засыпку (обвалку), общий журнал выполнения работ не содержат информации о выполнении гидротехнических работ. Выполнение данных работ третьим лицом подтверждают АО «Сахатранснефтегаз» и ООО «Газэкспертсервис».

ООО «ГеоСтрой» в отзыве на данную кассационную жалобу указываетна законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просит оставить ихбез изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

АО «Сахатранснефтегаз» в своей кассационной жалобе указывает,что гидротехнические работы были выполнены им, а не ООО «ГеоСтрой». Договор субподряда между ООО «ГеоСтрой» и АО «Сахатранснефтегаз» не был заключён только по причине отсутствия согласования стоимости работ.

Дело рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округаот 31 января 2019 года рассмотрение кассационных жалоб Минпромгеологии РС(Я)и АО «Сахатранснефтегаз» отложено до 10 часов 30 минут 26 февраля 2019 года.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещеныпо правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о рассмотрении кассационных жалоб размещена на общедоступных сайтах Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (http://fasvso.arbitr.ru)и в информационной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет».

Исследовав материалы дела в пределах, установленных статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы кассационных жалоб, проверив правильность применения судами норм материальногои процессуального права, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходитк следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, 17.07.2013 между Минпромгеологии РС(Я) (государственный заказчик) и ООО «ГеоСтрой» (генподрядчик) заключён государственный контракт № 2013.110742 на выполнениестроительно-монтажных работ по объекту «Магистральный газопровод Майя – Табага – Чурапча – Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия)», участок Табага – Юрюнг-Кюёль (км 38,4 – км 108,2)», по которому генподрядчик в соответствии с проектно-сметной документацией и согласованным графиком производства работ обязался выполнить работу, указанную в пункте 1.2 контракта, и сдать её государственному заказчику,а государственный заказчик – обеспечить приёмку результатов работы и их оплату (пункты 1.1 и 1.2 контракта).

Срок завершения строительства и сдачи объекта, готового к эксплуатации,в соответствии с пунктами 1.3 и 4.2 контракта (в редакции дополнительного соглашения№ 2 от 22.04.2014) – 30.09.2014.

Цена контракта составляет 346 008 339 рублей 86 копеек (в том числе НДС) согласно расшифровке цены контракта по видам работ и затрат по объекту (пункт 2.1 контракта в редакции дополнительного соглашения № 6 от 04.04.2016).

Денежное требование по оплате генподрядчику работ возникает с момента подписания государственным заказчиком акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (пункт 3.4 контракта).

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение Минпромгеологии РС(Я) обязательствпо вышеуказанному контракту, ООО «ГеоСтрой» обратилось к Минпромгеологии РС(Я)с претензией № 310 от 28.12.2016 об оплате задолженности за выполненные работыв сумме 5 121 949 рублей 09 копеек.

Поскольку Минпромгеологии РС(Я) оплату долга в полном объёме не произвело, ООО «ГеоСтрой» обратилось в арбитражный суд с вышеуказанным иском.

Минпромгеологии РС(Я) предъявлен встречный иск о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки по пункту 10.3 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 11.03.2016) в размере 38 652 529 рублей 74 копеек.

При новом рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования генподрядчика, представившего доказательства выполнения работ, не оплаченных заказчиком, с учетом отсутствия доказательств выполнения гидротехнических работ третьим лицом. Суды, руководствуясь требованиями законодательства, произвели перерасчёт неустойки за просрочку платежа. Поскольку контракт исполнен генподрядчиком, суды отказали в удовлетворении требования заказчика о расторжении контракта. Требование заказчика о взыскании неустойки оставлено без рассмотрения в связи с тем, что 12.09.2016 ООО «ГеоСтрой» было признано банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства; требование может быть рассмотрено только в рамках дела о банкротстве (№ А58-4408/2016).

Выводы судов соответствуют положениям статей 8, 12, 307, 309, 310, 329, 330, 331, 431, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации; частей 1, 2 статьи 64, частей 1, 2 статьи 65, части 1 статьи 66, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы заявителей кассационных жалоб о том, что гидротехнические работы были выполнены не ООО «ГеоСтрой», а третьим лицом, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку контракт на выполнение вышеуказанных работ между заказчикоми АО «Сахатранснефтегаз» не заключался. Наличие субподрядных отношений между ООО «ГеоСтрой» и АО «Сахатранснефтегаз» не подтверждено; каких-либо требованийпо оплате работ не предъявлялось.

Доводы заявителей кассационных жалоб фактически направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и обстоятельств, установленных судами. Основанийдля переоценки доказательств у Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в силу требований статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерациине имеется.

Неправильного применения норм материального права, несоответствия выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанциине установлено.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб Арбитражный судВосточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты основаны на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чемна основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.

Руководствуясь статьями 274, 286-288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21 июня 2018 годапо делу № А58-611/2017 и постановление Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2018 года по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок,не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренномстатьёй 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

Судьи

 

Т.П. Васина

А.Л. Барская

И.И. Палащенко