АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-18723/2023

09 августа 2023 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 09 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Селивёрстовой при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.М. Бакировой

рассмотрел в судебном заседании дело № А60-18723/2023 по первоначальному иску акционерного общества «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о расторжении договоров на технологическое присоединение.

по встречному иску обществу с ограниченной ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» (далее – общество «Пудлинговский щебеночный завод»; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (далее – общество «Облкоммунэнерго»; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить договоры на технологическое присоединение.

При участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 01.03.2021

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 01.03.2023 (посредством онлайн-заседания)

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено. 

 

Общество «Облкоммунэнерго» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу «Пудлинговский щебеночный завод» с требованием о расторжении договоров на технологическое присоединение № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022, № 501-2022- 8-ЛК от 25.03.2022.

Обществом «Пудлинговский щебеночный завод» представлен отзыв на исковое заявление, законных оснований для расторжения договоров на технологическое присоединение № 4722-2022-8-ЛК и № 501-2022-8-ЛК не усматривает, просит в удовлетворении исковых требований отказать (ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком в судебном заседании 18.05.2023 заявлено ходатайство о приобщении акта осмотра от 15.05.2023. Документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 66, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истцом заявлено о приобщении фотографий к акту от 15.05.2023. Фотографии приобщены к материалам дела в порядке ст. 66, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество «Пудлинговский щебеночный завод» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области со встречным иском к обществу «Облкоммунэнерго» с требованием об обязании исполнить договоры на технологическое присоединение: № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022, № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022.

Определением от 28.06.2023 встречное исковое заявление принято к рассмотрению совместно с первоначальным.

Обществом «Пудлинговский щебеночный завод» заявлено ходатайство о приобщении Технического плана от 25.05.2023, выписки из ЕГРП от 06.06.2023, договора ипотеки № 06MG1Z001 от 23.09.2022, выписки из ЕГРП от 01.06.2023. Документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 66, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из искового заявления, общество «Облкоммунэнерго» имеет статус сетевой организации.

Обществом «Пудлинговский щебеночный завод» (заявитель) посредством личного кабинета в адрес истца поданы заявки № 4722-2022-8-ЛК от 23.06.2022 и  № 501-2022-8-ЛК от 02.02.2022 на осуществление технологического присоединения объектов, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

<

...>. Максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой заявке составляет 150 кВт, при напряжении 0,4 кВ.

Характеристики   объектов  технологического  присоединения,   указанные ответчиком в заявках:

№ п/ п

Реквизиты договора тех. присоединения

Объект технологического присоединения

Адрес объекта

КН объекта недвижимости/стр оения

Правоустанавливливающий документ на объект техприсоединения

1

501-2022-8-ЛК

Объект недвижимости: железнодорожный тупик для выгрузки взрывчатых веществ

Свердловская обл, г Красноуфимск, 

<

...>.

66:14:0000000:615

выписка ЕГРН от 02.12.2021

2

4722-2022-8-Ж

Объект недвижимости: Здание фермы с пристроями

 

66:14:0101040:411

выписка ЕГРН от 23.06.2022 

На основании направленных заявок истцом  разработаны технические условия для технологического присоединения к каждому договору.

Между ответчиком и истцом заключены договоры на технологическое присоединение вышеуказанных объектов № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 и № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022.

После заключения договоров на технологическое присоединение истец приступил к исполнению мероприятий технических условий. Согласно пункт 25.1 Правил точка присоединения, должна располагаться не далее 15 метров от границы, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Ссылаясь на отсутствие границ объектов (координат) первоначальный истец привлек кадастрового инженера для установления границ. Кадастровым инженером с участием представителей истца и ответчика произведено натурное обследование объектов ответчика, в отношении которых подлежит выполнить технологическое присоединение. 

Как указал первоначальный истец, по результатам осмотра установлено, что объекты недвижимости с кадастровыми номерами 66:14:0101040:411, 66:14:0000000:615 на местности не обнаружены. Определить контур объекта в целях геодезической съемки не представляется возможным. Результаты осмотра оформлены актами натурного обследования объекта № 316/01-22 от 17.01.2023 и № 309/01-22 от 17.01.2023. При направлении заявок на заключение договоров в качестве правоустанавливающих документов приложены выписки из ЕГРН на объекты недвижимости: нежилое здание 1983 года постройки и железнодорожный тупик.

Истец ссылается на то, что отсутствие объекта технологического присоединения исключает возможность исполнения истцом договоров № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 и № 501-2022-8-Ж от 25.03.2022. 

Истцом в адрес ответчика направлено письмо о направлении соглашения о расторжении договора № 501-2022-8-ЛК и № 4722-2022-8-ЛК. В ответ письмами от 03.03.2023  ответчик заявил о несогласии с расторжением вышеуказанных договоров, что послужило основанием для обращения в суд с первоначальными исковыми требованиями.

Как следует из встречного искового заявления, обществом «Облкоммунэнерго» и обществом «Пудлинговый щебеночный завод» на основании заявки LK20346, поданной заявителем заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022.

Согласно п. 6 договора № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. Обществом «Облкомунэнерго» был выставлены следующие счета на оплату: 

- счет № 4722-2022-8-ЛК/1 от 18.08.2022 на сумму 56 268 руб., который был оплачен ответчиком, что подтверждается платежным поручением № 1134 от 24.08.2022

- счет № 4722-2022-8-ЛК/2 на сумму 112 536 руб.. Срок оплату указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 составляет 60 дней со дня заключения договора, то есть до 23.10.2022, фактически счет был оплачен 13.10. 2022, что подтверждается платежным поручением № 39

 - счет № 4722-2022-8-ЛК/3 на сумму 168 804 рублей. Срок оплаты указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022  составляет 15 дней со дня фактического присоединения, то есть на сегодняшний день срок оплаты счета не наступил;

- счет № 4722-2022-8-ЛК/3 на сумму 37 512 рублей. Срок оплаты указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022  составляет 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении, то есть на сегодняшний день срок оплаты счета не наступил.

Таким образом, дата заключения договора – 24.08.2022.

Согласно п. 7 Договора № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению указан в технических условиях.» В свою очередь, в технических условиях размещенных на портале https://lk.okenergo.com/ в виде приложения №1 к Договору, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (оплаты счета), то есть 24.02.2023.

Между обществом «Облкоммунэнерго» и обществом «Пудлинговый щебеночный завод» на основании заявки LK15919, поданной заявителем заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 501-2022-8-ЛК от 24.08.2022.

Согласно п. 6 Договора, он считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. обществом «Облкомунэнерго» был выставлены следующие счета на оплату: 

- счет № 501-2022-8-ЛК/1 от 23.03.2022 на сумму 37 557 руб., который был оплачен ответчиком, что подтверждается платежным поручением № 344 от 25.03.2022 

- счет № 501-2022-8-ЛК/2 на сумму 75 114 руб. Срок оплату указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 501-2022-8-ЛК от 24.08.2022 составляет 60 дней со дня заключения договора, то есть до 27.05.2022, фактически счет был оплачен 17.05.2022, что подтверждается платежным поручением № 590.

- счет № 501-2022-8-ЛК/3 на сумму 112 671 руб. Срок оплаты указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 501-2022-8-ЛК от 24.08.2022 составляет 15 дней со дня фактического присоединения, то есть на сегодняшний день срок оплаты счета не наступил

- счет № 501-2022-8-ЛК/4 на сумму 25 038 руб. Срок оплаты указанного счета в соответствии с п. 12 договора № 501-2022-8-ЛК от 24.08.2022 составляет 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении, то есть на сегодняшний день срок оплаты счета не наступил. 

Таким образом, дата заключения договора – 25.03.2022. 

Согласно п.7 Договора «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению указан в технических условиях.» В свою очередь, в технических условиях размещенных на портале https://lk.okenergo.com/ в виде приложения №1 к Договору, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (оплаты счета), то есть 25.09.2022.

Ответчик, ссылаясь на то, что сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекли. Договоры на сегодняшний день со стороны общества «Облкоммунэнерго» не исполнены, обратился в суд со встречными исковыми требованиями.

Суд, исследовав материалы дела и оценив их в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения первоначально заявленных требований, и наличии основании для удовлетворения встречных исковых требований, исходя из следующего.

В соответствии со ст. ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только надлежащее исполнение прекращает обязательство (ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В соответствии с п. 3 Правил № 861 Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно пункту 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Пунктом 8 Правил № 861 предусмотрено, что для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7(1) любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал).

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию

В соответствии с пунктами 3 и 6, 8.3 Правил N 861 сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац 2 пункта 3 Правил № 861).

В соответствии с Правилами договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. При этом договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, ее дня оплаты заявителем указанного счета (раздел X. Особенности технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил.).

Кроме того, законодатель подпунктом а(2) пункта 25 Правил возложил на сетевую организацию обязанность урегулировать все отношения с иными лицами, возникающие в ходе исполнения договора технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004. Заключение договора является обязательным для сетевой организации

Обществом «Пудлинговый щебеночный завод» посредством официального сайта сетевой организации через личный кабинет клиента подана заявка № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022 на осуществление технологического присоединения, просит осуществить технологическое присоединение ВРУ-0,4кВ объекта «Железнодорожный тупик для выгрузки взрывчатых веществ» расположенного по адресу Свердловская обл., г. Красноуфимск, п. Пудлинговый. Кадастровый номер: 66:14:0000000:615». Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 150 кВт, при напряжении 0,4 кВ. Также заявителем подана заявка 4722-2022-8-ЛК от 23.06.2022 в отношении объект недвижимости по тому же адресу - «Здание фермы с пристроями», кадастровый номер: 66:14:0101040:411. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 150 кВт, при напряжении 0,4 кВ.

Между обществом «Облкоммунэнерго» и обществом «Пудлинговый щебеночный завод», на основании заявок ответчика № 4722-2022-8-ЛК от 23.06.2022 и  № 501-2022-8-ЛК от 02.02.2022 на осуществление технологического присоединения объектов, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

<

...>, были заключены договоры на технологическое присоединение № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 и № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022. 

Пунктом «г» п. 10 Правил № 861 для заключения договора на технологическое присоединение     предусмотрено     в     составе     заявки     подавать     в     качестве правоустанавливающих документов копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя.

Во исполнение указанного пункта заявителем к заявке приложена выписка из ЕГРН от 02.12.2021 на объект – «Железнодорожный тупик для выгрузки взрывчатых веществ» и схему расположения объекта,  на объект - «Здание ферма с пристроем» приложена выписка ЕГРН от 23.06.2022.

В силу п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Договор может быть расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Заключенный между сторонами договор подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, так и норм главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общих положений об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанный договор является публичным.

Публичный характер договора не означает, что он не может быть расторгнут лицом, для которого его заключение является обязательным по причине существенного нарушения договора другой стороной. Обязательность публичного договора для такого лица относится именно к его заключению.

В пункте 15 Правил № 861 предусмотрено, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор технологического присоединения может быть расторгнут или прекращен по инициативе сетевой организации (исполнителя) в связи с нарушением условий договора со стороны потребителя (заказчика), что возможно, как в судебном порядке по правилам подпункта 1 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и во внесудебном порядке путем одностороннего заявления сетевой организацией об отказе от исполнения договора. В случаях предусмотренных законом или договором.

Из материалов дела не следует, что истец обращался к ответчику с требованием о расторжении договора и получил отрицательный ответ.

В соответствии с п. 3 Договора об осуществлении технологического присоединения № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 и Договора об осуществлении технологического присоединения № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022 точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 15 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Обязанности сторон по выполнению технических условий распределяются следующим образом: Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п. 8 Договоров). Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях (п. 6 Договоров).

Общество «Облкоммунэнерго» в качестве основания для расторжения договора ссылается на отсутствие объекта технологического присоединения, в подтверждение представлены акты натурного обследования объекта № 316/01-22 от 17.01.2023 и № 309/01-22 от 17.01.2023, что исключает возможность исполнения истцом договоров № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 и № 501-2022-8-Ж от 25.03.2022, отсутствие границ участков здания фермы и жд тупика делает невозможным определить точку присоединения.

В свою очередь, ответчик ссылается на акты натурного обследования объектов от 27.01.2023, в соответствии с которыми, кадастровым инженером определены координаты объектов, указано, что объекты присутствуют на местности.

Объект недвижимого имущества - Железнодорожный тупик для выгрузки взрывчатых веществ к.н. 66:14:0000000:615 находится в процессе капитального ремонта. В связи с приходом в негодность шпал был произведен их демонтаж, выполнение работ по восстановлению в зимний период не представлялось возможным. Завершение капитального ремонта запланировано на август 2023 года.

Объект недвижимого имущества - Здание фермы с пристроями к.н. 66:14:0101040:411, находится в процессе капитального ремонта. Завершение капитального ремонта запланировано на июнь 2024 года. Электроподключение необходимо не только для эксплуатации отремонтированного здания, но и уже для выполнения работ по его ремонту

Данные объекты зарегистрирован в ЕГРН и не сняты с кадастрового учета, являются собственностью общества «Пудлинговский щебеночный завод».

Процедура постановки на регистрационный учет объектов недвижимого имущества регламентирована государством: специальным субъектов - кадастровым инженером, по итогам осмотров и замеров составляются следующие документы: декларация в отношении объекта недвижимого имущества, технический план, далее составленные документы передаются в кадастровую палату для внесения в Единый реестр прав установленных кадастровым инженером сведений.

Правила № 861 не содержат норм обязывающих или предписывающих технологическое присоединение только к объектам капитального строительства находящихся в целом, исправном состоянии; не содержат правомочия сетевой организации оценивать состояние объектов капитального строительства, обязанность сетевой организации выполнить мероприятия по технологическому присоединению ни Правилами № 861, ни договорами на технологическое присоединение № 4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022 года, № 501-2022-8-ЛК от 25.03.2022, ни техническими условиями не ставится в зависимость от физического состояния целостности объектов капитального строительства.

На основании изложенного ответчиком представлены доказательства наличия объектов присоединения, но и координаты их размещения, следовательно, отсутствуют обстоятельства, затрудняющие или делающие невозможным исполнение договоров.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришёл к выводу о недоказанности первоначальным истцом отсутствия технической возможности присоединения спорных объектов к электрическим  сетям, как и отсутствия доказательств отказа уполномоченных органов в согласовании строительства линейного объекта на рассматриваемой территории.

Невозможность исполнения договора в соответствии со статьей 416 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказана. Оснований для расторжения договора не имеется. При том, что обязательства в рамках спорных договора подлежат исполнению, в связи с чем встречный иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Возвратить акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 570 руб., уплаченную платежным поручением № 10802 от 22.07.2022.

2. Встречное исковое требование удовлетворить.

Обязать акционерное общество «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить договоры на технологическое присоединение №4722-2022-8-ЛК от 24.08.2022, №501-2022-8-ЛК от 25.03.2022, заключенные с обществом с ограниченной ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Взыскать с акционерного общества «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пудлинговский щебеночный завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

 

Судья                                                                                         Е.В. Селивёрстова