1270/2023-133091(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-2492/2022

г. Ярославль

12 сентября 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Акционерного общества  "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Региональному фонду содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг Строй Инвест»,  временный управляющий третьего лица (ООО «Консалтинг Строй Инвест») ФИО2  

Руководствуясь п/п 4 п. 1 ст. 150, статьями 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Производство по требованиям об устранении недостатков в части замены  гофрированной ПВХ трубы от ввода в здание до ВРУ на коробы, предусматривающие  недопущение распространение пожара с пределом огнестойкости не ниже предела  огнестойкости строительных конструкций МКД № 8 по ул. Городской Вал, заделки мест  прохода кабельных линий легко удаляемой массой из несгораемого материала, выполнения  заземления, а также уравнивание потенциалов в соответствии с п. 2.1.58 ПУЭ, выполнения  устройства молниезащиты, заделки мест прохода кабельных линий в ВРУ легко удаляемой  массой из несгораемого материала, устранения следов коррозии на каркасе и металлических  стенах ВРУ, прекратить.  

Обязать Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов  Ярославской области в течение 45 дней с момента вступления Решения суда в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту системы  электроснабжения многоквартирного дома № 8 по Городскому Валу в г. Ярославле, а именно  выполнить следующие работы:  

- заменить стояковые кабельные линии на 48 квартир сечением 16 мм2 на кабельные  линии, сечением 25 мм;  

- выполнить работы по соединению кабелей при помощи сварки в пространстве  технического этажа;  

- осуществить маркировку кабелей в распределительных щитах; 

- осуществить маркировку электрощитов, разместить схемы распределения нагрузки;  

- разместить однолинейную схему электроснабжения в поэтажных электрощитах; - устранить неровности и отслоения штукатурного слоя в штробах; 

- устранить разнотон, а именно выполнить покраску стен в соответствии колером стен;  - выполнить демонтаж старого оборудования, в том числе старых стояковых кабелей, а  

также старых светильников в подвале и техническом этаже. 

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в пользу акционерного общества "Управляющая организация  многоквартирными домами Кировского района" судебную неустойку на случай  неисполнения судебного акта в размере 3 000 руб. за каждый день неисполнения судебного  акта, начиная с 46-ого календарного дня с даты вступления решения в законную силу до  момента фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных  домов Ярославской области в пользу акционерного общества "Управляющая организация  многоквартирными домами Кировского района" 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья И.Ю. Бессонова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.04.2023 8:28:00

Кому выдана Бессонова Ирина Юрьевна