РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 12 сентября 2025 года по делу А33-30766/2023 Красноярск  

«12» сентября 2025 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерного общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 885 календарных дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу привести электроэнергию, передаваемую акционерным обществом «Транснефть-Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в точки поставки, определенные Актом технологического присоединения от 15.12.2020 № 16/ПТ-МР, в соответствие с Требованиями к качеству электрической энергии утвержденными приказом Минэнерго России от 28.08.2023 № 690, в том числе выполнить следующие мероприятия:  

1) установку и ввод в работу на ПС 500 кВ Ново-Анжерская автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская -Иверка с отпайками;  

2) установку и ввод в работу на ПС 500 кВ Ново-Анжерская автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская -Яйская с отпайкой на ПС Судженская;  

3) замену батареи статических конденсаторов (БСК) 110 кВ мощностью 54,4 Мвар на ПС 110 кВ Тяжинская на статических компенсаторах реактивной мощности (СКРМ) 110 кВ мощностью 52 Мвар с плавным пофазным регулированием реактивной мощности.  

Обязать ОАО «РЖД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 885 календарных дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу выполнить мероприятия, исключающие внесение негативного влияния его электроустановок на качество электрической энергии, поступающей АО «Транснефть - Западная Сибирь» в точках поставки, определенных Актом технологического присоединения от 15.12.2020 № 16/ПТ-МР, в том числе:  

1) строительство тяговой подстанции на участке ФИО1 (ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая);  

2) установку (модернизацию) на объектах ОАО «РЖД» исполнительных устройств и устройств передачи (приема) аварийных сигналов и команд, необходимых для работы автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка с отпайками на ПС 500 кВ Ново-Анжерская и организацию каналов связи для передачи сигналов и команд управления данной АОПО;  

3) установку (модернизацию) на объектах ОАО «РЖД» исполнительных устройств и устройств передачи (приема) аварийных сигналов и команд, необходимых для обеспечения работы автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ново- Анжерская - Яйская с отпайкой на ПС Судженская и организацию каналов связи для передачи сигналов и команд управления данной АОПО;  

4) установку и ввод в работу на ПС 110 кВ Иверка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Иверка - Мариинск;  

5) установку и ввод в работу на ПС 110 кВ Иверка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Иверка - Антибесская;  

6) установку и ввод в работу на ПС 110 кВ Ачинск тяговая автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая;  

7) установку и ввод в работу на ПС 110 кВ Ачинск тяговая автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками;  

8) установка статических компенсаторов реактивной мощности (СКРМ) на ПС 110 кВ Каштан тяговая мощностью 60 Мвар с плавным пофазным регулированием реактивной мощности;  

9) установку статических компенсаторов реактивной мощности (СКРМ) на ПС 110 кВ Мариинск мощностью 60 Мвар с плавным пофазным регулированием реактивной мощности;  

10) установку и ввод в работу автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Каштан тяговая;  

11) установку и ввод в работу автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС 110 кВ Мариинск.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Транснефть - Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня по истечении срока, установленного в судебном решении по настоящему делу для выполнения мероприятий, по день фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Транснефть - Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня по истечении срока, установленного в судебном решении по настоящему делу для выполнения мероприятий, по день фактического исполнения решения суда.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Транснефть - Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 538 000 руб. судебных расходов на проведение судебной экспертизы.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Транснефть - Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 538 000 руб. судебных расходов на проведение судебной экспертизы.  

Финансовому отделу Арбитражного суда Красноярского края перечислить эксперту ФИО2 (ИНН 

<

***>, реквизиты счета: ПАО «Сбербанк» корреспондентский счет 30101 810 40000 0000225, КПП 773643001, БИК 044525225, лицевой счет получателя – 40817 810 7 3812 0554810, код подразделения банка (ТБ/ОСБ/ВСП) 38/9038/07775, адрес подразделения банка: 

<

...>) 1 076 000 руб. за счет денежных средств, поступивших на депозитный счет Арбитражного суда Красноярского края от акционерного общества «Транснефть-Западная Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по платежному поручению от № 249827 от 30.07.2024.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.Б. Мельникова