Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-34783/2022

15 февраля 2023 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ОГНЕЗАЩИТА" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТИЛЬ-М" (ИНН: 

<

***>)

третье лицо временный управляющий ООО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТИЛЬ-М" ФИО2 

при участии

- от истца: ФИО3 

- от ответчика: не яв., изв.

- от третьего лица: не яв., изв.

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ОГНЕЗАЩИТА" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТИЛЬ-М" (далее - Управление) о взыскании 3823154,52 руб. задолженности и 368683,06 руб. неустойки по договору от 11.10.2018 № Б11/10-18-СП (далее - Договор).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий Управления ФИО2.

В судебном заседании представитель Общества поддержал исковые требования.

Иные участвующие в деле лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчиком) и Управлением (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить предусмотренный Договором полный комплекс строительных работ по устройству монтажных и пусконаладочных работ инженерных систем, при этом оборудование вентиляционных установок, ГРЩ и светильники являются давальческим материалом Генподрядчика на объекте: «Объект бытового обслуживания» по адресу: 

<

...>, литера Ч, (далее «Объект»), а также обеспечить совместно с Генподрядчиком сдачу построенных сетей в эксплуатацию в предусмотренный Договором срок, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

По п. 2.1. Договора общая стоимость предусмотренных Договором работ согласно Сводному расчету стоимости №1 (Приложение №1) и отдельными Сметными расчетами (Приложение с №1.1 по №1.8) к Договору составляет 61 513 271 (шестьдесят один миллион пятьсот тринадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 39 коп.

В силу п. 2.2.5 Договора в целях обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Стороны договорились об удержании Генподрядчиком при осуществлении каждого платежа за выполненные работы 5 % (пять процентов) от суммы, подлежащей перечислению Подрядчику по Договору (далее -«гарантийные удержания»). Гарантийные удержания обеспечивают исполнение Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по исправлению недостатков Работ, а также гарантийных обязательств. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе удержать из суммы гарантийных удержаний затраты, понесенные им в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в т.ч. компенсировать расходы на устранение допущенных Подрядчиком недостатков работ), а также подлежащие уплате Подрядчиком суммы пени, штрафов, убытков. Возврат гарантийных удержаний осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке: 4 % (четыре процента) из удержанных Генподрядчиком 5 % (пяти процентов) гарантийных удержаний должны быть возвращены Генподрядчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента сдачи Объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта о полном выполнении работ по Договору Подрядчиком (Приложение №4), но не ранее чем в течение 5 банковских дней с момента получения Генподрядчиком счета, выставленного Подрядчиком на сумму гарантийных удержаний. 1% (один процент) из удержанных Генподрядчиком 5% (пяти процентов) гарантийных удержаний должны быть возвращены Генподрядчиком Подрядчику в течение 5 банковских дней по истечении 12 календарных месяцев с момента сдачи Объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами Акта о полном выполнении работ по Договору Подрядчиком, но не ранее чем в течение 5 банковских дней с момента получения Генподрядчиком счета, выставленного Подрядчиком на сумму гарантийных удержаний.

В соответствии с п. 5.1. Договора срок выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора: Срок начала работ - в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора и оплаты первого авансового платежа. Срок окончания строительно-монтажных работ (СМР)-не позднее 10 февраля 2019 г. Срок окончания пуско-наладочных работ (ПНР)- не позднее 10 марта 2019 г.

Согласно п. 8.5. Договора в случае, если Генподрядчик нарушил условия оплаты более чем на 10 (десять) рабочих дней, Генподрядчик, по письменному требованию Подрядчика, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости работ по настоящему Договору. 

По пункту 13.2. Договора Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки выплаты аванса согласно п. 2.2.1 более чем на 10 (десять) банковских дней; 

- двукратной задержки оплаты за выполненные и принятые работы согласно п. 2.2.3 более 10 рабочих дней; 

- остановки генподрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от подрядчика, на срок свыше 20 рабочих дней. 

В силу п. 13.3. Договора сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна в письменной форме об этом другую сторону за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

Стороны по Договору подписали акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

Общество, ссылаясь на задержки перечисления Генподрядчиком аванса по пункту 2.2.1 Договора более 10 банковских дней, а также неоднократные задержки оплаты выполненных и принятых Работ по пункту 2.2.3 Договора более 10 рабочих дней, на основании пункта 13.3 Договора, направило 29.10.2020 Управлению Уведомление № 170 от 28.10.2020 о расторжении Договора с требованием оплатить задолженность, а в претензии от 13.11.2020 потребовало возвратить гарантийное удержание.

Отказ Управления удовлетворить требование послужил основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Факты сдачи-приемки работ подтверждаются подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, представленными в материалы дела. 

Расторжение спорного Договора подтверждается уведомлением от 28.10.2020 № 170, описью вложения в ценное письмо (адрес: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит. А, пом. 23-Н, ком. 15), почтовой квитанцией – РПО № 19404452013461. Согласно сведениям, размещенным на сайте Почты России, отправление с РПО № 19404452013461 получено адресатом 06.11.2020.

Определением от 06.09.2022 суд истребовал у МИФНС №15 по Санкт-Петербургу выписку из ЕГРЮЛ в отношении Управления по состоянию на 30.10.2020.

В представленной налоговым органом выписке из ЕГРЮЛ адрес места нахождения Управления по состоянию на 30.10.2020 зарегистрирован: 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, лит. А, пом. 23-Н, ком. 15. 

Таким образом, Общество уведомило Управление о расторжении договора по надлежащему адресу.

Спорный договор является расторгнутым с учетом пункта 13.3 договора с 21.11.2020 (уведомление получено ответчиком 06.11.2020 + 10 рабочих дней).

Временный управляющий Управления ФИО2 в письменной позиции заявила о пропуске истцом срока исковой давности по оплате работ по актам формы КС-2 №1 от 31.12.2018, №1 от 25.01.2019, №2 от 25.02.2019, №3 от 25.03.2019.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Исковое заявление подано в суд в электронном виде 05.04.2022.

Общая стоимость работ по договору с учетом дополнительных соглашений № 1 -4 составила 68 910 869,82 руб. (61 513 271,39+4677533,23+2720065,20).

Работы выполнены согласно представленным в материалы дела актам формы КС-2 на общую сумму 68 463 087 руб. (61065488,57+4677533,23+2720065,20).

Гарантийные удержания в размере 5% составляют 3 423 154,35 руб.

Поскольку спорный договор досрочно расторгнут, указанные гарантийные удержания подлежат возврату после 21.11.2020, исходя из чего срок исковой давности по данному требованию не пропущен Обществом.

Кроме того, истцом предъявлена задолженность в размере 400 000,17 руб., которая фактически не оплачена по последнему акту формы КС-3 от 25.06.2019.

Таким образом, срок исковой давности по данному требованию также не пропущен Обществом.

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты долга, суд удовлетворяет требование о взыскании 3823154,52 руб. задолженности в полном объеме. 

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 368683,06 руб. неустойки на основании пункта 8.5 договора с учетом установленного ограничения. 

Суд проверил расчет и признал его верным.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование о взыскании 368683,06 руб. неустойки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТИЛЬ-М" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ОГНЕЗАЩИТА" (ИНН: 

<

***>) 3823154,52 руб. задолженности, 368683,06 руб. неустойки и 43959 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.