Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-313692/19-14-2217

г. Москва

10 февраля 2020 года

Резолютивная часть объявлена                                                                 20 января 2020 г.

Дата изготовления решения в полном объеме                                     10 февраля 2020 г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрев дело по иску ООО "АЛЮМИКС32" (ИНН 

<

***>)

к ответчику ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ" (ИНН 

<

***>)

о взыскании 3 063 682,61 руб.

при участии представителей:

от истца – ФИО1 по доверенности от 16.01.2020г.

судебное заседание не явились:

от ответчика –извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Алюмикс32» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «СтройТрестСити» о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 2 425 986,90 руб., пени в размере 637 695,71 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме. Истец представил на обозрение суда оригиналы документов, а именно: договоры и приложения к ним, акты КС-2, справки КС-3. Судом оригиналы обозрены.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в заседание суда первой инстанции не явился. Представил в суд отзыв, в котором против иска возражает.

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 65 от 20.12.2006 г., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ по материалам, представленным истцом и оспоренным ответчиком.

Выслушав представителя истца, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению полностью по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ООО «Алюмикс32» (подрядчик) и ООО «СтройТрестСити» (заказчик) были заключены договоры:

- подряда № 18 от 06.06.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (дом № 2) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 2 от 01.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 5 от 24.08.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 19 921 207,83 руб.

Дополнительным соглашением № 6 от 25.10.2018 г. сторонами было согласовано изменение срока выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 1 004 200,93 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 05.03.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 231 970,41 руб.

- подряда № АК/050717 от 05.07.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из теплого алюминия (дом № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 4 от 01.08.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 19 941 458 руб.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2018 г. сторонами было согласовано изменение срока выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

Дополнительным соглашением № 6 от 30.11.2018 г. сторонами было согласовано изменение цены договора, которая составила 19 504 074,21 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 816 125,22 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 05.03.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 188 524,93 руб.

- подряда № 23 от 11.07.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из холодного алюминия (дом № 1) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 3 от 30.07.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 9 174 183 руб., срок выполнения работ был продлен до 31.07.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 458 559,15 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 12.10.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 171 959,68 руб.

- подряда № 08-06-ВН-ВИТ от 08.06.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из холодного алюминия внутренних витражей (дома № 1, № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 08.07.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 30.09.2018 г.

Дополнительным соглашением № 2 от 30.09.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 2 244 332 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 121 116,60 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 13.12.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 37 909,50 руб.

- подряда № 7-08-ЖАЛ-РЕШЕТК от 07.08.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу жалюзийных решеток (дома № 1, № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 25.09.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 30.11.2018 г.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 10 360 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 13.12.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 3 242,68 руб.

- подряда № 25-10-АЛ-ВИТР от 25.10.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминия в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Срок выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 8 755 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 02.02.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 2 293,81 руб.

- подряда № 04-09-ЖАЛ-РЕШ-ДОО от 04.09.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу жалюзийных решеток (дома № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.19.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1 и п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 31.10.2018 г., стоимость работ составила 137 000 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 6 850 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 02.02.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 1 794,70 руб.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

Гарантийное удержание, установленное условиями договоров, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполненных работ, покрытия возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, по договорам.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах строительного подряда и регулируются нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

По смыслу указанных норм права основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате надлежащим образом выполненных работ является сдача подрядчиком результата этих работ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Истец порученные ему работы выполнил в полном объеме, работы приняты ответчиком без замечаний.

В свою истец 16 апреля 2019 г. направлял в адрес ответчика все акты об исполнении обязательств в целях их подписания и выплаты гарантийного удержания, что подтверждается копией описи вложения, копией квитанции об отправлении документов курьерской службой от 16.04.2019 г. На сайте отслеживания отправлений значится отчет, согласно которому 17.04.2019 г. документы получены в 09 час. 03 мин. Рештук, ООО «СтройТрестСити». Однако ответа со стороны ответчика в части выполнения обязанности по погашению суммы долга не последовало.

Таким образом, подписание актов об исполнении обязательств не зависят от воли и действий истца.

Обстоятельств, свидетельствующих о не качественности выполненных истцом работ, их несоответствия условиям договоров либо обязательным строительным нормам и правилам, судом в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательств того, что за период эксплуатации результата выполненных истцом работ были выявлены какие-либо недостатки (дефекты), ответчик в материалы дела не представил.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об обоснованности требования подрядчика о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 2 425 986,90 руб.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ в установленный договорами срок, то исковые требования о взыскании неустойки в связи с неисполнением обязательств в размере 637 695,71 руб. также подлежат удовлетворению. При этом, расчет проверен судом и признан арифметически верным и соответствующим условиям договоров и фактическим обстоятельствам дела.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СТРОЙТРЕСТСИТИ" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "АЛЮМИКС32" (ИНН 

<

***>) 2 425 986,90ркб. – гарантийного удержания, 6 37 695,71руб. – пени и 38 318руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

 

Судья:                                                                                                 О.В. Лихачева