АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-6074/2017  « 10 » октября 2018 г.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», г.Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Алтиус Инжинеринг и  Констракшн», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170, 174, 176, 180, 181 АПК  РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Стройсервис», г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью 

«Алтиус Инжинеринг и Констракшн», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение в течение 30 календарных  дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно  устранить недостаток работ по договору № АЕС-1СС-Р-2012 от  31.08.2012, а именно: выполнить на наружной железобетонной стене  ниже отметки 0.000 объекта «Четырехзвездочная гостиница по адресу:  

<

...>» оклеечную гидроизоляцию в два  слоя гидроизола с защитной прижимной стенкой из асбестоцементного  листа толщиной 20 мм. и утепление экструзионным пеностиролом  толщиной 100 мм. на глубину сезонного промерзания грунта (1,2 м для  Воронежской области).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Алтиус Инжинеринг и Констракшн», г. Воронеж (ОГРН  

1113668040056, ИНН 3664114096) в доход федерального бюджета 6 000  руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья А.И.Стеганцев