АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Ленина 76, тел. 61-92-78  http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А03-1453/2018

г. Барнаул

04 февраля 2019 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело  

-по иску общества с ограниченной ответственностью Производственно –  строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строй перфект», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) о  взыскании 7 402 479 руб. 84 коп. долга, 124732 руб. 21 коп. процентов,  

-по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строй перфект»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  Производственно – строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) об обязании устранить недостатки в выполненных работах и передать  исполнительную документацию,  

-по иску Комитета жилищно – коммунального хозяйства г. Барнаула (ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй перфект», г.  Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 764 156 руб. убытков,  

при участии представителей сторон: от истца по первоначальному иску: ФИО2 (доверенность, паспорт); 

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 (доверенность, паспорт),  ФИО4 (доверенность, паспорт),  

от комитета: ФИО5 (доверенность, паспорт), 

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137,  пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края   

Р Е Ш И Л :

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью Производственно –  строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) от иска к  обществу с ограниченной ответственностью «Строй перфект», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) в части взыскании 764 156 руб. долга, 124 732 руб. 21 коп. процентов,  производство по делу в указанной части прекратить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственно –  строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) устранить  недостатки выполненных работ следующим способом, а именно:  

-в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> Октября 34 и 36:  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа;  

недостатки работ в виде наличия участков благоустройства, на которых швы между  бортовыми камнями превышают 5 мм, устранить путем разборки существующих  бортовых камней и установкой новых с соблюдением требований нормативно –  технической документации;  

недостатки в виде уступов между бортовыми камнями, устранить путем разборки  существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации;  

недостатки в виде локальных участков просадки асфальтобетонного покрытия  местами до 4 см, в результате чего происходит скопление воды, а также поверхность  имеет значительную неровность, устранить путем разборки существующего  асфальтобетонного покрытия и укладкой нового с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> 219:  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа;  

недостатки работ в виде наличия участков благоустройства, на которых швы между  бортовыми камнями превышают 5 мм, устранить путем разборки существующих  бортовых камней и установкой новых с соблюдением требований нормативно –  технической документации.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>:  

недостатки в виде покрытия парковки перед домом (неровности, впадины,  скапливание воды) устранить путем замены асфальтобетонного покрытия с соблюдением  необходимых уклонов;  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> 35:  

недостатки в виде уступов между бортовыми камнями, устранить путем разборки  существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации;  

недостатки в виде неполного заполнения швов между бортовыми камнями,  устранить путем заделки швов между существующими бортовыми камнями без их  демонтажа;  

недостатки работ в виде наличия участков благоустройства, на которых швы между  бортовыми камнями превышают 5 мм, устранить путем разборки существующих  бортовых камней и установкой новых с соблюдением требований нормативно –  технической документации.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> 93:  

недостатки в виде уступов между бортовыми камнями, устранить путем разборки  существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации;  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа;  

недостатки работ в виде наличия участков благоустройства, на которых швы между  бортовыми камнями превышают 5 мм, устранить путем разборки существующих  

бортовых камней и установкой новых с соблюдением требований нормативно –  технической документации.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>:  

недостатки в виде уступов между бортовыми камнями, устранить путем разборки  существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации;  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа;  

недостатки работ в виде наличия участков благоустройства, на которых швы между  бортовыми камнями превышают 5 мм, устранить путем разборки существующих  бортовых камней и установкой новых с соблюдением требований нормативно –  технической документации;  

недостатки в виде установки на пешеходной дорожке (тротуаре) у дома № 203  части бортовых камней без бетонного основания, устранить путем разборки  существующих бортовых камней с установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации.  

- в отношении дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> 215:  

недостатки в виде уступов между бортовыми камнями, устранить путем разборки  существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением всех требований  нормативно – технической документации;  

недостатки в виде незаполнения, либо неполного заполнения швов между  бортовыми камнями, устранить путем заделки швов между существующими бортовыми  камнями без их демонтажа;  

недостаток в виде превышения высоты бортового камня над уровнем  асфальтобетонного покрытия проезда на 20 см. (вдоль пешеходной дорожки), устранить  путем разборки существующих бортовых камней и установкой новых с соблюдением  требований нормативно – технической документации.  

Указанные недостатки устранить в течение 45 дней. Срок устранения недостатков  исчислять со дня вступления решения в законную силу, но не ранее 15 мая 2019г.  

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  Производственно – строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй перфект», г.  

Барнаул (ОГРН 

<

***>) о взыскании 6 638 323 руб. 84 коп. долга, 59 192 руб.  расходов по оплате государственной пошлины.  

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Строй перфект», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью Производственно – строительная компания «Индустрия», г. Барнаул  (ОГРН 

<

***>) о взыскании 6 000 руб. расходов по оплате государственной  пошлины, 52 500 руб. расходов по проведению экспертизы.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

В результате зачета первоначальных и встречных денежных требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Строй перфект», г. Барнаул (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Производственно –  строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) 6 638 323 руб. 84  коп. долга, 692 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Производственно –  строительная компания «Индустрия», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>) из федерального  бюджета излишне оплаченную государственную пошлину в сумме 4 443 руб.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.Н. Пашкова