10458_11022272  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13 http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-24457/22

26 сентября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арбатских Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального автономного  учреждения «Уральский инновационный молодежный центр» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) о взыскании денежных средств, об обязании,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу решения суда  

по настоящему делу устранить недостатки: 

в части ремонта кровли (договор от 22.07.2021 № 32110389479 на объекте -  

учебный корпус для технопарка КВАНТОРИУМ муниципального автономного  

учреждения «Уральский инновационный молодежный центр») путем выполнения  

следующих работ: 1) Демонтаж ограждения кровли -120 м/п. 

2) Разборка покрытия кровли из металлочерепицы - 669 м2.  3) Разборка покрытия карнизного свеса из оцинкованной стали - 168 м2.  

4) Разборка слуховых окон - 3 шт. 5) Разборка обрешетки с прозорами - 669 м2. 6) Устройство обрешетки с прозорами - 669 м2. 

7) Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном - 625 м2.  8) Укладка гидроветрозащитной подкровельной пленки - 669 м2.  

9) Устройство контробрешетки - 669 м2. 

10) Устройство кровли из металлочерепицы «Монтеррей» по готовым прогонам669 м2 (коньковый элемент 67 м/п, торцевая планка 27 м/п, карнизная планка 120 м/п,  

планка примыканий 27 м/п). 11) Устройство слуховых окон - 3 шт. 

12) Погрузка и перевозка мусора - 38 т. (включая имеющийся мусор в чердачном  

помещении);  

в части ремонта крыльца здания (договор от 13.09.2021 № 32110552202 на объекте  - учебный корпус для технопарка КВАНТОРИУМ муниципального автономного  учреждения «Уральский инновационный молодежный центр») путем выполнения  следующих работ: снять разрушенную и пришедшую в негодность плитку и уложить новую на  лестничной площадке, площадь 42,69 м2 и ступенях крыльца, площадь 44,88 м2;  

в части ремонта входной группы (договор от 23.08.2021 № 32110519487_2 на  объекте - учебный корпус для технопарка КВАНТОРИУМ муниципального автономного  учреждения «Уральский инновационный молодежный центр») путем выполнения  следующих работ: заменить керамическую плитку и уложить новую на стенах и колоннах  входной группы, площадь 17,862 м2.  

На случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «Империя»  решения Арбитражного суда Ростовской области по настоящему делу в части требований  неимущественного характера об устранении недостатков работ в течение 30-ти  календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда установить и  взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального автономного учреждения «Уральский  инновационный молодежный центр» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) судебную  неустойку в размере 5000 рублей за каждый день до фактического исполнения решения  суда.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального автономного учреждения  «Уральский инновационный молодежный центр» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) убытки в размере 185 876 рублей, судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 16 176 рублей, расходы по оплате судебной  строительно-технической экспертизы в размере 130 000 рублей.  

Возвратить муниципальному автономному учреждению «Уральский  инновационный молодежный центр» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) из  федерального бюджета 8400 рублей государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению от 19.08.2022 № 13604 в составе суммы в размере 12000 рублей.  

В остальной части требований отказать. 

Перечислить автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт экспертиз» (ИНН 

<

***>) с депозитного счета 130 000  рублей за проведение судебной экспертизы (по счету от 19.06.2023 № 83).  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по правилам гл .35 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Судья Новожилова М. А.