9080/2021-92679(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-6056/2021 

Нижний Новгород 26 апреля 2021 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Окорокова Дмитрия  Дмитриевича (шифр 17-103), при ведении протокола помощником судьи Шиповой  Аленой Дмитриевной, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

правительства Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.  Н.Новгород,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Приволжье Свой Дом", г.  Н.Новгород, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о взыскании неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестпроекта  "Строительство гостиничного комплекса по соглашению № 55" от 03.05.2012 года в сумме  1 478 256 руб. за период с 21.06.2013 по 06.03.2015; за на нарушение срока получения  разрешения на строительство и в сумме 1 802 809 руб. за период с 31.12.2017 по  30.01.2020 за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию,  

 Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Приволжье Свой Дом", г.  Н.Новгород, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

- в пользу Правительства Нижегородской области, г. Нижний Новгород, (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), 100000 руб. 00 коп. неустойки.  

- в доход федерального бюджета 20144 руб. 00 коп. госпошлины.  

Исполнительный лист на взыскание неустойки выдать по заявлению взыскателя  после вступления решения в законную силу.  

Исполнительный лист на взыскание госпошлины в доход федерального бюджета  выдать после вступления решения в законную силу.  

 В остальной части в иске отказать. 

 Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго- Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, если иное не  предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Д. Окороков