АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9398/21

г. Уфа

02 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22.02.2022

Полный текст решения изготовлен 02.03.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Хазиахметовой З.Р. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амировой Э.И., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании долга в размере 3 888 327 руб. 36 коп.

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, паспорт, по доверенности от 15.09.2021

от ответчика – не явились, извещены. 

Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" (далее – общество "Строймонтаж") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (далее - общество "Фирма СУ-10")  о взыскании долга в размере 3 888 327 руб. 36 коп.

Определением суда от 21.05.2022 года дело в порядке статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен по доводам отзыва, также ходатайствовал о рассмотрении спора по общим правилам искового производства.

Определением от 16.07.2021 суд перешел к рассмотрению спора по общим правилам искового производства.

Определением от 11.02.2022 произведена замена судьи Байковой А.А. на судью Хазиахметову З.Р.

В ходе рассмотрения спора истец уточнял исковые требования, в результате просил взыскать задолженность в размере 4 463 015 руб. 36 коп.

Заявление об уточнении суммы исковых требований судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, по правилам статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителя в судебное заседание не обеспечил. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика по правилам ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании истец уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

В судебном заседании протокольным определением объявлен перерыв до 22.02.2022 до 12:00. После перерыва судебное заседание продолжено после перерыва в том же составе суда, при том же лице, ведущем протокол, стороны явку не обеспечили. 

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между обществом "Строймонтаж"  (субподрядчик) и обществом "Фирма СУ-10"  (субподрядчик) заключен договор субподряда № 191/18-01 от 07.11.2018, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству стяжки на объекте: "Строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГБУЗ РБ РКОД" согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком строительства".

В силу п. 2.1 договора Стоимость работ по настоящему договору составляет:

-устройство полусухой стяжки пола - 320 руб. за 1 м2 (без учета стоимости материалов), в том числе НДС-18%;

-устройство утепления полов под стяжку - 50 руб. за 1 м2 (без учета стоимости материалов), в том числе НДС-18%.

При определении окончательной стоимости работ учитывается стоимость материалов, которые были переданы Генподрядчиком Субподрядчику.

Согласно п. 2.2 договора Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании оформленных Актов КС-2, КС-3, исполнительной документации, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

В соответствии с п. 2.3 договора оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика, а также любыми иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации. Оплата производится с удержанием гарантийного резерва 5% от стоимости выполненных работ. При отсутствии нарушения обязательств со стороны Субподрядчика по качеству и срокам проведения работ, окончательный расчет за работы, выполненные по настоящему Договору, производятся в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после завершения комплекса работ и подписания Акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. При определении окончательной цены, Стороны учитывают стоимость материала, предоставленного Генподрядчиком.

В силу п. 3.1 договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания договора; окончание работ - I квартал 2019 года.

Факт выполнения работ по договору субподряда № 191/18-01 от 07.11.2018 подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2018 на сумму 1 198 800 руб., № 1 от 31.03.2019 на сумму 1 301 760 руб., № 1 от 19.04.2019 на сумму 475 443 руб. 20 коп., № 1 от 30.04.2019 на сумму 483 585 руб. 20 коп., № 1 от 31.05.2019 на сумму 894 937 руб. 60 коп., №1 от 31.05.2019 на сумму 94 770 руб. 20 коп., справками о стоимости выполненных работ № 1 от 30.11.2018 на сумму 1 198 080 руб., № 1 от 31.03.2019 на сумму 1 301 760 руб., № 1 от 19.04.2019 на сумму 475 443 руб. 20 коп., № 1 от 30.04.2019 на сумму 483 585 руб. 20 коп., №  1 от 31.05.2019 на сумму 894 973 руб. 60 коп., № 1 от 31.05.2019 на сумму 94 770 руб. 20 коп.

Между обществом "Строймонтаж"  (субподрядчик) и обществом "Фирма СУ-10"  (субподрядчик) заключен договор субподряда № 114а/19-01 от 03.06.2019, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству полусухой стяжки на объекте: "Реконструкция здания СОШ № 44 Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" согласно проектно-сметной документации, утвержденной заказчиком строительства".

В силу п. 2.1 договора Стоимость работ по настоящему договору составляет:

-комплекс работ по устройству стяжки пола , без учета стоимости материала - 320 (триста двадцать) рублей за 1м2, в том числе НДС.

При определении окончательной стоимости работ учитывается стоимость материалов, которые были переданы Генподрядчиком Субподрядчику.

Согласно п. 2.1 договора Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании оформленных Актов КС-2, КС-3, исполнительной документации, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

В соответствии с п. 2.2 договора оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика, а также любыми иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.

Оплата производится с удержанием гарантийного резерва 5% от стоимости выполненных работ. При отсутствии нарушения обязательств со стороны Субподрядчика по качеству и срокам проведения работ, окончательный расчет за работы, выполненные по настоящему Договору, производятся в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после завершения комплекса работ и подписания Акта выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. При определении окончательной цены, Стороны учитывают стоимость материала, предоставленного Генподрядчиком.

В силу п. 3.1 договора сроки выполнения работ: начало работ - с момента подписания договора; окончание работ - 30.08. 2019 года.

Факт выполнения работ по договору субподряда № 114а/19-01 от 03.06.2019 подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работах № 1 от 30.06.2019 на сумму 1 510 138 руб. 90 коп., № 1 от 30.09.2019 на сумму 35 200 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2019 на сумму 1 510 138 руб. 90 коп., № 30.09.2019 на сумму 35 200 руб.

Между обществом "Строймонтаж" (субподрядчик) и обществом "Фирма СУ-10"  (субподрядчик) заключен договор субподряда № 107/20-01 от 20.04.2020, по условиям которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по устройству полусухой стяжки пола на объекте: "Реконструкция существующих зданий ГБУЗ РКЦ МЗ РБ со строительством хирургического корпуса".

В силу п. 2.1 договора стоимость и виды работ без расходных материалов, в том числе НДС, по договору:

-комплекс работ по устройству полусухой стяжки пола – 320 руб. за 1 кв.м.;

-ориентировочный объем работ составляет – 4 000 кв.м.

- ориентировочная стоимость договора – 1 280 000 руб.

Окончательная стоимость определяется по фактическому объему работ, принятому генподрядчиком.

Согласно п. 2.2 договора Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется на основании оформленных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), исполнительной документации, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

В соответствии с п. 2.2 договора оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика, а также любыми иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.

В силу п. 2.3 договора Оплата производится с удержанием гарантийного резерва 5% от стоимости выполненных работ. При отсутствии нарушения обязательств со стороны Субподрядчика по качеству и срокам проведения работ, окончательный расчет за работы, выполненные по настоящему Договору, производятся в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после завершения комплекса работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. При определении окончательной цены, Стороны учитывают стоимость материала, предоставленного Генподрядчиком.

Согласно п. 3.1 договора сроки выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – до 31.09.2020.

Факт выполнения работ по договору субподряда № 107/20-01 от 20.04.2020 подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работах №2 от 31.10.2020 на сумму 841 680 руб., № 3 от 31.03.2021 на сумму 204 400 руб., № 4 от 18.05.2021 на сумму 498 400 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.10.2020 на сумму 841 680 руб., № 3 от 31.03.2021 на сумму 204 400 руб., № 4 от 18.05.2021 на сумму 498 400 руб.

В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела представлен подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 по 03.12.2021, в соответствии с которым задолженность ответчика по оплате оказанных выполненных работ составляла 4 463 015 руб. 36 коп.

По сведениям истца, оплата работ произведена ответчиком частично – в сумме 3 075 379 руб. 74 коп., задолженность составляет 4 463 015 руб. 36 коп.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом "Фирма СУ-10" обязанности по оплате выполненных работ, общество "Строймонтаж" направило в его адрес претензию с требованием уплаты долга, а впоследствии обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Возражая против удовлетворения исковых требований общество "Фирма СУ-10" в отзыве на иск указывает, что по договору субподряда № 191/18-01 от 07.11.2018 г. акты о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2018, № 1 от 31.03.2019, № 1 от 19.04.2019, № 1 от 31.05.2019, № 1 от 31.05.2019, по договору № 114а/19-01 от 03.06.2019 г. акты о приемке выполненных работ № 1 от 30.06.2019, № 1 от 30.09.2019, по договору № 107/20-01 от 20.04.2020 акты о приемке выполненных работ № 2 от 31.10.2020 им не подписаны. По мнению ответчика, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства передачи исполнительной документации, в связи с чем полагает, что обязанность по оплате выполненных работ у ответчика отсутствует.

Проанализировав условия договоров субподряда № 191/18-01 от 07.11.2018 г., № 114а/19-01 от 03.06.2019 г., № 107/20-01 от 20.04.2020, суд пришел к выводу, что сторонами заключены договоры строительного подряда, отношения по которым регулируются положениями статей 740 – 757 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также непротиворечащих им общих норм о подряде, содержащихся в главе 37 ГК РФ.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику (статьи 720, 753 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры № 191/18-01 от 07.11.2018 г., № 114а/19-01 от 03.06.2019 г., № 107/20-01 от 20.04.2020, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, суд установил факт заключения сторонами договоров подряда, факт выполнения истцом в рамках данных договоров, факт принятия указанных работ ответчиком, в связи с чем пришел к выводу о возникновении на стороне последнего обязанности по их оплате. 

Рассмотрев доводы ответчика, суд признает их несостоятельными.

В предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта выполнения работ в соответствующем объеме, подтвержденном документально, а также факта исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ с учетом условий договора о порядке и сроках оплаты. 

Истцом в доказательство выполнения работ представлены акты выполненных работ, часть из которых ответчиком не подписана. Вместе с тем, мотивированного отказа от приемки выполненных работ ответчиком не заявлено, доказательства наличия претензий к выполненным работам в материалах дела отсутствуют, возражений относительно их количества, качества и стоимости не заявлено, при этом доказательств оплаты не представлено, наличие задолженности не опровергнуто.

При таких обстоятельствах уточненные требования общества "Строймонтаж"  о взыскании с общества "Фирма СУ-10" задолженности по оплате выполненных работ в размере  4 463 015 руб. 36 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. С учетом удовлетворения уточненных исковых требований в полном объеме понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 442 руб. подлежат возмещению за счет ответчика. 

Поскольку при увеличении исковых требований государственная пошлина в размере 2 873 руб. истцом не доплачена, она подлежит взысканию в доход федерального бюджета непосредственно с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Строймонатж" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строймонатж" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 4 463 015 руб. 36 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 42 442 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Фирма СУ-10" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 873 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья З.Р. Хазиахметова