Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-121485/24-107-840

26 сентября 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2024 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола помощником судьи А.Э.Гогиберидзе, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-121485/24-107-840 по иску ГКУ "АМПП" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО "ВС СТРОЙПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки по государственному контракту № В-766ТК-ДТЗ-ГК от 16.09.2020 в размере 2 965 611,90 р., при участии представителя истца: ФИО1, доверенность от 12.01.2024, паспорт, представителей ответчика: не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

ГКУ "АМПП" (далее – Истец, Заказчик) обратился в суд с требованиями о взыскании с ООО "ВС СТРОЙПРОЕКТ" (далее – Ответчик, Подрядчик) неустойки по государственному контракту № В-766ТК-ДТЗ-ГК от 16.09.2020 в размере 2 965 611,90 р.

Ответчик на судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом, мотивированный отзыв не представил, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, сторонами заключен государственный контракт В-766ТК-ДТЗ-ГК от 16.09.2020 (далее – Контракт), согласно которому Подрядчик обязуется выполнить работы по обустройству земельных участков (очередь 5) (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена контракта составляет 77 229 476,53 рублей. 

В соответствии с п.п. 6.1-6.2 Контракта Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании. 

Согласно п. 4.2 Технического задания гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологий производства, действующих норм и правил и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.

В соответствии с п. 6.3 Контракта при обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

Работы по Контракту были выполнены Подрядчиком в требуемом Заказчику объеме, приняты Заказчиком в соответствии с Итоговым Актом сдачи-приемки выполненных работ от 28.12.2020 и оплачены.

Согласно п. 7.1 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком ( подрядчиком, исполнителем ), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063" и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Заказчик неоднократно писал претензионные письма Подрядчику с требованиями устранения выявленных недостатков по Контракту, которые были устранены с нарушением срока исполнения обязательств.

Вышеизложенное послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

На основании п. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 1 и 3 статьи 720 ГК РФ заказчик работ обязан в сроки и в порядке предусмотренном договором осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием подрядчика, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. При принятии работы без проверки или при отсутствии возражений против качества работы заказчик не вправе ссылаться на ее недостатки.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГКРФ).

В силу статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Материалами дела, в том числе представленными письмами, установлено нарушение срока исправления недостатков в гарантийный период, доказательств обратно в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, учитывая  вышеизложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требований в размере 2 965 611,90 р. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом, подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310, 329, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ВС СТРОЙПРОЕКТ" в пользу ГКУ "АМПП" сумму неустойки по государственному контракту № В-766ТК-ДТЗ-ГК от 16.09.2020 в размере 2 965 611,90 р., государственную пошлину в размере 37 826 р.

Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.   

 

СУДЬЯ

М.В. Ларин