ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 108564/21-67-846

г. Москва

27 июля 2021 г.

Резолютивная часть решения оглашена 22 июля 2021 года

Полный тест решения изготовлен 27 июля 2021 года

 

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТ" (115114, Москва город, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1, под/офис 0/7, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2018, ИНН: 

<

***>), 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС" (121596, Москва город, ФИО2 улица, дом 2, строение 3, эт 9 пом ii оф 171, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.05.2019, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 45 662 625,94 руб. 

При участии:

От истца: ФИО3 по дов-ти от 20.07.2021 г., диплом

От ответчика: ФИО4 по дов-ти от 16.06.2021 г., диплом

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТ" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СТС" (далее – ответчик) о взыскании с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ неотработанного аванса в размере 39 073 032 руб. 29 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.04.2021 по 22.07.2021 в размере 544 881 руб. 46 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Суд отклонил ходатайство ответчика об отложении заседания, поскольку  ведение сторонами переговоров относительно урегулирования спора не препятствовало ответчику добросовестно пользоваться своими процессуальными правами. Мировое соглашение между сторонами не заключено, однако стороны не лишены возможности заключить мировое соглашение на любой стадии арбитражного судопроизводства, включая стадию исполнения судебного акта.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - «Подрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА» (далее - «Субподрядчик»), были заключены следующие Договора субподряда:

№ ЭП-СТС-1 от 14 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 1;

№ ЭП-СТС-2 от 17 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 2;

№ 10/04/20-ЭП от 10 апреля 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 3;

№ 20/01/20 от 20 января 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 4;

№ 07/05/20 от 07 мая 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 5. 

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами строительного подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфах 1, 3 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729, 740 - 757).

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Так, согласно условиям Договоров субподряда (п. 2.1,), Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпусов 1, 2, 3, 4, 5.

Согласно п. 1.19. Договоров субподряда, «Работы и услуги» - весь комплекс работ по строительству объекта, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Договором и рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования поставки Субподрядчика, проведение испытаний и сдачу объекта в эксплуатацию, иных неразрывно связанных с объектом работ, в том числе и в течение гарантийного периода.

В соответствии с п. 1.1. Договора субподряда, «Акт о приемке выполненных работ» -первичный учетный документ (документ, составленный по унифицированной форме № КС-2 в порядке, установленном Госкомстата РФ), составляемый Субподрядчиком и подтверждающий выполнение работ за отчетный период, подписываемый Сторонами и не является документом подтверждающим передачу результата работ.

Общая сумма по Договорам субподряда составляет - 72 193 623,06 рублей, в том числе:

№ ЭП-СТС-1 от 14 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 1 - 6 798 934,15 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек;

№ ЭП-СТС-2 от 17 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 2 - 7 450 149,15 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто сорок девять) рублей 15 копеек;

№ 10/04/20-ЭП от 10 апреля 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 3 - 21 432 074,40 (Двадцать один миллион четыреста тридцать две тысячи семьдесят четыре) рубля 40 копеек;

№ 20/01/20 от 20 января 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 4 - 17 353 464,08 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля 08 копеек;

№ 07/05/20 от 07 мая 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 5 - 19 159 001,28 (Девятнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч один) рубль 28 копеек.

На основании п. 3.5. Договоров и выставленных счетов на оплату, Подрядчиком Субподрядчику были перечислены авансы на общую сумму в размере 44 502 034,43 (Сорок четыре миллиона пятьсот две тысячи тридцать четыре) рубля 43 копейки, а именно:

Договор № ЭП-СТС-1 от 14 августа 2020 года - Корпус 1 - 4 131 411,15 (Четыре миллиона сто тридцать одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 15 копеек, подтверждается платежными поручениями № 810 от 21.08.2020г. и № 890 от 02.09.2020г.;

№ ЭП-СТС-2 от 17 августа 2020 года - Корпус 2 - 3 496 704,15 (Три миллиона четыреста девяноста шесть тысяч семьсот четыре) рубля 15 копеек, подтверждается платежными поручениями № 789 от 20.08.2020г. и № 891 от 02.09.2020г.;

№ Ю/04/20-ЭП от 10 апреля 2020 года - Корпус 3 - 18 559 556,82 (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 82 копейки, подтверждается платежными поручениями № 6 от 27.02.2020г., № 198 от 12.05.2020г., № 231 от 15.05.2020г., № 261 от 26.05.2020г., № 262 от 26.05.2020г., № 16 от 28.05.2020г., № 313 от 03.06.2020г., № 330 от 05.06.2020г., № 345 от 09.06.2020п, № 609 от 24.07.2020г., № 646 от 30.07.2020г., № 647 от 30.07.2020г., № 737 0т 14.08.2020г., № 738 от 14.08.2020г., № 836 от 25.08.2020г., № 856 от 28.08.2020г., № 1102 от 23.10.2020г., № 1104 от 23.10.2020г., № 12723 от 16.11.2020г., № 12856 от 18.12.2020г., № 12857 от 18.12.2020г., № 12858 от 18.12.2020г., № 12859 от 18.12.2020г. и № 12895 от 22.12.2020г.;

№ 20/01/20 от 20 января 2020 года - Корпус 4 - 12 488 310,76 (Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста десять) рублей 76 копеек, подтверждается платежными поручениями № 15 от 21.01.2020г., № 50 от 06.02.2020г., № 76 от 17.02.2020г., № 82 от 20.02.2020г., № 39 от 03.03.2020г., № 40 от 03.03.2020г., № 79 от 20.03.2020г., № 88 от 27.03.2020г., № 145 от 17.04.2020г., № 157 от 21.04.2020г., № 199 от 12.05.2020г., № 200 от 12.05.2020г., № 210 от 14.05.2020г., № 243 от 19.05.2020г., № 244 от 19.05.2020г., № 245 от 19.05.2020г., № 265 от 26.05.2020г., № 266 от 26.05.2020г., № 317 от 03.06.2020г., № 325 от 04.06.2020г., № 337 от 08.06.2020г., № 645 от 30.07.2020г., № 649 от 30.07.2020г., № 650 от 30.07.2020г., № 739 от 14.08.2020г., № 857 от 28.08.2020г., № 1103 от 23.10.2020г., № 12724 от 16.11.2020г. и № 12896 от 22.12.2020г.;

№ 07/05/20 от 07 мая 2020 года - Корпус 5 - 5 826 051,55 (Пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят один) рубль 55 копеек, подтверждается платежными поручениями № 327 от 04.08.2020г. и № 830 от 25.08.2020г.

Сроки выполнения работ, согласно Договоров субподряда, были согласованы Сторонами в Графиках производства работ (Приложение № 1 к Договорам субподряда), а именно:

№ ЭП-СТС-1 от 14 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 1, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), все работы по Договору должны были быть выполнены в полном объеме до 20 октября 2020 года (п.4.2. Договора);

№ ЭП-СТС-2 от 17 августа 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 2, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), все работы по Договору должны были быть выполнены в полном объеме до 20 октября 2020 года (п.4.2. Договора);

№ 10/04/20-ЭП от 10 апреля 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 3, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), все работы по Договору должны были быть выполнены в полном объеме до 30 июня 2020 года (п.4.2. Договора);

№ 20/01/20 от 20 января 2020 года— на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 4, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), все работы по Договору должны были быть выполнены в полном объеме до 15 мая 2020 года (п.4.2. Договора);

№ 07/05/20 от 07 мая 2020 года - на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, кровельных, отделочных, гидро-теплоизоляционных, монтажа металлоконструкций, изделий, элементов, на строительном Объекте: Многофункционального комплекса «Центр водного спорта Динамо», находящийся по адресу: г. Москва, СВАО, Останкинский, Березовая аллея, пересечение с ул. Сельскохозяйственная, Корпус 5, согласно Графика производства работ (Приложение № 1), все работы по Договору должны были быть выполнены в полном объеме до 30 июля 2020 года (п.4.2. Договора).

В ходе производства по делу Ответчиком к отзыву были представлены документы, подтверждающие выполнение работ по договорам субподряда № 10/04/20-ЭП от 10.04.2020 года на сумму 1 957 950,00 рублей (корпус 3, Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.11.2020г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 30.11.2020г.) и № 20/01/20 от 20.01.2020 года на сумму 3 401 631,10 рублей (корпус 4, Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 04.03.2020г. и № 2 от 30.11.2020г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 30.11.2020г.), всего на общую сумму 5 359 581,10 рублей.

Истцом при уточнении исковых требований учтены представленные ответчиком документы, таким образом, сумма неосновательного обогащения составляет 39 073 032,29 рублей.

Ходатайство о назначении судебной строительно-технической экспертизы по делу ответчиком не заявлено, доказательств сдачи-приемки работ в соответствии с условиями Договоров также не представлено. 

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права. 

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленных денежных средств, установленный факт расторжения договоров подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств, требования истца о взыскании неотработанного аванса в размере 39 073 032 руб. 29 коп. подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.04.2021 по 22.07.2021 в размере 544 881 руб. 46 коп.

В силу п. 2 ст. 1107 на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.04.2021 по 22.07.2021 в размере 544 881 руб. 46 коп.  подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТС" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОЕКТ" сумму неотработанного аванса в размере 39 073 032 (тридцать девять миллионов семьдесят три тысячи тридцать два) руб. 29 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.04.2021 по 22.07.2021 в размере 544 881 (пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 46 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                            В.Г. Джиоев