54/2017-34959(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-3421/2017

г. Нальчик

03 октября 2017 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи А.Ю. Маировой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Б. Мальбаховой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «КаббалкГидроСтрой», г. Нарткала  

к Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик 

о изменении государственного контракта и обязании продлить срок выполнения работ при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО1 - по доверенности от 04.08.2017, от ответчика: ФИО2 - по доверенности от 10.01.2017, 

руководствуясь статьями 110, 137, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Изменить государственный контракт № 83/12/2016-КР от 26.12.2016, заключенный  между Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и  обществом с ограниченной ответственностью "КаббалкГидроСтрой" в части условия  о сроке выполнения работ.  

3. Продлить срок выполнения работ по государственному контракту № 83/12/2016-КР от  26.12.2016, заключенному между Министерством здравоохранения Кабардино- Балкарской Республики и обществом с ограниченной ответственностью  "КаббалкГидроСтрой" до 31.12.2017 включительно.  

4. Взыскать с Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в  пользу общества с ограниченной ответственностью «КаббалкГидроСтрой», г.  Нарткала 6 000 рублей расходов по уплате госпошлины.  

5. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.   

Судья А.Ю. Маирова