Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-12151/2019

15 июня 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью к "Транзитстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки результата работы,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Транзитстрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу  

устранить недостатки выполненных работ по договору № Д-12/16-К-Н от 12.01.2016,  

выявленные в ходе эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по  

адресу: 

<

...>, а именно: 

- Устройство (монтажа) вертикальных сливных водосточных труб крыши (объем 13 м);  - Устройство (монтажа) отвода водосточного слива (сливное колено) для обеспечения  

отвода воды с крыши (6 шт.); - Демонтаж желобов: подвесных (без сохранения материала) (объем 100 м.); - Устройство желобов: подвесных (объем 100 м.); 

- Устройство примыкания кровельного покрытия к вертикальным поверхностям (объем  

– 30 м.); - Ограждение кровли перилами (объем 30 м.); 

- Замена заполнения слуховых окон, размером 900x1200 (3 шт.);  

- Заделка сквозных отверстий по металлочерепице, гидроизоляционной самоклеющейся  (липкой) лентой, размером 50x50мм. (40 шт.);  

- Установка дополнительных креплений к подвесным желобам с соблюдением  (восстановлением) уклонов (50 шт.).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Транзитстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу "Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Судья Г.Л. Николаева