АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 19 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А11-10008/2022

29 марта 2023 года

г. Владимир

  Резолютивная часть решения объявлена 22.03.2023.  

Решение в полном объеме изготовлено 29.03.2023. Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Гиндулиной В.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества  "Газпром газораспределение Владимир" (600017, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю  ФИО2 (ОГРНИП 313333205200027, ИНН 

<

***>)  о взыскании 174 016 руб. 98 коп.,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора: гражданка ФИО3 (Владимирская область, г. Ковров),  

в судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО4 –  представитель по доверенности от 31.12.2020 № 293 сроком по 31.12.2023, диплом о  высшем юридическом образовании, паспорт; от ответчика: ФИО5 – представитель по доверенности от 03.03.2022 серии 33 АА   № 1918718 сроком на десять лет, диплом о высшем юридическом образовании,  паспорт, установил следующее.  

Акционерное общество "Газпром газораспределение Владимир" (далее –  АО "Газпром газораспределение Владимир", истец) обратилось в Арбитражный суд  Владимирской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, ответчик) о взыскании 174 016 руб.  98 коп. задолженности по договору от 29.04.2016 № 2016-07-ОГ55-0456 о  подключении (технологическом присоединении).  

Определением арбитражного суда от 09.09.2022 исковое заявление, переданное  по подсудности на основании определения Октябрьского районного суда  г. Владимира от 04.08.2022 по делу № 2-2425/2022, принято к производству, дело  назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.  

Определением от 02.11.2022 дело назначено к рассмотрению по общим  правилам искового производства.  

Ответчик в отзыве от 19.10.2022 указал, что полностью оплатил все оказанные  по договору от 29.04.2016 № 2016-07-ОГ55-0456 о подключении (технологическом  присоединении) услуги. Сообщил, что в связи со сложной финансовой ситуацией не  смог своевременно достроить объект, к которому был подведен газ, в связи с чем,  осуществить непосредственно подключение невозможно. Полагал, что оплачивать  услуги по подключению недостроенного объекта к сети газоснабжения, у него нет  обязанности, поскольку эти услуги фактически не оказаны. Просил в удовлетворении  иска отказать.  

Истец в возражениях от 16.01.2023 № 02-01-01/107 указал, что договор от  29.04.2016 № 2016-07-ОГ55-0456 является смешанным договором, содержащим  элементы договора подряда и договора оказания услуг. Проинформировал о том, что  исполнение договора осуществляется путем подписания акта о подключении  (технологическом присоединении), а не передачей результата работы заказчику.  Отношения сторон регулируются Правилами подключения (технологического  присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,  утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013   № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)  объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об  изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства  Российской Федерации" (далее – Правила подключения (технологического  присоединения)). Таким образом, результатом выполнения работ (оказания услуг) по  договору о подключении является подключение объекта капитального строительства  заявителя к сетям газораспределения исполнителя. Сообщил, что ни ответчик, ни его  представитель не обращались к истцу с информацией о том, что у него нет  возможности выполнить все свои обязательства по договору о подключении в полном  объеме. Кроме того, подчеркнул, что истец просит взыскать плату за подключение,  

предусмотренную договором о подключении от 29.04.2016 № 2016-07-ОГ55-0456, а  не расходы, понесенные истцом при выполнении своих обязательств по договору о  подключении. При этом указал, что ответчик не выполнил обязательства в полном  объеме, которые предусмотрены указанным договором.  

В судебном заседании представители сторон поддержали изложенные  требования и возражения.  

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, арбитражный суд  установил следующее.  

29.04.2016 между ФИО2 (заявитель) и АО "Газпром газораспределение  Владимир" (исполнитель) заключен договор о подключении (технологическом  присоединении) № 2016-07-0ОГ55-0456, согласно которому исполнитель обязуется  выполнить работы по подключению (технологическому присоединению) объекта  капитального строительства: объект информационно-компьютерный центр с  объектами торговли и общественного питания, магазинами, кафе и кинозалами,  (далее – объект), расположенный на земельном участке с кадастровым номером:  33:20:013001:189, местонахождение: Владимирская область, МО город Ковров  (городской округ), пр-кт Ленина, дом 8, к сети газораспределения с учетом  максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях  (с учетом дополнения) от 30.03.2016 № 136/193/з, являющихся неотъемлемой частью  договора, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому  присоединению) (пункт 1.1 договора).  

Права и обязанности сторон содержатся в разделе 2 договора. 

Исполнитель обязан осуществить следующий комплекс мероприятий по  подключению:  

2.2.1. Разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети  газораспределения до точки подключения (технологического присоединения) на  границе земельного участка заявителя;  

2.2.2. Осуществить действия по созданию (реконструкции) сети  газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети  газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее установленного  договором дня подключения;  

2.2.3. После получения положительного заключения экспертизы проекта  газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю  информацию о расположении точки подключения (технологического  присоединения);  

2.2.4. Проверить готовность объекта заявителя к приему газа (выполнение  условий подключения). Осуществление указанных действий завершается  составлением и подписанием сторонами "Акта о готовности сетей газопотребления и  газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к  подключению (технологическому присоединению)" по форме Приложения № 2 к  настоящему договору;  

2.2.5. Осуществить действия по подключению (технологическому  присоединению) не позднее установленного договором дня подключения  (технологического присоединения), но не ранее подписания Акта о готовности,  указанного в подпункте 2.2.4 настоящего договора;  

2.2.6. По запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса  направлять заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по  подключению (технологическому присоединению).  

3аявитель обязуется осуществить следующий комплекс мероприятий: 

 2.4.1. Выполнить до дня подключения (технологического присоединения)  установленные в договоре условия подготовки сети газопотребления и  газоиспользующего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и  строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления от точек  подключения на земельных участках заявителя;  

2.4.2. Представить до дня подключения (технологического присоединения)  исполнителю экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной  документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о  сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание  технологических решений (представляется в случае, если разработки проектной  документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);   

2.4.3. В случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих  изменение максимального часового расхода газа, в трехдневный срок с момента  

внесения соответствующих изменений направить исполнителю предложение о  внесении соответствующих изменений в настоящий договор;  

Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может  превышать величины, указанной в Технических условиях.  

2.4.4. В согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня  подключения обеспечить исполнителю доступ к объекту заявителя для проверки  выполнения заявителем технических условий, а также для выполнения исполнителем  мероприятий по подключению (технологическому присоединению);  

 2.4.5. Внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки  установленные договором;  

В пункте 4.1 договора (с учетом дополнительного соглашения от 28.04.2018   № 5) предусмотрено, что стороны договорились осуществить мероприятия по  подключению (технологическому присоединению) в соответствии с настоящим  договором в срок до 30.09.2020.  

Согласно пункту 3.1 договора (с учетом дополнительного соглашения от  28.12.2018 № 2) размер платы за подключение (технологическое присоединение)  объекта определяется в соответствии Методическими указаниями по расчету платы за  технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям  газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее  величину, утвержденных приказом ФСТ России от 24.04.2014 № 101-э/3,  Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области  от 18.06.2014 № 23/1 (в ред. от 16.06.2017 г.) и составляет 1 164 769 руб. 56 коп., в том  числе НДС.  

Стоимость работ по разработке проекта газоснабжения и проведения его  экспертизы составляет 90 269 руб. 76 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии  с действующим законодательством РФ о налогах и сборах.  

С учетом ранее произведенного платежа в размере 233 650 руб., в том числе  НДС – 18%, заявитель обязуется оплатить сумму в размере 966 761 руб. 09 коп.,  кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о  налогах и сборах.  

Внесение платы осуществляется в следующем порядке:  

- сумму в размере 241 690 руб. 27 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в  течение 11 (одиннадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего  дополнительного соглашения;  

- 25 процентов платы, что составляет 241 690 руб. 27 коп., кроме того НДС по  ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в  течение 90 дней со дня заключения настоящего дополнительного соглашения, но не  позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта  капитального строительства к сети газораспределения;  

- 35 процентов платы, что составляет 338 366 руб. 38 коп., кроме того НДС по  ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о  налогах и сборах, в течение 365 дней со дня заключения настоящего дополнительного  соглашения, но не позднее дня фактического подключения (технологического  присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения;  

- 15 процентов платы, что составляет 145 014 руб. 15 коп., кроме того НДС по  ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в  течение 11 (одиннадцати) рабочих дней со дня подписания акта о подключении.  

Согласно уведомлению от 03.06.2021 № 21-04/2446 о готовности сети  газораспределения и окончании срока действия договора о подключении  (технологическом присоединении) от 29.04.2016 № 2016-07-ОГ55-0456,  направленному ФИО2 03.06.2021, АО "Газпром газораспределение Владимир"  уведомило, что срок действия договора закончился 30.09.2020. По состоянию на  07.04.2021 исполнитель выполнил обязательства по созданию сети газораспределения  в полном объеме.  

В уведомлении от 12.07.2021 № 21-04/2996, направленном в адрес ФИО2  12.07.2021, АО "Газпром газораспределение Владимир" сообщило ФИО2 о  расторжении договора от 29.04.2016 о подключении (технологическом  присоединении) № 2016-07-0ОГ55-0456 в одностороннем порядке на основании  пункта 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),  статьи 95 Правил подключения (технологического присоединении) в связи с  существенным нарушением условий договора, выразившемся в нарушении  заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому  

присоединению) на 6 и более месяцев. АО "Газпром газораспределение Владимир"  потребовало от ФИО2 оплатить сумму в размере 174 016 руб. 98 коп., что  составляет разницу между ценой договора и оплаченными ФИО2 по  договору денежными средствами. (1 397 723 руб. 47 коп. – 1 223 706 руб. 49 коп.)  

В претензии от 25.06.2021 № 21-04/2741 АО "Газпром газораспределение  Владимир" предложило ФИО2 оплатить задолженность в размере 174 016 руб.  98 коп.  

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило  основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.  

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в  материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с  обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ  от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом,  другими законами или иными правовыми актами.  

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию  заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить  определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (пункт 1  статьи 779 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить  оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного  оказания услуг.  

В силу пункта 98 Правил подключения (технологического присоединении)  (действовавших в спорный период) исполнитель обязан, в том числе: осуществить  действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек  подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке  сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства  

заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня  подключения (подпункт "а").  

В соответствии с пунктом 95 Правил подключения (технологического  присоединении) (действовавших в спорный период), в случае нарушения заявителем  срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому  присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно  подпункту "а" пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя  исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по  истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления  мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес  заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за  технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня  получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная  обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о  подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий,  предусмотренных договором о подключении.  

Как следует из материалов дела, истцом было направлено ответчику  уведомление от 03.06.2021 № 21-04/2446, в котором было сообщено о готовности  сети газораспределения и предложено в случае выполнения заказчиком мероприятий  по обеспечению готовности объекта к подключению (технологическому  присоединению) обеспечить доступ исполнителя на объект для проверки выполнения  технических условий.  

Однако указанное обращение было оставлено ответчиком без ответа. 

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что до настоящего  времени объект не достроен и в эксплуатацию не введен.  

Документально-обоснованных возражений, а равно доказательств,  исключающих требования истца, ответчик суду не представил.  

Поскольку законодатель предусмотрел право исполнителя требовать от  заявителя исполнения обязательства по внесению 100 % платы по договору о  подключении, а невозможность окончания подключения объекта к газовым сетям  вызвана бездействием ответчика, возражения ответчика отклоняются как  необоснованные.  

Учитывая изложенное, требование истца о взыскании задолженности по  договору от 29.04.2016 о подключении (технологическом присоединении)   № 2016-07-0ОГ55-0456 в сумме 174 016 руб. 98 коп. является обоснованным и  подлежит удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы в виде  уплаченной по делу государственной пошлины относятся на ответчика в полном  объеме.  

Руководствуясь статьями 4, 17, 28, 65, 110, 167 - 171, 176, 181, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 313333205200027, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества  "Газпром газораспределение Владимир" (г. Владимир) 174 016 руб. 98 коп.  задолженности, 4 680 руб. 33 коп. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. На  основании статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  (г. Владимир) через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с  момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород) в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья В.Ю. Гиндулина