АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-15675/2023

г. Оренбург

21 января 2025 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Щербаковой С. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кубяковой Д. В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Стимул" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Оренбург  

к некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно - коммунального хозяйства Оренбургской области" ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, г. Оренбург  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не завляющих самостятельных требований относительно предмета спора: 1) Общества с ограниченной ответственностью "ПК УралПроект", 2) Общества с ограниченной ответственностью "Алмаз", 3) Общества с ограниченной ответственностью "СК "Авангард-плюс", 4) Общества с ограниченной ответственностью "БСБ"; 5) индивидуального предпринимателя ФИО1, Оренбургская область  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 479 119 руб. 04 коп.  

Руководствуясь статьями 101, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать некоммерческую организацию "Фонд модернизации жилищно - коммунального хозяйства Оренбургской области" в течении тридцати календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу устранить следующие недостатки кровли в многоквартирном жилом доме № 38 по проспекту Дзержинского города Оренбурга:  

подъезд № 1: 

- некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 21 м.п.;  

подъезд № 2: - разрушение штукатурно - окрасочного слоя 3 кв.м.; 

- некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 20 м.п.;  

подъезд № 3: 

- разрушение штукатурно - окрасочного слоя 5,5 кв.м.; - некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 20,06  

м.п.; 

подъезд № 4: 

- разрушение штукатурно - окрасочного слоя 4,5 кв.м.; - некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 22,06  

м.п.; 

подъезд № 5: 

- разрушение кирпичной кладки в местах прохождения фановых труб 1 кв.м.;  

подъезд № 6:  

- разрушение штукатурно - окрасочного слоя 6 кв.м., в том числе в  

местах прохождения фановых труб; 

- разрушение кирпичной кладки в местах прохождения фановых  

труб 4 кв.м.; 

- некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 18,8  

м.п.; 

подъезд № 7: 

- некачественный монтаж фартуков свесов с капельниками 25 м.п.;  

подъезд № 8: 

- разрушение штукатурно - окрасочного слоя 4,01 кв.м.  

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно - коммунального хозяйства Оренбургской области" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Стимул" 479 119 руб. 04 коп. - убытков, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно - коммунального хозяйства Оренбургской области" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  

12 582 руб. 00 коп. 

Исполнительные листы выдать истцу и налоговому органу в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), жалоба может быть подана через Арбитражный суд Оренбургской области.  

В соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение направляется путем его размещения в виде электронного документа на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

 Судья С. В. Щербакова