Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677980, 

www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2116/2018

10 августа 2018 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 06.08.2018 Мотивированное решение изготовлено 10.08.2018 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Федоровой М. И.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению Публичного акционерного общества  "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Северная строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о расторжении договора,  

с участием представителя истца по доверенности ФИО2, представителя  ответчика по доверенности ФИО3,  

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" обратилось в Арбитражный суд  Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью  "Северная строительная компания" о взыскании 234 348,71 руб., расторжении договора   № 1134 от 02.07.2015 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям.  

Представитель истца поддерживает заявленные требования в полном объеме. 

Представитель ответчика поддерживает доводы, изложенные в отзыве на исковое  заявление.  

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, судом  установлены следующие обстоятельства.  

02.07.2015 между ОАО АК «Якутскэнерго» (исполнитель) и ООО «Северная  строительная компания» (заказчик) заключен договор № 1134 об осуществлении  

технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого  исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технологического  присоединения энергопринимающих устройств заказчика: многоквартирный жилой дом с  офисными помещениями (2 очередь), г. Якутск, 69 квартал, в т.ч. по обеспечению  готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,  строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств,  Заказчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с  условиями настоящего договора.  

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта:  «Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями (2 очередь), 

<

...>» (пункт 2 договора).  

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границ участка  заказчика, на котором располагаются присоединяемые объекты заказчика (пункт 3  договора).  

В соответствии с пунктом 4 договора технические условия для присоединения к  электрическим сетям приведенные в приложении № 1 и технические условия на узел учета  электрической энергии в приложении № 2 являются неотъемлемой частью настоящего  договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения  настоящего договора.  

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому  присоединению истекает в 3 квартале 2016 года.  

В силу пункта 10 договора размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с утвержденной постановлениями Правления ГКЦ - РЭК  

РС (Я) от 16.12.2014 № 330, от 20.12.2013 № 320 и составляет 7 068 659,58 руб., в том числе  НДС 18% - 1 078 270,11 руб.  

В соответствии с пунктом 14 договора настоящий договор может быть изменен по  письменному соглашению сторон или в судебном порядке.  

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 15 договора).  

Письмом от 31.07.2017 № 109 ООО «Жилстройсервис» предложило расторгнуть  спорный договор в связи с неисполнением Окружной администрацией города Якутска  договорных обязательств по предоставлению строительной площадки.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 22.01.2018 № 215/823 о  подписании в течении 30 дней с момента получения претензии подписать соглашение о  расторжении договора, возместить затраты в размере 234 348,71 руб. (л.д.64-65).  

Ответчик претензию истца получил 25.01.2018, что следует из уведомления о  вручении почтового отправления, идентификатор 67700019491 (л.д.68).  

Ответчик на претензию истца не ответил, соглашение о расторжении договора не  подписал, расходы истца не возместил, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд  с настоящим иском.  

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства по  правилам ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  выслушав доводы истца, суд приходит к выводу об удовлетворении иска по следующим  основаниям.  

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных  законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц,  которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и  смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Отношения, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих  устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, регулируются  Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее – Закон  об электроэнергетике), Правилами технологического присоединения энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической  энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), а также  положениями главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со ст.26 Закона об электроэнергетике технологическое  присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических  и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом  Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.  

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической  сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими  Правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие  ему энергопринимающие устройства к электрической сети сетевой организации, а абонент  обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его  технические условия.  

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения  выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой  систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа  государственной власти.  

Мероприятия по технологическому присоединению являются существенным  условием договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе  подготовку сетевой организацией технических условий; фактические действия по  присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической  сети.  

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям подлежит  государственному регулированию (ч.2 ст.23 Закона об электроэнергетике).  

В силу пункта 15 Правил № 861 договор технологического присоединения  считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра  договора в сетевую организацию.  

Спорный договор подпадает под действие специальных норм закрепляющих  правила подключения к системам энергоснабжения. Данный договор в то же время  содержит элементы договоров подряда и возмездного оказания услуг, являясь смешанным  договором.  

Согласно п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги  (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а  заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

В соответствии с п.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Публичный характер договора не означает, что он не может быть расторгнут  лицом, для которого его заключение является обязательным по причине существенного  нарушения договора другой стороной. Обязательность публичного договора для такого  лица относится именно к его заключению.  

Правила технологического присоединения N 861, выделяя право заявителя в  одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков  технологического присоединения, указанных в договоре, как возможность защиты более  слабой стороны в процедуре согласования условий договора, так же как и положения  

Закона об электроэнергетике не содержат запрета на расторжение договора  технологического присоединения по инициативе исполнителя.  

Согласно п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и  расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено  настоящим Кодексом, другими законами или договором.  

Пунктом 2 указанной статьи установлено, что по требованию одной из сторон  договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при  существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.  Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для  другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была  вправе рассчитывать при заключении договора.  

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным  условиям договора технологического присоединения.  

В силу п.2 ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае  одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если  такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.  

В соответствии со ст.452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение  об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,  если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование  об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только  после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть  договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный  законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.  

В силу п.2 ст.453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении  договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом,  договором или не вытекает из существа обязательства.  

В пункте 15 договора от 02.07.2015 № 1134 установлено, что договор может быть  расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным  Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Истец направлял в адрес ответчика проект соглашения о расторжении договора,  подписанное соглашение в адрес истца не поступило.  

В соответствии со ст.452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение  об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,  

если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает  иное.  

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено  стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить  или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или  установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.  

Ответчик на претензию не ответил, соглашение о расторжении договора не  подписал, в нарушение условий договора от 02.07.2015 № 1134 оплата не произведена.  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что допущенные ответчиком  нарушения договорных обязательств, заключающиеся в неисполнении мероприятий по  технологическому присоединению в установленный договором срок, являются  существенными.  

Ответчик не представил доказательств осуществления мероприятий по  технологическому присоединению и создания условий возможности фактического  подключения объекта сетевой организацией, чем существенно нарушил условия договора  по сроку их выполнения.  

С учетом вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что  требование истца о расторжении договора является обоснованным и подлежащим  удовлетворению.  

С учетом результатов рассмотрения дела, на основании ч.1 ст.110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате  государственной пошлины в сумме 6 000 руб. подлежат возмещению ответчиком.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор № 1134 от 02.07.2015 «Об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям», заключенный между Публичным акционерным  обществом "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и обществом с  ограниченной ответственностью "Северная строительная компания" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северная строительная  компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Публичного акционерного  общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru  

Судья М. И. Федорова