АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-18607/2019

15 мая 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая 2019 года

Полный текст решения изготовлен 15 мая 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Е.А. Мезриной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к  Муниципальному казенному учреждению "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании от 2 577 075 руб. 21 коп.

при участии в судебном заседании 

от истца: ФИО2   директор, на основании протокола  

от ответчика: представитель не явился.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Муниципальному казенному учреждению "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ"  о взыскании задолженности по договорам подряда в размере 2522097,70руб., а также пени за пользование чужими денежными средствами в размере 54977,51руб.

Определением от 09.04.2019 арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

07.05.2019 г. от ответчика поступил отзыв. Возражения относительно основного долга не заявлено. Представил контррасчет пени.

 В предварительном судебном заседании 13.05.2019 -истец заявил ходатайство об отказе  от иска в части взыскания пени.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено на основании ст. 49 АПК РФ.

Производство по делу в указанной части подлежит прекращению на основании ст. 150 АПК РФ.

Ответчик явку представителя не обеспечил (ст. 136 АПК РФ).

В предварительном судебном заседании 13.05.2019 г. выяснилось, что в деле имеются все необходимые для рассмотрения спора документы, стороны  уведомлены надлежащим образом, не представили возражений против завершения предварительного судебного заседания, в связи с чем, суд счел целесообразным завершить предварительное судебное заседание и перейти к рассмотрению дела по существу в судебном заседании (ст. 136, 137 АПК РФ).

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между Муниципальным автономным учреждением «Центр обслуживания зданий и помещений»  (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» (исполнитель) заключили договоры подряда: 

-Договор подряда № 99/ 85 от 20.07.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту АПС и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 30.08.2018 г.

-конечный срок -30.09.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 98720,00руб. 

- Договор подряда № 172/ 90 от 17.08.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт системы пожарной безопасности в здании МБУ ДО ДЮЦ «Мир» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 20.08.2018 г.

-конечный срок -30.09.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 30000,00руб.

- Договор подряда № 100/ 94 от 20.07.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту АПС и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 30.08.2018 г.

-конечный срок -30.09.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 99769,00руб.

- Договор подряда № 230/ 100 от 05.09.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации в помещении подвала д/с № 190 МБДОУ «Детство», расположенного по адресу: 

<

...> и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 05.09.2018 г.

-конечный срок -20.10.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 60730,00руб.

- Договор подряда № 220/ 102 от 26.09.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в помещениях 1,2,2.1, здания МБУ ДО ДЮЦ «Мир» расположенного по адресу: 

<

...> и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.09.2018 г.

-конечный срок -31.12.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 99985,70руб.

- Договор подряда № 219/ 105 от 05.09.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проектированию пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в МБУ СОШ № 48 и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.09.2018 г.

-конечный срок -31.12.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 99855,00руб.

- Договор подряда № 191/ 106 от 24.09.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании МБДОУ «Детство» д/с №190, расположенном по адресу: 

<

...> и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 24.09.2018 г.

-конечный срок -07.11.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 80705,00руб.

- Договор подряда № 231/ 107 от 05.09.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту АПС в здании МБОУ СОШ №48, расположенного по адресу: 

<

...> и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ, указанных в п.1.1 Договора, определяются ведомостью объема работ и сметной документацией (приложением № 1, 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 05.09.2018 г.

-конечный срок -20.1.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 99989,00руб.

- Муниципальный контракт  № 293/ 117 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации в здании МБДОУ д/с «Звездочка» № 94, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ определяются утвержденными Заказчиком ведомостью объемов работ (приложением № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью контракта. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.09.2018 г.

-конечный срок -31.12.2018 г. /п.1.3. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 99228,00руб.

- Муниципальный контракт  № 242/ 118 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик принимает на себя обязательство выполнить проектные работы по монтажу пожарной сигнализации на объекте Заказчика: здание МБДОУ д/с «Звездочка» № 50, расположенном по адресу 

<

...>. 42,  в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1) и сметной документации (приложение №2) являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.09.2018 г.

-конечный срок -31.12.2018 г. /п.1.2. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 51258,00руб

- Муниципальный контракт  № 243/ 119 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик принимает на себя обязательство выполнить проектные работы по монтажу пожарной сигнализации на объекте Заказчика: здание МБДОУ «Звездочка» д/с№ 20, расположенном по адресу 

<

...>,  в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1) и сметной документации (приложение №2) являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.11.2018 г.

-конечный срок -14.12.2018 г. /п.1.2. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 51258,00руб

- Муниципальный контракт  № 244/ 120 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик принимает на себя обязательство выполнить проектные работы по монтажу пожарной сигнализации на объекте Заказчика: здание МБДОУ  «Звездочка» д/с № 94, расположенном по адресу 

<

...>,  в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1) и сметной документации (приложение №2) являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 27.11.2018 г.

-конечный срок -14.12.2018 г. /п.1.2. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 51258,00руб

- Муниципальный контракт  № 294/ 123 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации в здании МБДОУ д/с «Звездочка» №20, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ определяются утвержденными Заказчиком ведомостью объемов работ (приложением № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью контракта. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 30.11.2018 г.

-конечный срок -19.12.2018 г. /п.1.3. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 99987,00руб

- Договор подряда № 150/ 121 от 14.08.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу, пусконаладочные работ автоматической системы пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 55 по адресу: 

<

...> и сдать  результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять результат выполненных работ и оплатить его. 

В соответствии с п.1.2. подрядчик принимает на себя выполнение работ, предусмотренных в пункте 1.1. Договора в соответствии с технической документацией: ведомостью объемов работ (Приложение 1), рабочим проектом 024.1117-ПС (приложение № 3), локальным сметным расчетом (Приложение № 2) требованиями СНиП, ГОСТ и условиями настоящего договора. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 14.08.2018 г.

-конечный срок -14.09.2018 г. /п.2.1. договора/

Согласно п. 3.1.  Цена работы определяется на основании сметного расчета, являющего неотъемлемой частью договора и составляет 1399793,00руб.

- Муниципальный контракт  № 292/ 122 от 26.11.2018, согласно п.1.1. подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пожарной сигнализации в здании МБДОУ д/с «Звездочка» №50, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

В соответствии с п.1.2. содержание и объем работ определяются утвержденными Заказчиком ведомостью объемов работ (приложением № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью контракта. 

Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную договором, в следующие сроки:

-начальный срок- 30.11.2018 г.

-конечный срок -19.12.2018 г. /п.1.3. контракта/

Согласно п. 2.1.  Цена Контракта определяется в соответствии с  локальным сметным расчетом и составляет 99872,00руб

Вышеуказанные договоры по своей правовой природе являются договорами на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По смыслу ст. 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в части, не урегулированной им - закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Следовательно, правоотношения сторон регламентированы § 1, § 3 и § 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров".

Как указывает истец, в рамках указанных договоров работы выполнены на общую сумму 2522097,70руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными обеими сторонами без возражений. 

Также в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов за период 2018 г. на сумму 2522097,70руб., подписанный обеими сторонами. 

Наличие задолженности ответчик в размере 2522097,70руб. в своем отзыве возражений не представил.

На основании ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Таким образом, на ответчике лежит обязанность по оплате выполненных и принятых работ (ст. 702, ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Поскольку материалами дела подтверждается наличие задолженности ответчика перед истцом по оплате работ в размере  2522097,70руб., на основании ст.ст. 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации задолженность в указанной сумме подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика на основании ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110,167-170,171,176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с  Муниципального казенного учреждения "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2522097,70руб. долга, а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 35610 рублей 00 копеек.

В остальной части производство по делу прекратить.

2.Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в сумме 275 рублей 00 копеек, оплаченную по платежному поручению № 77 от 27.03.2019 г. Подлинное платежное поручение остается в материалах дела. 

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяЕ.А. Мезрина