АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                          Дело № А65-28953/2021

Дата принятия решения –  22 апреля 2022 года.

Дата объявления резолютивной части –  21 апреля 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Воробьева Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по общества с ограниченной ответственностью «КамаКомплексСтрой», г. Нижнекамск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтяное и газовое оборудование», г.Самара (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 3 870 769,21 рублей, неустойки в размере 387 076,92 рублей,

в судебном заседании участвуют представители:

от истца – ФИО2 по доверенности,

от ответчика – ФИО3 по доверенности,

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «КамаКомплексСтрой» (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтяное и газовое оборудование» (ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда №39-33/03-2020-1С от 15 июня 2020 года в размере 3 870 769,21 рублей, неустойки в размере 5 600 рублей.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в части неустойки уточнил, просил взыскать неустойку в размере 387 086,92 руб., дал пояснения.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ уточненные исковые требования судом были приняты.

Ответчик в судебном заседании иск не признал, прокомментировал отзыв, просил в удовлетворении иска отказать.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «КамаКомплексСтрой» и общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтяное и Газовое Оборудование» заключили договор субподряда №39-3 3/03-2020-1С от 15 июня 2020 года, согласно которому Истец обязуется по заданию Ответчика, выполнить работы по монтажу технологических трубопроводов, строительно-монтажные работы на Титуле 1007 (секция 1502) Установка Гидроочистки средних дистиллятов «Комплекса НП и НХЗ» в г. Нижнекамске. В соответствии с пунктом 4.1.3. договора окончательной Ценой Договора является стоимость фактически выполненные Истцом работ.

Ответчиком подписаны без замечаний и возражений справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2). Общая сумма выполненных работ составляет 6 346 116,70 рублей. 

Ответчик частично оплатил сумму задолженности в размере 2 913 587,44 рублей. 

Сумма задолженности по выполненным работам составила 3 870 769,21 рублей.

Однако денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы по договору субподряда на расчетный счет истца не поступили.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд, выслушав доводы сторон, исследовав представленные материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 3 статьи 706 ГК РФ генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Подписание сторонами Договора, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ свидетельствует о том, что данная работа была выполнена и Ответчик был на момент подписания Акта удовлетворен результатом работы. 

Факт исполнения истцом своих обязательств подтверждается представленными в материалы дела документами.

Подписанный двусторонний Акт приема выполненных работ (оказанных услуг) свидетельствует о выполнении ответчиком предусмотренных условиями договора работ и принятии заказчиком этих работ без замечаний и возражений.

Доказательств, подтверждающих обоснованность отказа от подписания данного Акта за выполненные работы, ответчик не представил, требований о некачественности работ не заявлял. 

Согласно пункту 15.1 договора за нарушение сроков оплаты выполненной работы генеральный подрядчик уплачивает субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащий к оплате.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или    ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Сумма неустойки за период с 01.05.2021 по 18.11.2021 года составила 781 895, 38 рублей. Поскольку сумма неустойки в связи с ограничением, указанным в договоре, не более 10% от суммы подлежащей оплате, истец просил взыскать 387 076, 92 рублей.

Сумма неустойки, подлежащая взысканию, соответствует нормам закона и условиями договора, и требование истца в данной части правомерно.

Доводы ответчика изложенные в отзыве суд считает несостоятельными.

Как указал ответчик, условиями договора субподряда №39-33/03-2020-1С от 15 июня 2020 предусмотрена возможность приостановления обязательства Подрядчика (Ответчика) в случае не предоставления Истцом следующих документов:

В соответствии с п.3.2.1. Субподрядчик в течении 10 рабочих дней после даты получения ПСД, ПОС разрабатывает и передает Подрядчику в бумажном и электронном виде «График Мобилизации трудовых ресурсов» (по форме Приложения №15.1. к договору).

В соответствии с п.3.3. Субподрядчик в течении 5 рабочих дней после даты получения указанных в п.3.2. документов разрабатывает и передает подрядчику в бумажном и электронном виде График выполнения строительно-монтажных работ (по форме Приложения № 15) в соответствии с методикой разработки и актуализации календари сетевых графиков на базе ПО «Primavera» (Приложение № 30), который с момента его согласования Сторонами является основанием для заключения с Субподрядчиком Дополнительного соглашения на определенный вид Работ.

В соответствии с п.4.3. на сумму полученного аванса, Субподрядчик не позднее 5-ти календарных дней с даты получения предварительной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) на сумму авансового платежа обязан выставить и предоставить Подрядчику счет-фактуру с учетом требований ст. 169 НК РФ. В графе 1 счет-фактуры «наименование товара (описание выполненных работ, оказания услуг), имущественного права», выставленного в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг), должно быть прописано наименование поставляемых товаров (описание   работ, услуг), указанных в предмете договора.

Субподрядчик, в течении 10 календарных дней с момента заключения Договора, обязан направить Подрядчику копии приказа, либо доверенностей, на право его сотрудников подписывать счет фактуру и первичные документы. В случает несвоевременного предоставления заверенных копий приказа, либо доверенностей подрядчик не несет ответственности за несвоевременного оплату выполненных работ.

В соответствии с п.4.4.1. Приемка-сдача выполненных работ по проектам ТМ и ТХ с подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС -2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 производится подрядчиком согласно письму ПАО «Татнефть» за №22487-ИсхОрг (333) от 13.11.2019 (Приложение № 39.1 к договору), а так же при условии предоставления субподрядчиком комплекта документов к акту выполненных работ формы КС-2 и справке формы КС-3, состоящего из следующих документов:

- Копии изометрических чертежей, с указанием номеров стыков и согласованные Подрядчиком, заказчиком и его привлеченными инженерами организациями;

- Копии заключений лаборатории по ВПК;

- Копии журналов и диаграммы по термообработке;

- Копии заключений неразрушающего контроля (ИД УЗК, РГК) в зависимости от требований проекта и распечатку из программного комплекса «НЕОСИНТЕЗ» (Завизированный руководителем сварочных работ) где должны заносится все стыки независимо от того, контролируется сваркой шов или нет;

- Накопительные ведомости объемов работ, согласованные Подрядчиком, заказчиком и его привлеченными Инженерными организациями (по форме Приложения № 5.1.);

- Акт списания материалов Подрядчика (Приложение № 25 к договору);

- Приложение к отчету об использовании материалов Подрядчика (Приложение № 27 к договору);

- Ведомости Ремонтированного оборудования по форме Приложения № 16 к настоящему договору;

- Отчет по оборудованию Подрядчика к установке (Приложение № 29 к Договору)».

Акты Формы КС-2 и отправки формы КС-3 по проектам ТМ и ТХ, без предоставления вышеуказанных документов, к рассмотрению не принимаются и оплате не подлежат.

В соответствии с п.4.4.2. Приемка-сдача выполненных Субподрядчиком работ по всем проектам (кроме ТМ и ТХ) с подписанием актов о приемке выполненных, работ по форме КС-2, расчетов удорожания материалов и справки о стоимости работ по форме КС-3 производится подрядчиком согласно письму ПАО «Татнефть» за № 22487-ИсхОрг (333) от 13.11.2019 (Приложение №39.1 к договору), а так же при условии предоставления Субподрядчиком комплекта документов в акту выполненных работ формы КС-2, расчетов удорожания материалов и справке формы КС-3, состоящего из следующих документов:

- Накопительные ведомости объемов работ, согласованные Подрядчиком, Заказчиком и его привлеченными Инженерами организациями (по форме Приложения № 5.1.);

- Акт списания материалов Подрядчика (Приложение № 25 к договору);

- Приложение к отчету об использовании материалов Подрядчика (Приложение № 27 к Договору);

- Ведомости Смонтированного оборудования по форме Приложения № 16 к настоящему договору;

- Отчет по оборудованию подрядчика к установке (Приложение № 29 к договору).

Акты формы КС-2, расчетов удорожания материалов и справки формы КС-3, без предоставления вышеуказанных документов, к рассмотрению не принимаются и оплате не подлежат.

В соответствии с п.4.11. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Подрядчиком после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов/недостатков, недоделок, не позднее 45 календарных дней после подписания сторонами «акта окончательной приемки выполненных работ по договору подряда». 

В соответствии с п.4.15. на всех первичных документах на понесенные затраты стороны указывать наименование объекта. Первичные учетные документы должны содержать все обязательные реквизиты предусмотренные ст.9 ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ. В случае отсутствия в первичных учетных документах всех обязательных реквизитов, Подрядчик вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

В соответствии с п.4.19. Субподрядчик для осуществления взаимных расчетов по договору обязуется открыть расчетный счет в ПАО «АК БАРС» банк в течении 3-х рабочих дней с момента открытия счета обязуется письменно уведомить об этом подрядчика.

В соответствии с п.10.5. Договоры страхования подлежат заключению Субподрядчиком не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после получения оплаты за выполненный и принятый Подрядчиком в первый месяц объем Работ. В случае же продления срока завершения Работ, указанного в п.3.1. Договора, действие таких договоров страхования должно быть пролонгировано на такой срок продления.

В течении 10 дней с момента заключения договора страхования Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику их заверенные копии, подтверждающие заключение договоров страхования на оговоренных Сторонами условиях, и оригиналы страховых полисов.

В случае непредставления Субподрядчиком страховых полисов в данный срок, подрядчик оставляет за собой право приостановить исполнение обязательств по договору, в том числе авансирование и оплату выполненных

Субподрядчиком работ, тогда как Субподрядчик обязан продолжить Работы на свой страх и риск.

Вместе с тем, как пояснил истец в судебном заседании, вышеуказанные документы Истец Ответчику предоставил, так как согласно условиям договора субподряда № 39-33/03-2020-1С от 15 июня 2020 года без предоставления вышеуказанных документов не рассматриваются и не подписываются справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. 

Ответчиком подписаны без замечаний и возражений справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2). Общая сумма выполненных работ составляет 6 346 116,70 рублей. Ответчик частично оплатил сумму задолженности в размере 2 913 587,44 рублей. 

Согласно п.6.34. договора Субподрядчик регулярно, в течение периода строительства объекта, сдает в архив Заказчика исполнительно-техническую документацию (ИТД) в объёме завершенного Этапа работ, предусмотренного Проектной документацией. Срок сдачи ИТД в архив Заказчика составляет 30 (Тридцать) календарных дней после завершения определенного Этапа работ строительства. Датой окончания определенного Этапа Работ считается дата:

- подписание Сторонами акта скрытых работ либо;

- подписания Сторонами акта сдачи ответственных конструкций либо;

- подписание Сторонами «Акта о завершении этапа работ по договору подряда», по форме - предусмотренной в Приложении № 46 к Договору, подтверждающего качество Работ, а также дату завершения этапа Работ и разрешающего выполнение последующих работ согласно технологии выполнения СМР.

Сдача в архив Заказчика исполнительно-технической документации (ИТД) в объёме завершенного Этапа работ подтверждается сводным реестром исполнительной документации предъявленной в УРПС ПАО «Татнефть» №1, сводным реестром исполнительной технической документации по объекту, реестром исполнительной документации предъявленной в УРПС ПАО «Татнефть» № 2, сводным реестром исполнительной технической документации по объекту.

В соответствии с частью 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 

ООО «ПО «Нефтяное и газовое оборудование» не оспаривало факт подписания документов о приемке выполненных работ, не заявлял претензий по качеству выполнения работ.

Непредставление перечисленных ответчиком документов не может свидетельствовать о невыполнении работ ООО «КамаКомплексСтрой», поскольку ответчиком не доказана невозможность эксплуатации результата работ без данных документов. 

Отсутствие документов не свидетельствует о невыполнении работ и не освобождает ответчика от обязанности оплатить выполненные работы, при наличии доказательств подписания актов.

При таких обстоятельствах суд полагает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтяное и газовое оборудование», г.Самара (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КамаКомплексСтрой», г. Нижнекамск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 3 870 769,21 руб., неустойку в размере 387 076,92 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Нефтяное и газовое оборудование», г.Самара (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 44 289 руб.

Исполнительные листы выдать по заявлению.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья                                                                                                                  Р.М. Воробьев