АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600005, 

<

...>

тел. 

<

***>, факс 

<

***>

 е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А11-6100/2024

г. Владимир

02 июля 2025 года

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полный текст мотивированного решения изготовлен 02.07.2025.

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Тихонравовой О.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочетковой Е.С. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: ул. К.Маркса, д. 3, г. Кольчугино, Владимирская область, 601785) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: ул. Малая Грузинская, д. 3-9, помещ. IV, ком. 7, муниципальный округ Пресненский, 

<

...>) 

о взыскании 1 411 800 руб.,

в судебном заседании приняли участие: от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 30.05.2023 33 АА 2565960, сроком действия по 24.05.2026, копия диплома о высшем юридическом образовании;

от ответчика – представители не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

установил:

акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» (далее – АО «ЭКЗ», истец) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» (далее – ООО «ПРОМСТРОЙ», ответчик) о взыскании 1 079 905 руб. 92 коп. неотработанного аванса по договору строительного подряда от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203, 60 000 руб. штрафа, 160 094 руб. 08 коп. неустойки, 111 800 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2023 по 20.05.2024, а также начиная с 21.05.2024 в размере 0,05% от неоплаченной суммы задолженности за каждый день пользования по день фактической оплаты долга, 27 100 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Иск предъявлен в Арбитражный суд Владимирской области по правилам договорной подсудности, согласованной сторонами в пункте 9 соглашения об урегулировании задолженности по договорам строительного подряда от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082, от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097, от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 от 01.12.2023(статья 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в порядке, предусмотренном статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, письменный отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Спор рассматривается в отсутствие представителей ответчика на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании были объявлены перерывы до 17.03.2025, до 02.04.2025, до 18.04.2025.

Исследовав материалы арбитражного дела, суд установил следующее.

18.05.2023 между ООО «ПРОМСТРОЙ» (подрядчиком) и АО «ЭКЗ» (заказчиком) заключен договор строительного подряда № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим договором срок выполнить ремонт кровли здания ЛБК цеха №5 АО «ЭКЗ», расположенном по адресу 

<

...> сдать результат выполненных работ заказчику.

Пунктом 2.1 договора определено, что стоимость работ по данному договору, согласно локальному сметному расчету (приложение №2) является твердой и составляет 6 540 000 (шесть миллионов пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 20% 1 090 000 рублей. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех издержек и вознаграждение подрядчика, связанных с исполнением настоящего договора.

Как следует из пункта 2.2. договора в локальном сметном расчете учитывается тендерный коэффициент, в размере 1.098255809.

Порядок оплаты:

Заказчик выплачивает подрядчику аванс в сумме 3 270 000 (три миллиона двести семьдесят тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 20% 545 000 рублей до начала производства работ, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора (пункт 2.4.1 договора).

В силу пункта 2.4.2 договора окончательный расчет: заказчик оплачивает подрядчику сумму за вычетом аванса за фактически выполненные работы после завершения работ по договору и в целом в течение 30 календарных дней со дня завершения всех работ по договору и подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) с учетом тендерного коэффициента, указанного в пункте 2.2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных подрядчиком.

В соответствии с пунктом 2.4.3 договора ежемесячно с 20 до 25 числа каждого месяца подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, который является актом приемки промежуточных работ и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

По требованию заказчика подрядчик в течение 3х календарных дней предоставляет заказчику акт сверки выполненных расчетов по выполненным работам (пункт 2.4.4 договора).

В силу пункта 3.1.1 договора промежуточная приемка работ происходит до 25 числа каждого месяца.

Как следует из пункта 3.1.8 договора по окончании выполнения работ по договору подрядчик составляет и направляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный, со своей стороны заказчик обязан рассмотреть его и в течение 10 рабочих дней подписать или отказаться от его приемки, выдав замечания. Отсутствие претензий со стороны заказчика бесспорно свидетельствует о надлежащем исполнении подрядчиком своих обязательств по договору, и работа считается выполненной и принятой заказчиком.

Общий срок выполнения работ:

начало выполнения работ - с момента оплаты аванса.

окончание работ - в течение 70 (семидесяти) календарных дней после начала работ (пункт 4.1 договора).

Сроки выполнения обязательств заказчика по настоящему договору продлеваются напериод задержки не по вине заказчика:

- сроков начала выполнения работ;

-сроков окончания выполнения работ; 

- сроков уведомления о начале приемки работ;

- сроков устранения замечаний по качеству работ и применяемых материалов.

Права и обязанности сторон, ответственность предусмотрены разделом 5 договора.

В силу пункта 7.1 договора заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в целом или в части путем направления соответствующего уведомления в следующих случаях:

- неоднократного (2 и более раз) нарушения подрядчиком своих обязательств;

- однократного срыва сроков начала или окончания работ более чем на 5 дней;

- предоставления подрядчиком недостоверных н/или искаженных данных о подрядчике на этапе преддоговорной работы и заключении договора, в том числе при выборе подрядчика по результатам проведения конкурса:

- в случае, предусмотренном в пункте 3.2.5 настоящего договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 10.1 договора).

09.03.2023 между ООО «ПРОМСТРОЙ» (подрядчиком) и АО «ЭКЗ» (заказчиком) заключен договор строительного подряда № КЗ/ПРОЧ/23/00097 (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим договором срок выполнить благоустройство въезда на автовесы «АВИОН» (инв.№ 1007709) АО «ЭКЗ», расположенном по адресу:

<

...> сдать результат выполненных работ заказчику.

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что стоимость работ по данному договору, согласно локальному сметному расчету (приложение №2) является твердой и составляет 1 380 484 рублей 80 копеек (один миллион триста восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 80 копеек), включая НДС 20% 230 080 рублей 80 копеек. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех издержек и вознаграждение подрядчика, связанных с исполнением настоящего договора.

Как следует из пункта 2.2 договора в локальном сметном расчете учитывается тендерный коэффициент, в размере 1.8687311873.

Пунктом 2.4.1 определено, что заказчик выплачивает подрядчику аванс в сумме 828 290 рублей 88 копеек (восемьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто рублей 88 копеек), включая НДС 20% 138 048 рублей 48 копеек до начала производства работ, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Окончательный расчет: заказчик оплачивает подрядчику сумму за вычетом аванса за фактически выполненные работы после завершения работ по договору в целом в течение 30 календарных дней со дня завершения всех работ по договору и подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) с учетом тендерного коэффициента, указанного в пункте 2.2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных подрядчиком (пункт 2.4.2 договора).

В соответствии с пунктом 2.4.3 договора ежемесячно с 20 до 25 числа каждого месяца подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, который является актом приемки промежуточных работ и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

По требованию заказчика подрядчик в течение 3х календарных дней предоставляет заказчику акт сверки выполненных расчетов по выполненным работам (пункт 2.4.4 договора).

В силу пункта 3.1.1 договора промежуточная приемка работ происходит до 25 числа каждого месяца.

Как следует из пункта 3.1.8 договора по окончании выполнения работ по договору подрядчик составляет и направляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный, со своей стороны заказчик обязан рассмотреть его и в течение 10 рабочих дней подписать или отказаться от его приемки, выдав замечания. Отсутствие претензий со стороны заказчика бесспорно свидетельствует о надлежащем исполнении подрядчиком своих обязательств по договору, и работа считается выполненной и принятой заказчиком.

Общий срок выполнения работ:

начало выполнения работ - с момента оплаты аванса.

окончание работ - в течение 40 (сорока) календарных дней после начала работ (пункт 4.1 договора).

Сроки выполнения обязательств заказчика по настоящему договору продлеваются на

период задержки не по вине заказчика:

- сроков начала выполнения работ;

-сроков окончания выполнения работ; 

- сроков уведомления о начале приемки работ;

- сроков устранения замечаний по качеству работ и применяемых материалов.

Права и обязанности сторон, ответственность предусмотрены разделом 5 договора.

В силу пункта 7.1 договора заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в целом или в части путем направления соответствующего уведомления в следующих случаях:

-неоднократного (2 и более раз) нарушения подрядчиком своих обязательств;

-однократного срыва сроков начала или окончания работ более чем на 5 дней;

- предоставления подрядчиком недостоверных н/или искаженных данных о подрядчике на этапе преддоговорной работы и заключении договора, в том числе при выборе подрядчика по результатам проведения конкурса:

-в случае, предусмотренном в пункте 3.2.5 настоящего договора;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 10.1 договора).

06.03.2023 между ООО «ПРОМСТРОЙ» (подрядчиком) и АО «ЭКЗ» (заказчиком) заключен договор строительного подряда № КЗ/ПРОЧ/23/00082 (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим договором срок выполнить ремонт помещений в цехе №2 (помещение ОТК, помещение под устройство комнаты для приема пищи), в цехе №3 (отдел главного технолога) АО «ЭКЗ», расположенном по адресу 

<

...> сдать результат выполненных работ заказчику.

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что стоимость работ по данному договору, согласно локальному сметному расчету (приложение №2) является твердой и составляет 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек), включая НДС 20% 683 333 рублей 33 копеек. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех издержек и вознаграждение подрядчика, связанных с исполнением настоящего договора.

В силу пункта 2.2 договора в локальном сметном расчете учитывается тендерный коэффициент, в размере 1,71837033446.

Как следует из пункта 2.4.1 договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в сумме 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) до начала производства работ, в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Окончательный расчет: заказчик оплачивает подрядчику сумму за вычетом аванса за фактически выполненные работы после завершения работ по договору в целом в течение 30 календарных дней со дня завершения всех работ по договору и подписания сторонами акта приёмки выполненных работ (форма КС-2) с учетом тендерного коэффициента, указанного в пункте 2.2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных подрядчиком (пункт 2.4.2 договора).

В соответствии с пунктом 2.4.3 договора ежемесячно с 20 до 25 числа каждого месяца подрядчик предоставляет заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, который является актом приемки промежуточных работ и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

По требованию заказчика подрядчик в течение 3х календарных дней предоставляет заказчику акт сверки выполненных расчетов по выполненным работам (пункт 2.4.4 договора).

В силу пункта 3.1.1 договора промежуточная приемка работ происходит до 25 числа каждого месяца.

Как следует из пункта 3.1.8 договора по окончании выполнения работ по договору подрядчик составляет и направляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный, со своей стороны заказчик обязан рассмотреть его и в течение 10 рабочих дней подписать или отказаться от его приемки, выдав замечания. Отсутствие претензий со стороны заказчика бесспорно свидетельствует о надлежащем исполнении подрядчиком своих обязательств по договору, и работа считается выполненной и принятой заказчиком.

Общий срок выполнения работ:

начало выполнения работ - с момента оплаты аванса.

окончание работ - в течение 100 (ста) календарных дней после начала работ (пункт 4.1 договора).

Сроки выполнения обязательств заказчика по настоящему договору продлеваются на

период задержки не по вине заказчика:

- сроков начала выполнения работ;

-сроков окончания выполнения работ; 

- сроков уведомления о начале приемки работ;

- сроков устранения замечаний по качеству работ и применяемых материалов.

Права и обязанности сторон, ответственность предусмотрены разделом 5 договора.

В силу пункта 7.1 договора заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в целом или в части путем направления соответствующего уведомления в следующих случаях:

-неоднократного (2 и более раз) нарушения подрядчиком своих обязательств;

-однократного срыва сроков начала или окончания работ более чем на 5 дней;

- предоставления подрядчиком недостоверных н/или искаженных данных о подрядчике на этапе преддоговорной работы и заключении договора, в том числе при выборе подрядчика по результатам проведения конкурса:

-в случае, предусмотренном в пункте 3.2.5 настоящего договора;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 10.1 договора).

Как следует из текста искового заявления, а также согласно пункту 4.1 договора строительного подряда от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (далее – договор № КЗ/ПРОЧ/23/00203) сторонами был определен общий срок выполнения работ - начало выполнения работ - с момента оплаты аванса; окончание работ - в течение 40 (сорока) календарных дней после начала работ (пункт 4.1 договора).

Как сообщил истец, АО «ЭКЗ» произвел оплату аванса по договору в размере 3 270 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 25.05.2023 № 7523.

 ООО «ПРОМСТРОЙ» предусмотренные договором работы не выполнило в установленные сроки, что не оспаривается ответчиком.

 Письмом от 26.09.2023 (исх. № 20/3-395) заказчик уведомил подрядчика об отказе от исполнения договора строительного подряда от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203. 

01.12.2023 между ООО «ПРОМСТРОЙ» (подрядчиком) и АО «ЭКЗ» (заказчиком) заключено соглашение об урегулировании задолженности по договорам от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082, от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097, от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 от 01.12.2023 (далее – соглашение) в соответствии с пунктом 1.3 которого в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, установленных договором № КЗ/ПРОЧ/23/00203, заказчик, руководствуясь положениями пункта 11.1 договора № КЗ/ПРОЧ/23/00203, отказался от выполнения работ, предусмотренных договором № КЗ/ПРОЧ/23/00203, о чем подрядчику было 28.09.2023 вручено уведомление (от 26.09.2023 №20/3-395). Таким образом договор № КЗ/ПРОЧ/23/00203 прекращен.

На дату прекращения договора № КЗ/ПРОЧ/23/00203 подрядчиком выполнено работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 на сумму 2 190 094 рублей 08 копеек (КС-2 №1, от 27.09.2023 № 2). Указанная сумма включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика и его вознаграждение по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 за все работы, выполненные подрядчиком по поручению заказчика (пункт 1.4 соглашения).

Как следует из пункта 1.5 соглашения у подрядчика имеется задолженность перед заказчиком в виде неотработанного аванса по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 в размере 1 079 905 рублей 92 копеек.

В силу пункта 1.6 соглашения подрядчику были начислены штрафы за нарушение обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203, а именно 20 000 рублей (претензия от 01.08.2023 №20/3-292), 20 000 рублей (претензия от 01.08.2023 №20/3-293), 20 000 рублей (претензия от 30.08.2023 №20/3-354).

Пунктом 1.7 соглашения предусмотрено, что за нарушение сроков выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 подрядчику начислена неустойка, в размере 528 117 рублей 08 копеек, которая признается подрядчиком.

Как усматривается из пункта 1.8 соглашения в период производства работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 подрядчиком нанесен ущерб имуществу заказчика, вызванный протечками атмосферных осадков в помещения заказчика при ремонте подрядчиком кровли, что подтверждается актами от 08.09.2023 № 1, от 25.09.2023 № 2. Размер причиненного ущерба имуществу заказчика составляет 842 875 рублей 20 копеек и признается подрядчиком. Ущерб устраняется силами третьего лица, привлеченного заказчиком за счет подрядчика.

Таким образом, у подрядчика имеется задолженность перед заказчиком по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 в размере 2 510 898 рублей 20 копеек, а именно:

- 1 079 905 рублей 92 копеек - неотработанный по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 аванс;

-588 117 рублей 08 копеек - неустойки и штрафы за нарушение обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203;

-842 875 рублей 20 копеек - возмещение причиненного ущерба.

В соответствии с пунктом 2.2 соглашения заказчик оплатил подрядчику аванс по договору строительного подряда от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097 (далее – договор № КЗ/ПРОЧ/23/00097) в размере 828 290 рублей 88 копеек.

Срок выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097 истек, но работы выполнены подрядчиком не в полном объеме. В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097 стороны прекращают действие договора № КЗ/ПРОЧ/23/00097 с момента заключения настоящего соглашения.

На дату прекращения договора № КЗ/ПРОЧ/23/00097 подрядчиком выполнено работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097 на сумму 1 026 709 рублей 20 копеек (КС-2 от 15.09.2023 № 1 и КС-3 от 15.09.2023 № 1). Указанная сумма включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика и его вознаграждение по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097 за все работы, выполненные подрядчиком по поручению заказчика (пункт 2.4 соглашения).

Таким образом, у заказчика имеется задолженность перед подрядчиком по оплате выполненных работ в размере 198 418 рублей 32 копеек (пункт 2.5 соглашения).

В силу пункта 2.6 соглашения за нарушение сроков выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097 подрядчику начислена неустойка, в размере 171 180 рублей 12 копеек, которая признается подрядчиком.

Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ производят зачет встречных однородных требований на сумму 171 180 рублей 12 копеек (сто семьдесят одна тысяча сто восемьдесят рублей 12 копеек), то есть обязательств заказчика по оплате окончательного платежа по договору строительного подряда от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097 в счет обязательств подрядчика по оплате неустойки по договору от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097 (пункт 2.6 настоящего соглашения) (пункт 2.7 соглашения).

С учетом произведенного сторонами зачета (пункт 2.7. настоящего соглашения) сумма, подлежащая оплате заказчиком за выполненные работы по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00097, составит 27 238 рублей 20 копеек (пункт 2.8 соглашения).

Указанная в пункте 2.8. задолженность заказчика погашается путем зачета в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ зачет встречных однородных требований на сумму 27 238 рублей 20 копеек, то есть обязательств заказчика по оплате окончательного платежа по договору строительного подряда от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097 в счет частичного погашения обязательства подрядчика по оплате неустойки по договору от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (в размере 27 238 рублей 20 копеек, пункт 1.7. настоящего соглашения) (пункт 2.9 соглашения).

В соответствии с пунктом 3.2 соглашения заказчик оплатил подрядчику аванс по договору строительного подряда от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082 (далее – договор № КЗ/ПРОЧ/23/00082) в размере 2 050 000 рублей.

Срок выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 истек, но работы выполнены подрядчиком не в полном объеме. В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 стороны прекращают действие договора № КЗ/ПРОЧ/23/00082 с момента заключения настоящего соглашения (пункт 3.3 соглашения).

В силу пункта 3.4 соглашения на дату прекращения договора № КЗ/ПРОЧ/23/00082 подрядчиком выполнено работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 на сумму 3 430 860 рублей (КС-2 от 15.09.2023 №1, №2, №3). Указанная сумма включает в себя компенсацию всех издержек подрядчика и его вознаграждение по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 за все работы, выполненные подрядчиком по поручению заказчика.

Таким образом, у заказчика имеется задолженность перед подрядчиком по оплате выполненных работ в размере 1 380 860 рублей (пункт 3.5 соглашения).

Как следует из пункта 3.6 соглашения подрядчику был начислен штрафы за нарушение обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 в размере 25 000 рублей (претензия от 29.05.2023 № 20/3-179).

За нарушение сроков выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082 подрядчику начислена неустойка, в размере 172 200 рублей, которая признается подрядчиком (пункт 3.7 соглашения).

Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации производят зачет встречных однородных требований на сумму 197 200 рублей (сто девяносто семь тысяч двести рублей 00 копеек), то есть обязательств заказчика по оплате окончательного платежа по договору строительного подряда от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082 в счет обязательств подрядчика по оплате штрафов и неустоек по договору от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082 (пункт 3.6 настоящего соглашения) (пункт 3.8 соглашения).    

С учетом произведенного сторонами зачета (пункт 3.8. настоящего соглашения) сумма, подлежащая оплате заказчиком за выполненные работы по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00082, составит 1 183 660 рублей (пункт 3.9 соглашения).

Указанная в пункте 3.9. соглашения задолженность заказчика погашается путем зачета в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации зачет встречных однородных требований на сумму 1 183 660 рублей, то есть обязательств заказчика по оплате окончательного платежа по договору строительного подряда от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082 в счет обязательств подрядчика по возмещению причиненного ущерба по договору от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (в размере 842 875 рублей 20 копеек, пункт 1.8. настоящего соглашения) и частично обязательства подрядчика по оплате неустойки по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 от 18.05.2023 (в размере 340 784 рублей 80 копеек, пункт 1.7. настоящего соглашения) (пункт 3.10 соглашения).

В соответствии с пунктом 4 соглашения с учетом всех произведенных зачетов сумма задолженности подрядчика перед заказчиком составляет 1 300 000 рублей, а именно:

-1 079 905 рублей 92 копеек - неотработанный по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 аванс (пункт 1.5. настоящего соглашения);

-60 000 рублей - штрафы за нарушение обязательств по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (претензии от 01.08.2023 №20/3-292, от 01.08.2023 №20/3-293, от 30.08.2023 № 20/3-354) (пункт 1.6. настоящего соглашения);

-160 094 рублей 08 копеек - остаток непогашенной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (п. 1.7. настоящего соглашения).

Заказчик предоставляет подрядчику отсрочку уплаты задолженности на условиях, предусмотренных настоящим соглашением.

В силу пункта 6.1 соглашения неотработанный аванс по договору от 18.05.2023№ КЗ/ПРОЧ/23/00203 в размере 1 079 905 рублей 92 копеек погашается следующими платежами:

№ п/п

Срок платежа

Сумма платежа, руб.

1

до 15.03.2024

500 000 рублей

2

до 01.05.2024

579 905 рублей 92 копеек

Штрафы за нарушение обязательств по договору от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 (претензии от 01.08.2023 №20/3-292, от 01.08.2023 №20/3-293, от 30.08.2023 № 20/3-354) в общей сумме 60 000 рублей оплачиваются подрядчиком единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего соглашения (пункт 6.2 договора).

Остаток непогашенной неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203 в размере 160 094 рублей 08 копеек оплачивается подрядчиком единовременно в срок не позднее 01.05.2024 (пункт 6.3 соглашения).

Как следует из пункта 7 соглашения в случае нарушения подрядчиком срока внесения хотя бы одного платежа, предусмотренного пунктами 6.1, 6.2, 6.3 настоящего соглашения, заказчик вправе отказаться от настоящего соглашения в части предоставления подрядчику отсрочки в одностороннем порядке. В этом случае отсрочка уплаты долга прекращается, заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты всей суммы долга целиком, принимать меры по принудительному взысканию долга в предусмотренном законом порядке, а также начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день пользования с момента подписания настоящего соглашения до полного погашения суммы долга.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами (пункт 10 соглашения).

Как указал истец, в соответствии с вышеуказанным соглашением подрядчик обязался погасить имеющуюся задолженность перед заказчиком в согласованные сроки.

В указанные в соглашении сроки, подрядчик оплату задолженности не произвел.

АО «ЭКЗ» указало, что в силу пункта 7 соглашения в случае нарушения подрядчиком срока внесения хотя бы одного платежа, предусмотренного пунктами 6.1, 6.2, 6.3 настоящего соглашения, заказчик вправе отказаться от настоящего соглашения в части предоставления подрядчику отсрочки в одностороннем порядке. В этом случае отсрочка уплаты долга прекращается, заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты всей суммы долга целиком, принимать меры по принудительному взысканию долга в предусмотренном законом порядке, а также начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день пользования с момента подписания настоящего соглашения до полного погашения суммы долга.

 Письмом от 21.03.2024 (исх. № 20/3-121) заказчик уведомил подрядчика об отказе от исполнения соглашения от 01.12.2023 об урегулировании задолженности по договорам строительного подряда от 06.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00082, от 09.03.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00097, от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203.

Таким образом по мнению истца задолженность ответчика составляет 1 079 905 руб. 92 коп. неотработанного аванса по договору строительного подряда от 18.05.2023 № КЗ/ПРОЧ/23/00203, 60 000 руб. штрафа, 160 094 руб. 08 коп. неустойки, 111 800 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2023 по 20.05.2024, а также начиная с 21.05.2024 в размере 0,05% от неоплаченной суммы задолженности за каждый день пользования по день фактической оплаты долга.

Вышеназванные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с исковым заявлением в арбитражный суд.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Проанализировав и оценив в совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд считает иск обоснованным и подлежащим частичному удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

На основании пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку (штраф, пеню). По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Требование истца об уплате неустойки и штрафа подлежит удовлетворению.

В порядке части 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

На основании пункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (статья 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из вышеназванных норм следует, что содержанием обязательства из неосновательного обогащения являются право потерпевшего требовать возврата неосновательного обогащения от обогатившегося и обязанность последнего возвратить неосновательно полученное (сбереженное) потерпевшему.

Следовательно, основанием для возникновения обязательства из неосновательного обогащения является сам факт обогащения лица за счет иного лица и, соответственно, утрата или неполучение последним имущества без легитимирующего это юридического факта, то есть основания, предусмотренного договором либо законом.

Факт получения ответчиком денежных средств, невыполнение работ в полном объеме подтверждаются материалами дела (договорами, соглашением, актами, платежными поручениями), ответчиком не оспорены и не опровергнуты. 

Доказательства возврата денежных средств в материалы дела ответчиком не представлены. 

С учетом вышеизложенного суд приходит к выводу о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения в сумме 1 079 905 руб. 92 коп.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом. 

К коммерческому кредиту применяются правила главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации о займе. 

В силу статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 12 постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации № 13/14 от 08.10.1998 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», следует, что согласно статье 823 Гражданского кодекса Российской Федерации к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг, а также предоставление денежных средств в виде аванса или предварительной оплаты. Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа (пункт 2 статьи 823 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом (в том числе суммами аванса, предварительной оплаты), являются платой за пользование денежными средствами. 

Таким образом, проценты по коммерческому кредиту являются платой за правомерное, обусловленное договором, пользование денежными средствами и отличаются от неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства, имеющей санкционный характер и применяющейся при нарушении срока исполнения денежного обязательства, ввиду чего применение положений данной нормы не может быть связано с обстоятельством, свидетельствующим о нарушении срока исполнения денежного обязательства, а включение такого условия в договор позволяет его применительно к статье 170 Гражданского кодекса Российской Федерации квалифицировать как прикрывающее соглашение о неустойке, предусмотренное статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Коммерческий кредит представляет собой плату за использование денежных средств, полученных предварительно либо сохраняемых до наступления срока платежа после получения товара, и является в экономическом смысле платой за правомерные действия по использованию финансового или материального ресурса, позволяя цену сделки разделить на постоянную, указанную в фиксированной сумме, и переменную, рассчитываемую за период правомерного пользования товарами и денежными средствами.

Неустойка вследствие своей правовой природы является финансовой санкцией за нарушение исполнения обязательства, предусмотренного договором, и подлежит квалификации в таком качестве вне зависимости от формы поименования соответствующих процентов в тексте договора, поскольку содержание правоотношений сторон устанавливается исходя из их правовой природы и действительного волеизъявления при заключении сделки.

В пункте 7 соглашения стороны определили, что в случае нарушения подрядчиком срока внесения хотя бы одного платежа, предусмотренного пунктами 6.1, 6.2, 6.3 настоящего соглашения, заказчик вправе отказаться от настоящего соглашения в части предоставления подрядчику отсрочки в одностороннем порядке. В этом случае отсрочка уплаты долга прекращается, заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты всей суммы долга целиком, принимать меры по принудительному взысканию долга в предусмотренном законом порядке, а также начислить проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день пользования с момента подписания настоящего соглашения до полного погашения суммы долга.

Плата (в виде процентов) за пользование коммерческим кредитом, указанная в настоящем пункте является мерой ответственности за нарушение договорных обязательств, а не является платой за пользование коммерческим кредитом.

Таким образом, в пункте 7 соглашения (нарушение сроков внесения платежей), устанавливающее за пользование коммерческим кредитом проценты в размере 0,05 % за каждый день пользования фактической оплаты, содержит в себе элементы санкционного характера.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем 3 пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 №13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» в тех случаях, когда в договоре займа либо в кредитном договоре установлено увеличение размера процентов в связи с просрочкой уплаты долга, размер ставки, на которую увеличена плата за пользование займом, следует считать иным размером процентов, установленных договором в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Увеличение размера процентов за пользование коммерческим кредитом в связи с просрочкой уплаты долга (пользованием коммерческим кредитом) с момента заключения соглашения является иным размером процентов.

Таким образом, размер ставки, на которую увеличена плата за пользование коммерческим кредитом, 0,05 % за каждый календарный день пользования, следует считать иным размером процентов, установленных договором в соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а указанный проценты (0,05%) следует считать как проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Источниками информации о ставках банковского процента являются официальный сайт Банка России в сети «Интернет» и официальное издание Банка России «Вестник Банка России».

Аналогичные положения содержатся в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Исходя из материалов дела, условий соглашения, представленного истцом расчета в качестве меры ответственности фактически заявлены проценты, рассчитанные на основании пункта 7 соглашения. 

Согласно позиции, изложенной в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства, в связи с чем требование истца об оплате неустойки, начисленной на сумму задолженности по день фактической оплаты долга, является правомерным.

На основании статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Суд, проверив расчет процентов, признал его арифметически неверным в части начала периода просрочки. Проценты следует исчислять, начиная с 02.12.2023 по 20.05.2024, с учетом статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 7 заключенного между сторонами соглашения. Таким образом, сумма процентов за указанный период составляет 92 331 руб. 96 коп.  

При этом гражданским законодательством Российской Федерации не предусмотрено применение двойной меры ответственности за одно и то же нарушение, в связи с чем, требование истца о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом не подлежит удовлетворению.

На основании части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. 

Доказательства оплаты задолженности в добровольном порядке ответчиком, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суду не представлены. 

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в сумме 1 079 905 руб. 92 коп., штраф в сумме 60 000 руб., неустойка в сумме 160 094 руб. 08 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 92 331 руб. 96 коп. за период с 02.12.2023 по 20.05.2024, а также начиная с 21.05.2024 в размере 0,05% от неоплаченной суммы задолженности за каждый день пользования по день фактической оплаты долга.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины пропорционально размеру удовлетворенных требований подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4, 17, 28, 65, 71, 110, 123, 167 – 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ», г. Москва, в пользу акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод», Владимирская область, г. Кольчугино, денежные средства в сумме 1 079 905 руб. 92 коп., штраф в сумме 60 000 руб., неустойку в сумме 160 094 руб. 08 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 92 331 руб. 96 коп. за период с 02.12.2023 по 20.05.2024, а также начиная с 21.05.2024 в размере 0,05% от неоплаченной суммы задолженности за каждый день пользования по день фактической оплаты долга, 26 726 руб. 06 коп. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать в порядке и сроки, предусмотренные статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ», г. Москва, в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 18 руб. 

Исполнительный лист выдать в порядке и сроки, предусмотренные статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

3. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.Г. Тихонравова