8/2023-126727(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

(Резолютивная часть)  Дело № А43-30237/2020  

г.Нижний Новгород 12 октября 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Логиновой Ирины Александровны (шифр 31-980), при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску государственного казенного учреждения Нижегородской области  «Нижегородстройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить недостатки работ, выполненных по  государственному контракту № 835, а именно: в начале вегетационного сезона (в начале мая  2024) восстановить благоустройство - растительный слой грунта с посевом многолетних трав  на площади 2 700 кв.м. на объекте: «Строительство регионального тренировочного центра в  г. Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов) - этап трамплин К 60» с выполнением  следующих мероприятий:  

- планировка участка с дальнейшей расстилкой растительного грунта толщиной не  менее 10 см. При этом растительный грунт должен иметь заведомо известные  агрохимические характеристики с необходимым содержанием питательных веществ;  

- устройство газона с учетом требований пункта 2.7 «Правил создания, охраны и  содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. МДС 13-5.2000» и  подпунктах пункта 9 «Озеленение застраиваемых территорий» СП 82.13330.2016  «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП Ш-10-75».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области АНО «Центр  экспертиз ТПП НО» (ИНН 

<

***>, 603000, 

<

...>) 90  000 руб. за проведение судебной экспертизы по настоящему делу (счет от 17.08.2023 № 635).  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нижегородстройпроект»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу АНО «Центр экспертиз ТПП НО»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 70 200 руб. расходов по оплате судебной  

экспертизы. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть  обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  

апелляционной жалобы. 

Судья И.А. Логинова