АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-12242/2023  

от 24 июня 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение месяца с даты вступления в законную  силу решения суда устранить недостатки работ по капитальному ремонту здания школы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошинская средняя  школа» по адресу: 164224, Архангельская область, Няндомский район, п/о ФИО1,  

<

...>, выполненных по муниципальному контракту от  27.02.2021 № 10, а именно:  

- устранить на участках над столярной и слесарной мастерскими, а так же над  малым спортивным залом участки складочности и вздутия наплавляемого слоя материала;  

- в местах примыканий кровли к парапетам устранить разрывы в наплавляемом  материале, установить дополнительный водоизоляционный ковер;  

- защитный фартук из тонколистного металла на парапетах соединить между  собой фальцем, устранить щели в стыках;  

- над малым спортивным залом в месте перепада высот установить карнизный  свес из тонколистового металла;  

- устранить нарушение узла примыкания наплавляемой кровли к вентилируемому  фасаду. Примыкания наплавляемого материала выполнить к несущей стене до устройства  навесного вентилируемого фасада. Примыкания гидроизоляционного ковра к  вертикальной стене выполнить на высоту не менее 300 мм от поверхности кровли  (основного водоизоляционного ковра или защитного слоя), верхнюю часть дополнительно  закрепить прижимной металлической рейкой и защитить герметиком;  

- устранить нарушение узла примыкания кровли к вертикальным стенам  вентиляционных коробов, устранить щели в местах примыкания к вертикальным  элементам конструкций, установить дополнительный водоизоляционный ковер, краевую  рейку;  

- в месте выхода на кровлю фановой трубы устранить трещины в примыкании  рулонного ковра к трубе, восстановить стальной патрубок с фланцем и герметизацию;  

- выполнить герметизацию примыкания в местах выхода на кровлю кабельных и  антенных труб (гильз), устранить дыры в гидроизоляционном ковре;  

- в местах выхода на кровлю между дверным порогом и гидроизоляционным  ковром устранить щели, оформить узел примыкания кровли к вертикальным  конструкциям будки выхода на кровлю в районе дверного порога;  

- по всему периметру фасадов между карнизной плитой и слоем утеплителя  устранить зазоры размерами до 150 мм, слой утеплителя необходимо выполнить на всю  высоту фасада;  

- оформить узел устройства примыкания металлического сайдинга к карнизной  плите, устранить щели местами до 50 мм между карнизной плитой и металлическим  сайдингом;  

- по всему периметру здания установить отсутствующие вентиляционные  решетки в облицовке фасада;  

- оформить торцевые стыки металлического сайдинга между собой, в торцовых  стыках не должно быть щелей;  

- на кровле над слесарной мастерской между металлическим сайдингом и  вентиляционной шахтой устранить щель;  

- заменить металлический сайдинг в местах примыканий фасада к кровле; 

- устранить дефекты и повреждения, следы протеканий, произвести ремонт  потолка и стен в кабинетах технологии (школьные столярная и слесарная мастерские 2  кабинета).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленные  технологии» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошинская средняя школа» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) 637 958 руб. 74 коп. штрафа, а также 31 759 руб. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.Г. Вилова