Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76101/2019

25 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  25 ноября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "СК Конструктив" 

ответчик: ООО "А Плюс Девелопмент" 

о взыскании 3 883 352,13 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 02.09.2019

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ООО "СК Конструктив" обратился в суд с иском к ответчику - ООО "А Плюс Девелопмент" о взыскании 3 530 320,12 руб. задолженности, 353 032,01 руб. неустойки, всего 3 883 352,13 руб. 

Ответчик в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что 09.06.2017 между ООО «Конструктив» и ООО «А Плюс Девелопмент» заключен договор субподряда № СМР/1151/2017 (Договор) на изготовление, окраску, доставку и монтаж металлоконструкций на Объекте строительство «ЭЛЬДОРАДО Казань», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Пестричинский муниципальный р-н, Кощаковское с/п.

Ответчик оплатил аванс в размере 8 650 000,00 руб. в рамках заключенного договора с ООО «Конструктив».

ООО «Конструктив» произвело поставку металлоконструкций и выполнило работы на общую сумму 12 180 320,12 руб.

В силу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результатов работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформлялись актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно Приложения № 3 к договору - окончательный платеж (за вычетом авансового платежа и ГУ) осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Сторонами закрывающего Акта КС-2. Под закрывающим актом согласно разделу 1 Договора понимается акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 за завершающий этап работ. Закрывающий акт подписан сторонами Договора 31.10.2017.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть произведена в срок до 10.11.2017 ООО «Конструктив» выполнило работы и поставило металлоконструкций на сумму 12 180 320,00 руб. Ответчиком произведена оплата выполненных работ в размере 8 650 000,00 руб. Задолженность по оплате составляет 3 530 320,12 руб.

Между ООО «Конструктив» и ООО «СК Конструктив» 21.01.2019 заключен договор уступки права требования, в соответствии с которым права требования к ООО «А Плюс Девелопмент» были уступлены в пользу ООО «СК Конструктив» (истец по настоящему иску).

Истец 12.02.2019 направил в адрес ООО «А Плюс Девелопмент» претензию с требованием погасить задолженность и уплатить пени. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 11.1 договора, которым предусмотрено, что за нарушение по вине заказчика сроков оплаты выполненных работ более чем на 10 рабочих дней, подрядчик вправе потребовать от заказчика уплатить пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от такой суммы. Согласно расчету размер неустойки составляет 353 032,01 руб.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 3(1) ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с ООО "А Плюс Девелопмент" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СК Конструктив" (ОГРН 

<

***>) 3 530 320,12 руб. задолженности, 353 032,01 руб. неустойки, всего 3 883 352,13 руб. а также 42 417,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.