АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Воронеж Дело №А14-21390/2024 

« 03 » февраля 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03.02.2025.

Решение изготовлено в полном объеме 03.02.2025.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,                      

при ведении протокола судебного заседания судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников процесса)

рассмотрев в судебном заседании в формате веб-конференции дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 1 248 040 руб. пени по договору №4/ЗПЭ-ЦДИ ЦВ/23/3/1 от 30.03.2023 

при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 15.11.2023, диплом, паспорт; ФИО2 – представитель, доверенность от 15.11.2023 диплом,

от ответчика: ФИО3 – представитель, доверенность от 01.01.2025, диплом, паспорт;

установил:

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (далее - ответчик) о взыскании 1 248 040 руб. пени по договору №4/ЗПЭ-ЦДИ ЦВ/23/3/1 от 30.03.2023.

От истца поступили дополнительные документы.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление и ходатайство о приобщении дополнительных документов.

На основании ст. 66, 159 АПК РФ, поступившие документы приобщаются к материалам дела.

С учётом того, что определением суда от 11.12.2024 дело назначено к судебному разбирательству, стороны не заявили возражений против рассмотрения дела в судебном заседании, суд вынес определение о завершении предварительного судебного заседания и переходе к судебному разбирательству.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 11 часов 30 минут 03.02.2025.

Из материалов дела следует, что между истцом – заказчик и ответчиком – подрядчик заключен договор №4/ЗПЭ-ЦДИ ЦВ/23/3/1 от 30.03.2023, согласно условиям которого, заказчик поручает и обязуется оплатить, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту запасных частей грузовых вагонов (пункт 1.1 договора).

Срок начала выполнения работ по настоящему договору – 1 апреля 2023. Срок окончания выполнения работ по настоящему договору – 31 декабря 2025 (пункт 1.5 договора). 

Согласно пункту 2.1 договора расценки на отдельные виды работ по ремонту, определению ремонтопригодности запасных частей и дефектоскопии запасных частей (боковых рам и надрессорных балок) тележек указаны в перечне работ по ремонту и определению ремонтопригодности запасных частей. Стоимость работ по исследованию дефектных запасных частей, погрузке/выгрузке и хранению запасных частей, неремонтопригодных запасных частей на территории ремонтных предприятий подрядчика включена в расценки на работы по ремонту и определению ремонтопригодности запасных частей. Стоимость работ по текущему, среднему ремонту колесных пар сформирована с учетом стоимости возвратных отходов в части металлической стружки.

Общая цена настоящего Договора с учетом всех расходов по ремонту и определению ремонтопригодности (включая стоимость запасных частей и расходных материалов), исследованию дефектных запасных частей, дефектоскопии, погрузке/выгрузке и хранению запасных частей и неремонтопригодных запасных частей на территории ремонтных предприятий Подрядчика и любых других расходов, которые могут возникнуть в ходе выполнения Работ, включая затраты на подачу/уборку грузовых вагонов с железнодорожных путей общего пользования на тракционные пути ремонтных предприятий Подрядчика и с тракционных путей ремонтных предприятий Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (при доставке запасных частей железнодорожным транспортом) и непредвиденные расходы, не может превышать - 820 157 987 (Восемьсот двадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей, кроме того сумма НДС (20%) – 164 031 597 (Сто шестьдесят четыре миллиона тридцать одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 40 копеек (пункт 2.2. договора).

Ссылаясь на просрочку исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, заказчик обратился к последнему с претензией №ИСХ-864/ЮВ ДИЗЭК от 12.08.2024 об уплате пени.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для предъявления заказчиком искового заявления о взыскании пени.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив все в совокупности, суд находит требования истца подлежащими частичному удовлетворению.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя из существа заявленных требований и правовой природы отношений сторон, вытекающих из договора №4/ЗПЭ-ЦДИ ЦВ/23/3/1 от 30.03.2023, к возникшему спору подлежат применению нормы Главы 37 кодекса РФ о договорах подряда и нормы Главы 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его(пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 4.1.4 договора подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту, дефектоскопированию, определению ремонтопригодности, исследованию дефектных запасных частей в течение 48 (сорока восьми) часов. Отсчет времени начинается с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками прибытия грузового вагона с запасными частями на тракционные пути ремонтного предприятия подрядчика, согласно отметке в памятке приемосдатчика формы ГУ-45, а при ввозе запасных частей автотранспортом или другим транспортом - начиная с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками прибытия запасных частей на ремонтное предприятие подрядчика. Время окончания ремонта запасных частей определяется на основании уведомления ремонтного предприятия подрядчика об окончании ремонта запасных частей, составленного по форме приложения № 10 к настоящему договору, подтвержденного представителем Заказчика (Получателя).

Согласно пункту 3.4 договора сдача подрядчиком выполненных работ и их приемка получателем производится на основании акта формы № ФПУ-26 с приложением акта приема-передачи деталей из ремонта по форме приложения № 8 к настоящему договору, памятки приемосдатчика формы ГУ-45 на грузовой вагон, в котором поступили запасные части в ремонт, памятки приемосдатчика формы ГУ-45 – при отправке отремонтированных, неремонтопригодных запасных частей грузовым вагоном, накладной формы № М-15 / акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества, в т.ч. изготовленных или отремонтированных подрядными организациями, по форме № М-35, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной учетной документации» (далее – акт формы № М-35), акта обоснования проведения среднего ремонта колесной пары по форме приложения № 5 к настоящему договору (при проведении среднего ремонта колесной паре), акта освидетельствования/выбраковки запасных частей (Приложение №9), Уведомления о времени окончания ремонта (Приложение №10).

Главой 25 ГК РФ установлено, что за нарушение гражданско-правового обязательства законом или договором может быть предусмотрен штраф.

В силу статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), т.е. определенной законом или договором денежной суммой, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно пункту 9.2 договора за нарушение подрядчиком срока выполнения работ, указанного в подпункте 4.1.4 настоящего договора, подрядчик уплачивает заказчику (получателю) пени в размере 40 (сорок) рублей за каждый час просрочки.

Истцом в доказательство просрочки ответчиком выполнения работ в материалы дела представлены акты приема передачи колесных пар в ремонт, акты приема передачи колесных пар из ремонта, уведомления об окончании ремонта колесных пар и акты о выполненных работах (оказанных услугах) с аналогичными актам приема передачи колесных пар из ремонта датами и номерами.  

Довод отзыва о соответствии даты подписания ответчиком актов приема передачи деталей в ремонт дате фактической передачи деталей не может быть принят судом, поскольку проставление даты принятия подрядчиком соответствует во всех документах дате подписания ответчиком документов в электронном виде, что не изменяет дату самого подписываемого документа. Кроме того, судом учитывается, что в части случаев электронные подписи ответчика на актах приемки деталей в ремонт, приближены к дате и времени уведомлений о завершении ремонта или находятся после дат таких уведомлений, в связи с чем, не могут быть учтены судом. Например, по пункту 4 расчета требований акт приема передачи деталей в ремонт №5034 от 05.10.2023 подписан ответчиком 09.10.2023 в 16 часов 20 минут, а уведомление об окончании ремонта датировано 09.10.2023 года 16 часов 47 минут, по пунктам 22-24 расчета требований акт приема передачи деталей в ремонт №5306 от 11.10.2023 подписан ответчиком 18.10.2023 в 08 часов 49 минут, а уведомление об окончании ремонта датировано 18.10.2023 года 09 часов 02 минуты.

Доказательств отказа в подписании актов передачи запасных частей в ремонт по причине несоответствия даты акта фактической дате передачи запасных частей в материалы дела не представлено, что противоречит позиции ответчика о несоответствии расчета телеграмме от 20.12.2024 №57241/ЦДИ.

Судом учитывается, что расчет времени нахождения запасных частей в ремонте с момента подписания акта ответчиком в электронном виде ставил бы в зависимость начало срока выполнения работ исключительно от действий последнего. 

Ответчиком заявлено ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ в отношении начисленной истцом неустойки ввиду ее несоразмерности.

В силу статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить размер неустойки.

Пунктом 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме.

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае оценивается судом с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

Согласно пунктам 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.). При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

В Определении Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 263-О указано на то, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Как следует из правового подхода, отраженного в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 № 4231/14 по делу № А40-41623/2013 правила статьи 10 ГК РФ не исключают квалификации судом в качестве злоупотребления правом требования о взыскании неустойки в той ее части, которая является очевидно чрезмерной, при установлении судом этого факта на основании возражений привлекаемого к ответственности лица.

Пунктом 10 постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 установлено, что при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Судом может быть принят во внимание материальный аспект договорной справедливости, в связи с чем сама по себе неэквивалентность во встречных предоставлениях контрагентов может послужить основанием оценки договорных условий на предмет их соответствия социальным стандартам справедливости.

Согласно статье 421 ГК РФ принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора не означает, что при заключении договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных законами.

Оценив представленные доказательства, доводы сторон в их совокупности, суд принимает во внимание отсутствие со стороны истца разумных подтверждений наличия убытков в соответствующем размере, принцип юридического равенства при начислении ответственности применительно к условиям договора об ответственности заказчика(определение Верховного суда РФ от 06.10.2016 № 305-ЭС16-7657, постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013); контррасчет ответчика.

Исходя из указанных обстоятельств, суд первой инстанции считает возможным принять доводы о явной и очевидной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в качестве оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ и уменьшить общий размер до 500 000 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований подлежит отказать.

В силу пункта 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с абзацем 3 пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81, если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21. Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 62 441 руб. Истец при обращении в суд платежным поручением № 916 от 06.11.2024 уплатил государственную пошлину в сумме 62 441 руб. 

На основании статьи 110 АПК РФ следует взыскать с ответчика в пользу истца 62 441 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 500 000 руб. пени, а также 62 441 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Г.В. Семенов