АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-28485/2023 

08.07.2024 г. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167 – 170, 174  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

принять частичный отказ от требований; 

производство по делу в части требований ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК -  ИРКУТСК ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" к АКЦИОНЕРНОМУ  ОБЩЕСТВУ "НОВЫЕ ДОРОГИ" о взыскании неустойки в сумме 100 000 рублей  прекратить,  

исковые требования в оставшейся части удовлетворить;  

обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ДОРОГИ" в течение месяца с  момента вступления решения в законную силу устранить недостатки выполненных работ  по государственному контракту № 19/РД от 20.09.2019г., возникших в период  гарантийной эксплуатации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331  «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке км 433+500 – км  444+670, Иркутская область», именно:  

в соответствии с актом № 10-в1/23 от 30 марта 2023 года: 

- разрушение дорожной одежды км 444+640 – км 444+645 слева, 20 м2.  в соответствии с актом № 10-в3/23 от 1 августа 2023 года:  

- продольные трещины, раскрытие до 3 см км 440+200 – км 440+800 ось, 600 п.м.;  

- продольные трещины, раскрытие до 3 см км 441+150 – км 441+900 ось, 750 п.м.;  - продольные трещины, раскрытие до 3 см км 442+350 – км 442+850 ось, 500 п.м.;  

в соответствии с актом № 4-п-2/23 от 30 октября 2023 года: - сетка трещин км 443+700 – км 444+000 слева, 600 м2. в соответствии с актом № 9-в1/24 от 28 марта 2024 года: - продольные трещины, раскрытие до 3 см км 433+200-км 434+00 ось, 800 п.м.; - продольные трещины, раскрытие до 3 см км 436+950-км 437+150 справа, 200 п.м.; 

- продольные трещины, раскрытие до 3 см км 439+300- км 439+600 ось, 300 п.м.;  - продольные трещины, раскрытие до 3 см км 441+750- км 441+900, 150 п.м;  

- сетка трещин км 437+010- км 437+020 слева, 40 м2, 

в случае неисполнения судебного акта взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

"НОВЫЕ ДОРОГИ" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

"УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК - ИРКУТСК  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" судебную неустойку в сумме 4 000  

рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта; 

взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВЫЕ ДОРОГИ" в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  

течение месяца после его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

Судья Н.В. Хромцова