РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

31.07.2019 года                                                           Дело № А40-61772/19-5-570

Резолютивная часть решения объявлена 14.06.2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 31.07.2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником Князевой А.В.

рассматривает в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН: 1127747229708, дата присвоения ОГРН: 10.12.2012, ИНН: 7726710571, место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Таллалихина, д. 41, стр. 8) 

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнджиниринг» (ОГРН: 5147746149293, дата присвоения ОГРН: 26.09.2014, ИНН: 7719890820, адрес: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 10, стр. 1, эт/пом. 5/15502Б) 

о взыскании 24 639 927 руб. 52 коп.

в заседании приняли участие:

от истца:  Симонов А.Г., дов. от 20.10.2018;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнджиниринг» о взыскании 22 399 934,10 руб. задолженности, 2 239 993 руб. неустойки.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, в октября 2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (далее по тексту также - ООО «СпецСтрой», Истец, Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройИнджиниринг» (далее по тексту также - ООО «СтройИнджиниринг», Ответчик, Заказчик) были заключены следующие договоры:

- Договор подряда № 23/СИ/СС на содержание дорог на Мултановском месторождении от 1 октября 2015 года; 

- Договор строительного подряда № 08 на инженерную подготовку кустовой площадки (КП) № 2 на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 10 октября 2015 года; 

- Договор строительного подряда № 18/СИ/СС на строительство подъездов к мосту через реку Липикъяха на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11 октября 2015 года; 

- Договор строительного подряда № 19/СИ/СС на строительство установки подготовки нефти (временной) УПНв на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11 октября 2015 года.

Так, согласно условиям Договора подряда № 23/СИ/СС на содержание дорог на Мултановском месторождении 1 октября 2015 года Подрядчик обязался в установленный срок и по заданию Заказчика выполнить следующие услуги: профилировать грунтовые дороги автогрейдерами; планировать площади; ремонтировать дороги; очищать дороги от снега автогрейдерами, на объектах, указанных в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для их выполнения, принять результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 3.2 Договора № 23/СИ/СС стоимость работ по настоящему Договору составляет 2 393 035,28 руб.

Сторонами к данному договору были согласованы и утверждены локальные сметы № ХМ-М-00-032, ХМ-М-02-004, ХМ-М-02-004допЗ, ХМ-М-02-004доп4, ХМ-М-03-ООЗдопЗ, ХМ-М-03-003доп4 на сумму 2 027 996,00 руб.

ООО «СпецСтрой» были выполнены работы вопреки п. 14.1.1 Договора, который предусматривает оплату аванса со стороны Заказчика, Подрядчик выполнил работы без получения аванса.

Согласно п. 14.1.2 Окончательный расчет со стороны Заказчика за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения работ. Работы были завершены и сданы Подрядчиком и приняты Заказчиком без замечаний 31.01.2016 года.

31.01.2016 Сторонами подписаны акты о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка выполненных работ и затрат за январь 2016 г. на сумму 2 027 996 руб., без замечаний.

Несмотря на принятие работ без замечаний от Заказчика в адрес Подрядчика не поступила сумма оплаты по Договору, таким образом, задолженность ООО «СтройИнджиниринг» перед ООО «СпецСтрой» по договору подряда № 23/СИ/СС от 01.10.2015 г. составляет 2 393 035,28 руб.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК на основании п. 16.2.3 за задержку оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих оплате за каждый день просрочки, но не более 10% от установленной Сметами стоимости работ, что по расчету истца, проверенному судом, составляет 239 303,53 руб.

Согласно условиям Договора строительного подряда № 08 на инженерную подготовку кустовой площадки (КП) № 2 на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 10 октября 2015 года Подрядчик обязался в установленный срок и по заданию Заказчика выполнить работы по инженерной подготовке объекта, указанного в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязался создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 3.2 стоимость работ по инженерной подготовке Объекта по настоящему Договору включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение определена на основании ЛСР и составляет 9 084 358,62 руб., в том числе НДС 18% 1 385 749,62 руб.

В дальнейшем сумма Договора была увеличена до 39 740 787,58 руб., включая НДС 18% 6 062 157,52 руб.

Сторонами к данному Договору были согласованы и утверждены локальные сметы № ХМ-М-02-006 и № ХМ-М-02-006изм на сумму 15 775 149,78 руб.

ООО «СпецСтрой» были выполнены работы вопреки п. 16.1.1 Договора, который предусматривает оплату аванса со стороны Заказчика, Подрядчик выполнил работы без получения аванса.

В соответствии с п. 16.1.2 Договора Заказчик в течении 60 календарных дней с даты приемки предусмотренных настоящим Договором работ на основании подписанного сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, предусмотренных пи.13.5 - 13.6 Договора оплачивает Подрядчику оставшуюся стоимость выполненных работ.

31.01.2016 года Сторонами подписан акт о приемке выполненных работ и  справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016, в соответствии с данным актом заказчик принял работы без замечаний по качеству на сумму без НДС – 13 368 771,00 рублей, данная сумма с учетом НДС составляет 15 775 149,78 руб.

Как указывает истец, за Заказчиком числится задолженность за оказанные работы по Договору строительного подряда № 08 на инженерную подготовку кустовой площадки (КП) № 2 на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации в сумме 15 775 149,78 руб.

В соответствии со ст. 330 ГК на основании п. 19.2.2 Договора за задержку оплаты выполненных работ устанавливается пеня в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы, что по расчету истца, проверенному судом, составляет 1 574 514,98 руб.

По условиям Договора строительного подряда № 19/СИ/СС на строительство установки подготовки нефти (временной) УПНв на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11 октября 2015 года Подрядчик обязался в установленный срок и по заданию Заказчика выполнить работы по строительству Объекта, указанного в п. 1.2 Договора (далее - Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 3.2 Договора стоимость работ по строительству Объекта по настоящему Договору определена на основании локальных смет и составляет 7 738 375,10 рублей, в том числе НДС 18% - 1 180 430,10 рублей.

Сторонами были согласованы и утверждены локальные сметы № ХМ-М-УПНв-027, № ХМ-М-УПНв-028, № ХМ-М-УПНв-029, ХМ-М-УПНв-030, ХМ-М-УПНв-031, ХМ-М-УПНв-032, ХМ-М-УПНв-ОЗЗ, ХМ-М-УПНв-034, ХМ-М-УПНв-006доп.1, ХМ-М-УПНв-012доп.1, ХМ-М-УПНв-016доп1, ХМ-М-УПНв-014доп.1, ХМ-М-УПНв-019доп1.

ООО «СпецСтрой» были выполнены работы вопреки п. 16.1.1 Договора, который предусматривает оплату аванса со стороны Заказчика, Подрядчик выполнил работы без получения аванса.

В соответствии с п. 16.1.2 Договора Заказчик в течении 60 календарных дней с даты приемки предусмотренных настоящим Договором работ на основании подписанного сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, предусмотренных пл.13.5 - 13.6 Договора оплачивает Подрядчику оставшуюся стоимость выполненных работ.

Сторонами согласована и подписана Справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 от 31.01.2016 на сумму 3 021 397,08 руб.

31.01.2016 Сторонами составлены и подписаны без замечаний Акты о приемке выполненных работ за январь 2016 года на общую сумму без НДС 2 560 506 руб., соответствующую с учетом НДС 3 021 397,08 руб.

Таким образом, с учетом того, что Акт выполненных работ был подписан сторонами 31.01.2016 года, оплата выполненных работ должна была поступить на счет Подрядчика не позднее 31 марта 2016 года.

Однако Заказчик не произвел оплату Подрядчику суммы задолженности по Договору строительного подряда № 19/СИ/СС на строительство установки подготовки нефти (временной) УПНв на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11.10.2015 в размере 3 021 397,08 руб.

Также в соответствии со ст. 330 ГК на основании п. 19.2.2 Договора за задержку оплаты выполненных работ устанавливается пеня в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы, что по расчету истца, проверенному судом, составляет 302 139,71 руб.

Согласно условиям Договора строительного подряда № 18/СИ/СС на строительство подъездов к мосту через реку Липикъяха на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11 октября 2015 года Подрядчик обязуется в установленный срок и по заданию заказчика выполнить работы по строительству Объекта, указанного в п. 1.2 Договора (далее - Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику все необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу п. 3.2 Договора стоимость работ по Договору определена на основании Локальной сметы и составляет 1 210 351,96 руб., включая НДС 184 629,96 руб.

ООО «СпецСтрой» были выполнены работы вопреки п. 16.1.1 Договора, который предусматривает оплату аванса со стороны Заказчика, Подрядчик выполнил работы без получения аванса.

Согласно п. 16.1.2 Договора Заказчик в течении 60 календарных дней с даты приемки предусмотренных настоящим Договором работ на основании подписанного Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных работ законченного строительством Объекта и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, предусмотренных пп. 13.5 - 13.6 настоящего Договора, оплачивает подрядчику оставшуюся стоимость выполненных работ.

Сторонами согласована и подписана Локальная смета № ХМ-М-01-008 на сумму 1 210 351,96 руб. Так же сторонами была подписана Справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2016 г. на сумму 1 210 351,96 руб.

31.01.2016 года сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ за январь 2016 года на сумму 1 025 722,00 рублей без учета НДС, с учетом НДС - 1 210 351,96 рублей. Данный Акт подписан без замечаний к работам со стороны Заказчика.

Таким образом, за Заказчиком числится задолженность по Договору строительного подряда № 18/СИ/СС на строительство подъездов к мосту через реку Липикъяха на Мултановском месторождении на период пробной эксплуатации от 11.10.2015 года в размере 1 210 351,96 рублей.

С учетом того, что Акт выполненных работ был подписан сторонами 31.01.2016 года, оплата выполненных работ должна была поступить на счет Подрядчика не позднее 31 марта 2016 года.

В соответствии со ст. 330 ГК на основании п. 19.2.2 за задержку оплаты выполненных работ - пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы, что по расчету истца, проверенному судом, составляет 121 035,20 руб. 

Таким образом, задолженность ответчика по договорам в общем размере составляет 22 399 934,10 руб.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Ответчик иск не оспорил, доказательств оплаты задолженности по договорам подряда № 23/СИ/СС от 01 октября 2015 года; строительного подряда № 08 от 10 октября 2015 года; строительного подряда № 18/СИ/СС от 11 октября 2015 года; строительного подряда № 19/СИ/СС от 11 октября 2015 года не представил.

Расчет неустойки, представленный истцом судом проверен, признан верным, оснований для снижения размера неустойки судом не установлен. Ответчик расчет не оспорил.

При указанных обстоятельствах исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнджиниринг» (ОГРН: 5147746149293, ИНН: 7719890820) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН: 1127747229708, ИНН: 7726710571) долг 22 399 934 (двадцать два миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 10 коп., неустойку 2 239 993 (два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот девяносто три) руб. 42 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнджиниринг» (ОГРН: 5147746149293, ИНН: 7719890820) в доход федерального бюджета Российской Федерации 146 200 (сто сорок шесть тысяч двести) руб. 00 коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

                            Е.Н. Киселева