АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-47544/2022

г. Краснодар

21 ноября 2023 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному  исковому заявлению МКУ муниципального образования Кореновский район  «Управление капитального строительства», г. Кореновск (ИНН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Архстройсервис», г. Краснодар  (ИНН 

<

***>),  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Служба единого  заказчика», г. Кореновск (ИНН 

<

***>),  

о взыскании денежных средств, перечисленных обществу в виде аванса, на  выполнение строительных работ на объекте: "Строительство "Центра единоборств в г.  Кореновске", 

<

...>" и не отработанные обществом к дате  расторжения условий муниципального контракта в одностороннем порядке в размере 10  955 194,99 руб., неустойки за нарушение безопасности производства работ и за нарушение  сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в сумме 662  124 руб.,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Архстройсервис», г. Краснодар (ИНН 

<

***>),  

к МКУ муниципального образования Кореновский район «Управление  капитального строительства», г. Кореновск (ИНН 

<

***>),  

зачесть в счет погашения аванса по муниципальному контракту №  2020.ЭА0818500000820004673 от 26 октября 2020 года стоимость фактически  выполненных ООО «Архстройсервис» работ по строительству «Центра единоборств в г.  Кореновске», расположенному по адресу: 

<

...>. 2В» отраженных в форме КС-3. справке о стоимости  выполненных и затрат № 6 от 1 июля 2021 года, на общую стоимость 5 052 097.20 (пять  миллионов пятьдесят две тысячи девяносто семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС  20%;  

- зачесть в счет погашения аванса по муниципальному контракту №  2020.ЭА0818500000820004673 от 26 октября 2020 года стоимость фактически  выполненных ООО «Архстройсервис» работ по строительству «Центра единоборств в г.  Кореновске». расположенному по адресу: 

<

...>" отраженные в форме КС-3, справке о стоимости  выполненных и затрат № 7от 09 августа 2022 года, на общую стоимость 5 903 096.40 (пять  миллионов девятьсот три тысячи девяносто шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС  20%,  

Руководствуясь статьями 9, 41, 65, 70, 82, 110, 132, 156, 163, 167-176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архстройсервис" (ИНН  

<

***>) в пользу МКУ муниципального образования Кореновский район  «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>) сумму неотработанного  аванса в размере 1,39 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере  652 124 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 552 руб., расходы  на проведение экспертизы в размере 239 000 руб.  

В удовлетворении остальной части требований - отказать. По встречному иску. В удовлетворении встречных исковых требований - отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архстройсервис" (ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере  77 776 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков