Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-6058/2024

«24»

июля

2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«15» 

июля

2024 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«24»

    июля

2024 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «СТРОЙ-ПАРТНЕР» к ООО «ГЕОИЗОЛ» о взыскании 41 857 712,69 рублей 

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: ФИО3 по доверенности

установил. 

 

            Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПАРТНЕР» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ» о взыскании основного долга в сумме 41 621 177,04 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 13.05.2024 года в сумме 236 535,65 рублей процентов на дату вынесения решения суда.

            Судом установлено.    

Требования истца (подрядчика)  обусловлены нарушением ответчиком  (заказчиком)  обязательств по оплате работ, выполненных по договору от 25.08.2022 года № 1922187379302554164000000/2673-СУБП 28-2022 на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство цехов хранения № 3 в пос. Прохладное».

В материалы дела представлены подписанные акты выполненных работ от 15.12.2022 года № 1, от 24.04.2023 года № 2, от 01.09.2023 года № 3, от 02.10.2023 года № 4, от 30.10.2023 года № 5, от 08.02.2024 года № 6, от 01.04.2024 года № 7 на общую сумму 74 894 026,34 рублей.

По объекту подписан итоговый акт приемки работ 01.04.2024 года 

При заявлении требований истцом учтена оплата работ в сумме 33 272 849 рублей в период с 20.09.2022 года по 05.03.2024 года.

Доказательств оплаты работ в полном объеме ответчиком не представлено.

Ответственность заказчика за нарушение срока оплаты работ договором не предусмотрена. 

Согласно расчету истца за период с 01.05.2024 года по 13.05.2024 года с учетом положений пункта 4.5 договора подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ в сумме236 535,65 рублей. Проценты заявлены на дату вынесения решения суда.

По состоянию на 22.07.2024 года размер процентов составляет 1 346 433,71 рублей.

Требования истца  в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 395 ГК РФ, положений договора от 25.08.2022 года. 

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПАРТНЕР» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 41 621 177,04 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 15.07.2024 года в сумме 1 346 433,71 рублей, расходы по госпошлине в сумме 200 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                               О.Н.Шкутко