Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-3277/2025

21 октября 2025 г.

г. Ханты-Мансийск

 Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2025 г.  

Полный текст решения изготовлен 21 октября 2025 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бабаевой О.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес 628672, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) об обязании концессионера исполнять обязательства по концессионному соглашению,  

третьи лица Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью "Лангепасские коммунальные системы" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Департамент Жилищно-Коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Северо-Уральское Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Администрация города Лангепаса (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ОГРН 

<

***>), при участии представителей сторон:  

от истца – ФИО1 по доверенности от 05.05.2025, от ответчика – ФИО2 по доверенности от 18.11.2021,  

от общества с ограниченной ответственностью "Лангепасские коммунальные системы" – ФИО3 по доверенности от 15.04.2025,  

от иных лиц - не явились, 

установил:

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса (далее – истец, КУМИ) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" (далее - ответчик, ООО "Концесском") об обязании исполнять обязательства по концессионному соглашению от 02.10.2015:  

-в соответствии с пунктом 1.1, в отношении недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения, путем: реконструкции сетей теплоснабжения на трубы в ППУ изоляции с системой ОДК; реконструкции источника теплоэнергии (котельной № 1 и котельной № 5); выполнение проектно-сметной документации на 2 котла ДЕ-25; замены изношенных 2-х котлов КВ-ГМ-116,3-150 котельной № 1 (КВГМ 100) на новые 2 котла КВ-ГМ-116,3-150; реконструкции котельной № 5 (ДЕ-25) с заменой изношенных 2-х паровых котлов на 2 новых паровых котла ТТ 200-5000 и 3 водогрейных котла, модернизации существующей деарационной колонки и установки резервного деаэратора ДА-100; замены емкостей подпиточной воды, V-500 мЗ; замены насосов исходной и подпиточной воды на новые высокоэффективные насосы; реконструкции и модернизации энергохозяйства с внедрением частотного привода на сетевых насосах; установки автоматизированной системы управления технологическими процессами котельной; установки приборов учета на источниках тепловой энергии; установки приборов учета потребляемого газа на источниках; модернизации газо- распредеделительного устройства котельных (ГРУ) и автоматизацию процесса регулирования, реконструкции и автоматизации существующей системы ХВО, реконструкции трубопровода противопожарного водоснабжения котельных Ду-300мм, замены емкостей противопожарного запаса воды, V-1000 м3, замены насосов исходной  

и подпиточной воды на новые высокоэффективные насосы, ликвидации котельной № 2; реконструкции и технического перевооружения ЦТП-1;  

-в соответствии с п. 1.1, осуществлять горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.  

К участию в деле в качестве третьих лиц в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечены Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (УФАС по ХМАО-Югре), общество с ограниченной ответственностью "Лангепасские коммунальные системы" (ООО "ЛКС"), Департамент Жилищно-Коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент ЖКК), Северо-Уральское Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Управление), Администрация города Лангепаса (Администрация), Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса" (ЛГ МУП УК ЖКК), Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Прокуратура ХМАО-Югры), Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ по ХМАО-Югре), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр) .  

В отзывах ответчик, ООО "ЛКС" возражали против удовлетворения иска по изложенным в них основаниям.  

Иные участники процесса представили пояснения по доводам сторон, поддержав позицию истца.  

Заслушав представителей, изучив доводы участвующих в деле лиц, суд установил следующее.  

Как следует из материалов дела, 02.10.2015 Администраций лице истца, ответчиком и Лангепасским городским муниципальным предприятием "Тепловодоканал" (ИНН 

<

***>, деятельность прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ЛГ МУП "УК ЖКК") (на стороне истца в части обязательств по передаче имущественного комплекса теплоснабжения) было заключено концессионной соглашение (далее - соглашение, концессионное соглашение), в соответствии с условиями которого ответчик (концессионер) обязался за свой счет, в порядке и на условиях заключенного соглашения обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II соглашения,  

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать истцу (концеденту); осуществлять горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта соглашения и иного имущества, а истец обязался представить ответчику на срок, установленный настоящим соглашением, права владения и пользования объектом соглашения, иным имуществом для осуществления указанной деятельности.  

При заключении соглашения стороны согласовали, в том числе, условия о предмете (раздел 2), сроки (раздел 3), условия по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта соглашения и эксплуатации объекта соглашения и иного имущества (раздел 5), условия о прекращении соглашения (раздел 14).  

Согласно пункту 2.1. соглашения объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Лангепас, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. соглашения.  

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2045 года (пункт 3.1 раздела 3 соглашения), т.е. соглашение заключено на 30 лет.  

В соответствии с пунктом 3.4. концессионного соглашения, срок создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта соглашения определяются приложением № 5 к концессионному соглашению.  

По условиям пункта 5.18 соглашения концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта соглашения в объемах и формах, которые приведены в приложении № 5 к соглашению, а именно: реконструкцию сетей теплоснабжения на трубы в ППУ изоляции с системой ОДК; произвести замену изношенных 3-х котлов КВ-ГМ-116,3-150 котельной № 1 (КВГМ-100) на новые 3 котла КВ-ГМ-116,3-150; реконструкцию котельной № 5 (ДЕ-25) с заменой изношенных 2-х паровых котлов на 2 новых паровых котла ТТ 200-5000 и 3 водогрейных котла; модернизацию существующей деаэрационной колонки и установка резервного деаэратора ДА; произвести замену емкостей подпиточной воды, V-500 мЗ; произвести замену насосов исходной и подпиточной воды на новые высокоэффективные насосы; реконструкцию и модернизацию энергохозяйства с внедрением частотного привода на сетевых насосах; произвести установку автоматизированной системы управления технологическими процессами котельной; произвести установку приборов учета на источниках тепловой энергии; произвести установку приборов учета потребляемого газа на источниках; модернизацию газо-распределительного устройства котельных (ГРУ) и автоматизацию процесса регулирования; реконструкцию и автоматизацию  

существующей системы ХВО; реконструкцию трубопровода противопожарного водоснабжения котельных Ду-300мм; произвести замену емкостей противопожарного запаса воды, V-1000 м3; произвести устройство периметрального ограждения с установкой системы видеонаблюдения котельной; реконструкцию кровли и фасада здания котельных КВГМ-100, ДЕ-25; реконструкцию и техническое перевооружение 2-х централизованных теплопунктов для обеспечения ЦТП-1 и ЦТП-4а мкр.  

Как следует из содержания приложения № 5 к соглашению установленная мощность котельных КОС и № 5 изменяется вследствие замены энергетического оборудования и котлов, выработавших свой эксплуатационный срок, на новые, меньшей мощности для более эффективной загрузки оборудования. Котельная № 2 ликвидируется.  

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Лангепас, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения (31.12.2045) определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.  

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи: обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры; минимизация потерь энергетических ресурсов на стадиях их производства и транспортировки.  

Планируемые результаты: обеспечение сохранности коммунальной инфраструктуры; увеличение доли отремонтированных инженерных коммуникаций; создание благоприятных условий проживания жителей МО ГО г. Лангепас.  

В соответствии с пунктом 5.19. соглашения (в редакции дополнительных соглашений от 01.03.2019 № 1, от 12.10.2020 № 2) предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия соглашения концессионером, равен 679,843 млн. руб.  

Истец указал, что с учетом выполненных за весь период действия соглашения ответчиком инвестиционных обязательств по созданию и реконструкции объектов имущества в составе соглашения, объем вложенных инвестиций по соглашению составил 127,062 млн. руб.  

Ответчиком не исполнены обязательства концессионера на сумму 552,781 млн. руб. 

В соответствии с пунктом 5.32 соглашения концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. соглашения, без согласия  

концедента, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

24.01.2025 в адрес ответчика была направлена претензия с требованием исполнить соглашение в полном объеме.  

29.01.2025 от ответчика поступил ответ об отказе от исполнения соглашения в связи с передачей прав и обязанностей по концессионному соглашению выделенному в процессе реорганизации ответчика обществу с ограниченной ответственностью "Лангепасские коммунальные системы" (по передаточному акту (разделительному балансу)).  

Отказ в исполнении концессионного соглашения послужил основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Закон № 115-ФЗ) его целями являются привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.  

Согласно части 3 статьи 3 Закона № 115-ФЗ по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.  

Согласно статье 4 Закона № 115-ФЗ объектами концессионного соглашения являются, в том числе: объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем; объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства, не указанные в пункте 11 настоящей части, в том числе объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем..  

В силу части 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ при исполнении концессионного соглашения концессионер обязан, в том числе, осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации);  

использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона; обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг; предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением.  

Положением части 3 статьи 8 Закона № 115-ФЗ предусмотрено, что при исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также иными способами, предусмотренными законом.  

Абзацем седьмым статьи 12 ГК РФ предусмотрена защита гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, что означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.  

Статьей 308.3 ГК РФ предусмотрено право кредитора в случае неисполнения должником обязательства требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7) даны разъяснения о том, что при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.  

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.  

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.  

В данном случае истец предъявил требование о понуждении ответчика к исполнению обязательств по концессионному соглашению путем проведения мероприятий, предусмотренных приложением № 5 концессионного соглашения. Истец также полагает, что в отсутствие его согласия на замену стороны в концессионном соглашении ответчик не вправе был передавать права и обязанности по соглашению ООО "ЛКС".  

Ответчик факт неисполнения условий концессионного соглашения не оспаривает, ссылаясь на произошедшую реорганизацию ООО "Концесском" в форме выделения из него ООО "ЛКС", с передачей последнему всех прав и обязанностей по концессионному соглашению на основании передаточного акта.  

ООО "ЛКС" в ходе рассмотрения спора заявило о том, что им обязательства по концессионному соглашению приняты в соответствии с передаточным актом и исполняются.  

ООО "Концесском" и ООО "ЛКС" полагают, что Законом № 115-ФЗ не установлен запрет на перемену лиц по концессионному соглашению без согласия концедента при переходе прав и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу.  

Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.  

Согласно статье 58 ГК РФ при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 115-ФЗ переход прав и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям  

к концессионеру, установленным настоящим Федеральным законом, а в случае заключения концессионного соглашения по итогам конкурса, также требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.  

Доказательств соответствия ООО "ЛКС" условиям Закона № 115-ФЗ, конкурсной документации документы дела не содержат.  

Помимо общих требований к концессионеру, определенных в пункте 1.9. статьи 5 Закона № 115-ФЗ концессионер подтверждает возможность достижения участником конкурса значений критериев конкурса, указанным в конкурсном предложении.  

Конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения утверждена Постановлением Администрации города Лангепаса от 30.06.2015 № 1134.  

В соответствии с разделами 5.2.2. конкурсной документации (приложения № 2, № 3 к Постановлением Администрации города Лангепаса от 30.06.2015 № 1134, перечень документов, представляемых участниками конкурса), определено, что составе документов предоставляются документы и материалы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев конкурса, указанным в конкурсном предложении.  

Приложением 1 к конкурсной документации является проект концессионного соглашения, на условиях которого соглашение заключено.  

В соответствии с пунктом 1.1. концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим соглашением: обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект соглашения (далее – объекты имущества, в составе объекта соглашения), состав и описание которого приведены в II настоящего соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту; осуществлять горячее водоснабжение; производство, передачу, распределение тепловой энергии, с использованием объекта соглашения и иного имущества, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный настоящим соглашением, права владения и пользования объектом соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.  

В соответствии с пунктом 5.1. соглашения концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности: а) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; б) на стадии строительства и реконструкции –  

выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе объекта соглашения; в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе объекта соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе объекта соглашения; г) на стадии эксплуатации– поддерживает объект соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание объекта соглашения.  

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ при исполнении концессионного соглашения концессионер обязан осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации); использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также положениями иных нормативных правовых актов; обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг; предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением; осуществлять за свой счет техническое обслуживание объекта концессионного соглашения, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением;  

В разделе 1, 5 концессионного соглашения определено, что концессионер выполняет обязательства по концессионному соглашению за счет собственных средств.  

Каких-либо доказательств возможности исполнения обязанностей, определенных частью 2 стати 8 Закона № 115-ФЗ, а также концессионным соглашением вновь созданным юридическим лицом (ООО "ЛКС") документы дела не содержат.  

В связи с чем суд приходит к выводу о несоответствии ООО "ЛКС" требованиям Закона № 115-ФЗ, а также конкурсной документации к конкурсу, по итогам которого было заключено концессионное соглашение.  

При изложенных обстоятельствах принятие ответчиком решения о передаче прав и обязанностей по концессионному соглашению (решение об утверждении передаточного  

акта (разделительного баланса) от 08.11.2024, передаточный акт от 31.10.2024, между ответчиком и ООО "ЛКС") не освобождает ответчика от исполнения обязательств по концессионному соглашению, не порождает правовых последствий для сторон концессионного соглашения. связанных с подписанием между ответчиком и ООО "ЛКС" передаточного акта.  

Суд принимает во внимание существенную публичную, экономическую и социальную значимость объектов концессионного соглашения. Передача прав и обязанностей ответчиком по концессионному соглашению лицу, не имеющему возможности исполнения обязанностей, определенных соглашением, может повлечь дестабилизацию деятельности коммунальной отрасли в городе Лангепасе.  

Требования истца обоснованы и доказаны, подлежат удовлетворению. 

С учетом изложенного, иные доводы участвующих в деле лиц правового значения для рассмотрения дел не имеют, подлежат отклонению.  

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ответчика, как на лицо не в пользу которого принят судебный акт. Так как истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" исполнять обязательства по концессионному соглашению от 02.10.2015, в соответствии с пунктом 1.1, в отношении недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II Соглашения, путем: реконструкции сетей теплоснабжения на трубы в ППУ изоляции с системой ОДК; реконструкции источника теплоэнергии (котельной № 1 и котельной № 5); выполнение проектно-сметной документации на 2 котла ДЕ-25; замены изношенных 2-х котлов КВ-ГМ-116,3-150 котельной № 1 (КВГМ 100) на новые 2 котла КВ-ГМ-116,3-150; реконструкции котельной № 5 (ДЕ-25) с заменой изношенных 2-х паровых котлов на 2 новых паровых котла ТТ 200-5000 и 3 водогрейных котла, модернизации существующей деарационной колонки и установки резервного деаэратора ДА-100; замены емкостей подпиточной воды, V-500  

мЗ; замены насосов исходной и подпиточной воды на новые высокоэффективные насосы; реконструкции и модернизации энергохозяйства с внедрением частотного привода на сетевых насосах; установки автоматизированной системы управления технологическими процессами котельной; установки приборов учета на источниках тепловой энергии; установки приборов учета потребляемого газа на источниках; модернизации газо- распредеделительного устройства котельных (ГРУ) и автоматизацию процесса регулирования, реконструкции и автоматизации существующей системы ХВО, реконструкции трубопровода противопожарного водоснабжения котельных Ду-300мм, замены емкостей противопожарного запаса воды, V-1000 м3, замены насосов исходной и подпиточной воды на новые высокоэффективные насосы, ликвидации котельной № 2; реконструкции и технического перевооружения ЦТП-1.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания", исполнять обязательства по концессионному соглашению от 02.10.2015, в соответствии с п. 1.1, осуществлять горячее водоснабжение, производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 50 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Судья С.Г. Касумова