Дело № А43-23809/2022

г. Владимир

23 января 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17.01.2023.

Постановление

 в полном объеме изготовлено  23.01.2023.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Новиковой Е.А.,

судей    Протасова Ю.В., Фединской Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» 

на решение Арбитражного суда Нижегородской области 

от 19.10.2022 по делу № А43-23809/2022, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Никс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению обязательств по договору,

при участии представителя

от истца: ФИО2, доверенность от 12.11.2022, удостоверение адвоката, 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Никс» (далее – ООО «Никс», истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ответчик) об обязании в течение 10 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу исполнить обязательства, принятые по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.10.2020 № 521057911 и техническим условиям № 21/2511С-81 по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ООО «Никс» объекта, расположенного по адресу: ул. Светлоярская, д. 25А, 

<

...> 565 руб. договорной неустойки, начисленной с 15.06.2021 по 14.06.2022, 10 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Решением от 19.10.2022 суд частично удовлетворил исковые требования: обязал ПАО «Россети Центр и Приволжье» в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу исполнить обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.10.2020 № 521057911 и техническим условиям № 21/25-11С-81 по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ООО «Никс» объекта; взыскал с ответчика в пользу истца 101 565 руб. 62 коп. неустойки; в случае неисполнения решения суда в установленный срок в части исполнения обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.10.2020 № 521057911 и техническим условиям № 21/25-11С-81 по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ООО «Никс» объекта, взыскал с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ООО «Никс» 1000 руб. неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства до дня фактического исполнения решения суда (уменьшив размер на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Не согласившись с принятым судебным актом в части, обязывающей его в течение 10 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу выполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.10.2020 № 521057911 и технических условий № 21/25-11С-81 по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ООО «Никс» объекта, ПАО «Россети Центр и Приволжье» обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в обжалуемой части и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование своих возражений заявитель жалобы указал на нарушение срока исполнения выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ООО «Никс», поскольку уведомление об исполнении им его обязательств направлено в адрес ПАО «Россети Центр и Приволжье» лишь 25.07.2022. Поскольку выполнение технологического присоединения становится возможным при условии выполнения обязательств со стороны истца, то ПАО «Россети Центр и Приволжье» считает неразумным срок для исполнения обязательств по договору в течение 10 календарных дней с момента вступления решения в законную силу. Истцом не предоставлены доказательства выполнения им мероприятий по технологическому присоединению до 06.04.2021. Кроме того, в процессе выполнения обязательств сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, возникли сложности в связи с осуществлением строительно-монтажных работ, обусловленные особенностями технического решения по строительству двух ЛЭП 6кВ от новой ТП 6/0,4Кв до границ земельного участка заявителя. Заявитель жалобы отметил принятие всех необходимых и зависящих от него мер для исполнения обязательств. Вместе с тем объем работ является значительным, а ПАО «Россети Центр и Приволжье» занимается только обслуживанием объектов электросетевого хозяйства, строительством объектов занимаются подрядные организации, в связи с чем срок для исполнения обязательств по договору в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу является неразумным. 

Подробно доводы ПАО «Россети Центр и Приволжье» изложены в апелляционной жалобе от 07.11.2022.

ООО «Никс» в отзыве от 07.12.2022 и его представитель в судебном заседании указали на отсутствие оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие представителя данного лица.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о дате, времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Первого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.1aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным в статье 121 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Лица, участвующие в деле, не заявили возражений, в связи с чем суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.

Законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 257 – 262, 265, 266, 2687, 269, 270 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.

Повторно оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя, Первый арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (в настоящее время ПАО «Россети Центр и Приволжье», сетевая организация) и ООО «Никс» (заявитель) заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06.10.2020 № 521057911 (далее – договор), в силу пункта 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) ВРУ заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 149 кВт;

категория надежности третья;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 2 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения магазина, расположенного по адресу: ул. Светлоярская, д. 25А, г. Н.Новгород (пункт 3 договора).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия) (пункт 4 договора).

Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения договора (пункт 5 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (пункт 17 договора).

Срок действия технических условий № 21/25-11С-81, которые являются неотъемлемой частью договора, составляет два года со дня заключения договора (пункт 12 технических условий).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 111 304 руб. 79 коп. (в том числе НДС) (пункт 12 договора).

Неосуществление ответчиком фактического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям послужило основанием для обращения ООО «Никс» с соответствующим требованием в арбитражный суд.

В соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

На основании пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

В пункте 7 Правил № 861 установлена процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) – 18(4) настоящих Правил не требуется;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»).

В силу пункта 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил № 861).

В пункте 6 договора стороны согласовали, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора, то есть до 06.04.2021.

В Технических условиях № 21/25-11С-81 стороны предусмотрели мероприятия, которые обязана выполнить сетевая организация. 

Фактическое присоединение объектов истца к электрическим сетям ответчик в установленный договором срок не осуществил. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и обстоятельства дела по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выполнению заявленных в иске мероприятий в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Доводы заявителя жалобы о принятии всех необходимых мер для исполнения своих обязательств и неразумности срока для исполнения обязательств по договору в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу, судом апелляционной инстанции проверены и отклоняются, поскольку договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям подписан более двух лет назад, однако до настоящего времени обязательства со стороны ответчика не выполнены. Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств суд апелляционной инстанции соглашается с обжалуемым выводом суда первой инстанции и полагает, что предоставленный срок – в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, является разумным, обоснованным и направлен на недопущение злоупотребления правами сторонами договора, то есть является сбалансированным.

В остальной части судебный акт не обжалуется, в связи с чем в соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ судом апелляционной инстанции не проверяется.

Все доводы и аргументы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта.

Доказательства и доводы, согласно которым у суда апелляционной инстанции возникли бы основания для переоценки выводов суда первой инстанции, в материалах дела отсутствуют и заявителем жалобы не приведено. 

Судебный акт первой инстанции принят при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, нормы процессуального и материального права применены судом верно, с учетом конкретных обстоятельств дела, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, судом первой инстанции не нарушено единообразие в толковании и применении норм права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.10.2022 по делу № А4323809/2022 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд ВолгоВятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Нижегородской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 – 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд ВолгоВятского округа.

 

Председательствующий судья

Е.А. Новикова

Судьи

Ю.В. Протасов

 

Е.Н. Фединская